등록번호

치수과-2228

주무관

치수팀장

치수과장

안전건설국장

부구청장

구청장

등록일자

2023.2.21.

김환

정기찬

代전하현

김태중

진경식

02/22

이성헌

결재일자

2023.2.22.

공개구분

대시민공개

협  조

하수팀장

전하현

수변감성하천팀장

방대환

기전팀장

이경호

2023년 수해안전대책 관련

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행 계획

서 대 문 구

치 수 과

2023년 수해안전대책 관련

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행 계획

2023년 우기대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검을 시행하고 적출사항에 대한 보완·개선으로 수해대비에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□「자연재해대책법 시행령」제2조 제2항 1호

○ 풍수해에 의한 재해발생 우려 시설·지역 : 매년 3~5월 중 1회 이상 점검

□ ＇23년 수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획【치수안전과-3167 (23.02.15.)】

Ⅱ		점검기간 및 대상

□ 점검기간 :  ’23. 2. 27(월) ~ 4. 28(금)

○ 1차 점검 :  2023. 2. 27. ~ 3. 24.

○ 2차 점검 :  2023. 4.  3. ~ 4. 21.

※ 區, 재난안전대책본부 운영(풍수해) : 2023. 5. 15. ~ 10. 15.

□ 점검대상

○ 하천 및 수방시설물

- 하천 2개소(홍제천 6.12km, 불광천 1.54km), 간이펌프장 1개소

- 하수관로, 빗물받이, 맨홀, 수방관측장비, 재난예경보시설 등

〔하수시설물 현황〕

하수관 연장(m)					맨홀 (개소)	빗물받이 (개소)
계	하수관	암 거	개 거	U형 측구
326,122	294,353	27,748	533	3,488	8,975	14,620

○ 풍수해 취약시설 및 지역

- 민간 공사장 : 재개발․재건축, 대형건축공사장 및 장기공사중단 현장 등

- 공공 공사장 : 도로, 교량, 상하수도 등

- 사 면 시 설 : 옹벽, 축대, 절개지, 급경사지, 산사태․낙석 우려지역 등

- 지 하 시 설 : 지하도로, 지하차도, 지하철, 지하상가, 공동구 등

- 돌 출 시 설 : 대형입간판, 돌출간판, 철탑, 각종 표지판 등

Ⅲ		분야별 점검대상 및 점검내용

구 분	분 야	점검대상	점검내용	관련부서
하 천 및 수 방 시설물	하 천	홍제천, 불광천	- 하천 및 제방시설	치 수 과
	수 방 시설물	간이빗물펌프장 재난 예ㆍ경보시스템 하수시설물(하수관, 맨홀)	- 펌프장 가동가능 여부 시운전, 재난예․경보 시스템 작동여부 - 하수시설물 정비상태 등	치 수 과
풍 수 해 취약시설 및 지 역	민 간 공사장	재개발, 재건축, 대형 건축공사장 및 장기 공사중단 현장 등	- 공사장 내 타워크레인 현황파악, 안전점검 정비여부 등 - 옹벽, 축대, 절개지, 산사태, 낙석 보호 등 - 수방자재, 장비 확보 및 비상연락망 구축 등	주거정비과 신통개발과 주 택 과 도시계획과 건 축 과
	공 공 공사장	도로, 교량, 하천, 하수관거 등	- 가배수로, 침사지, 집수정 설치 등 - 옹벽, 축대, 절개지, 산사태, 낙석 방지 등 - 수방자재, 장비 확보 및 비상연락망 구축 등	도 로 과 치 수 과 푸른도시과 건 축 과
	기존사면 시 설	옹벽, 축대, 절개지, 산사태․낙석 우려지역 등	- 토사유출, 낙석방지, 균열여부 및 안전휀스 설치여부 등	주거정비과 신통개발과 주 택 과 도시계획과 건 축 과 도 로 과 푸른도시과
	지하시설	지하차도, 지하보도	- 배수로 및 집수정 청소, 펌프가동, 월류 방지턱, 모래주머니 비치여부 등	도 로 과
	유수장애시 설	하천 및 하수관거 내 퇴적물 등 상류 지역 수해유발 적치물	- 하수시설물 내 토사퇴적 등 유수소통 지장 여부 등	치 수 과
	돌출시설	대형입간판, 돌출간판 철탑, 각종 표지판 등	- 각종 시설물의 안전여부 등	도시경관과
	소 형 수방시설	침수방지시설(수중펌프, 역류방지밸브, 차수판)	- 정상 작동여부	치 수 과 건 축 과

※ 그 외 추가 점검대상 시설은 소관부서에서 자체적으로 판단

Ⅳ		점검 및 정비계획

〔1차 점검 및 정비〕

○ 점검기간 : 2023. 2. 27. ~ 3. 24.

○ 점 검 자 : 대상시설물 담당부서장 주관

○ 조치계획

- 담담부서 주관, 전문가와 대상파악 및 점검·정비

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비 조치

〔2차 점검 및 정비〕

○ 점검기간 : 2023. 4. 3. ~ 4. 21.

○ 점 검 자 : 대상시설물 담당국장 주관

▶ 1차 점검 미조치 사항 위주로 시행

○ 조치계획

- ＇23. 4. 28.까지 1․2차 점검 시 지적사항 전체 정비완료

▶ 우기 전 정비 곤란할 경우 별도 정비대책 수립 시행

〔추진절차〕

점검계획 수립 및 대상파악 제출 (2.27까지)		1차 점검 시행 (2.27~3.24)		지적사항 보완조치 (3.24.까지)		조치결과 제출 (3.27까지)
관련부서 → 치수과		점검책임자(부서장)				관련부서 → 치수과
2차 집중점검 시행 (4.3~4.21)		지적사항 정비완료 (4.28까지)		조치결과 제출 (5.1까지)
		점검책임자(소관국장)		관련부서 → 치수과

※ 주요시설은 서울시 합동점검 시행 (대상시설물 추후 통보)

Ⅴ		행정사항

□ 점검대상 및 조치결과 제출

○ 점검계획 수립 및 점검대상 제출                      : 2023. 2. 27.(월)

○ 1차 점검 지적사항 및 조치결과 제출                  : 2023. 3. 27.(월)

○ 2차 점검 지적사항 및 조치결과 제출                  : 2023. 5.  1.(월)

□ 중대한 위험사항 적출 시 치수과 통보 및 대책마련

○ 구조적 균열, 붕괴, 전도 등의 징후가 발견된 경우 긴급조치 및 대책수립

▶ 필요시 긴급 재원 확보 등으로 우기 전까지 완료될 수 있도록 조치

붙 임 : 1. 서울시 방침서 1부.

2. 점검대상 제출서식 1부.

3. 점검 및 조치결과 제출서식 1부.  끝.