용 역 설 명 서

□ 용역명: 강북중학교 앞 우이천 제방 석면조경석 철거공사 지정폐기물(폐석면) 처리·운반 용역

□ 목  적: 강북중학교 앞 우이천 제방 석면 함유 조경석 철거공사 현장에서 발생되는 지정폐기물(폐석면)을 폐기물관리법시행령 제7조 제1항에 따라 적법한 처리에 철저를 기하고자 함.

□ 용역개요

용 역 명	설계물량(톤)	비고
	지정폐기물(폐석면)
강북중학교 앞 우이천 제방 석면조경석 철거공사 지정폐기물(폐석면) 처리·운반 용역	543.78

□ 설계변경조건

○ 다음과 같은 경우 설계변경 할 수 있다.

- 본 용역은 조사당시 수집된 자료에 따라 설계된 것으로 착공 후 변경사항이 발생되었을 때에는 현장에 맞게 변경할 수 있다.

- 물량의 변경이 있을 때

- 발주처에서 필요하다고 인정할 때

- 설계변경 발생 시 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

□ 공사(용역)기간

○ 본 용역은 2023. 5월 ~ 11월(착수일로부터 180일)까지로 하고, 다음의 경우에는 그 기간을 변경할 수 있다.

- 용역 시행 중 천재지변으로 인하여 작업이 불가하였을 경우

- 시행청의 지시에 의거 작업을 중단하였을 경우

□ 예정 공정표

공 종	수량	5월		6월	7월	8월	9월	10월	11월
		2023.05. ~ 11.(착수일로부터 180일까지)
지정폐기물 운반 및 처리	554톤

□ 기 타

- 본 용역 물량은 예정 수량으로 물량이 변경될 수 있음.