문서번호	건강체육과-12308
결재일자	2023. 04. 19
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		체육시설팀장		건강체육과장	문화관광국장
최재성		정우영		代김은영	전결 04/19
					임근래
협조

[ 사직동 '종로문화체육센터' ]

승객용 승강기 교체·설치 추진계획

문화관광국

건강체육과

[ 사직동 '종로문화체육센터' ]

승객용 승강기 교체·설치 추진계획

관내 공공체육시설인 '종로문화체육센터' 내 승객용 승강기가 설치 후 15년 이상되어 노후에 따른 잦은 고장 민원이 발생하고 「승강기안전관리법」 개정에 따라 추가 안전장치 의무화로 비용 발생이 수반되기에 이를 신규 교체·설치하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률」제4조(국가와 지방자치단체 등의 의무)

「서울특별시 종로구 체육시설의 설치 및 운영 조례」

「승강기 안전관리법」및「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」외

2		추진개요

대    상 : 종로문화체육센터(관내 공공체육시설)

기    간 : 2023. 4. ~ 9.

내    용 : 시설내 승객용 승강기 신규 교체·설치 추진

방    법 : 나라장터 종합쇼핑몰 구매(다수공급자 공급 계약 예정)

3		시설현황

일반현황

○ 시 설 명 : 종로문화체육센터(위치 : 종로구 인왕산로1길 21)

○ 규    모 : 지상3층 ~ 지하2층, 연면적 6,756.14㎡

○ 주요기능 : 수영장, 헬스장, 공연장, 다목적체육관, 문화·음악·블럭교실 등

○ 운영주체 : 종로구(종로구시설관리공단 권한 위임 위탁 운영)

○ 2023년 세입/세출예산 : (세입) 1,584백만원, (세출) 3,505백만원

승강기 현황

구분	설치년월	호기 (설치장소)	승강기 고유번호	형식	운행층수	적재하중 (kg)	비고
승객용	2006. 12.	1 (체육동)	0000-410	권상식	5 (지상3, 지하2)	1,150	내용연수 : 15년 (부품별 상이)
화물용	2006. 12.	2 (공연동)	0000-411	권상식	3 (지상1, 지하2)	750

4		세부계획

추진사유

○ 승강기 내용연수 (부품 대부분) 경과로 잦은 고장민원 발생, 안전사고 발생 위험

○「승강기안전관리법」 개정(‘19.3.28.) 강화에 따른 7대 안전장치* 신규

설치 의무화로 비용 부담 발생(가중)

* 1. 승강장문(카 문) 어린이 손끼임 방지수단 2. 승강장문 조립체(이탈방지 장치) 3. 승강장문 비상 가이드

4. 카의 상승과속 방지수단  5. 카의 개문출발 방지수단  6. 브레이크 시스템  7. 자동구출운전수단

설치·교체 대상 : 승객용 승강기[기계실(3층) 및 승강로(지상3~지하2)]

○ 세부내용 : 승강기 본체(승객용 MR 15인승), 방화도어, 에어컨 등

※ '화물용' 제외 사유 : 2023년 본예산 및 1차 추경 세출 요구 하였으나 미반영

승객용 승강기 외부 (1층)	승강기 기계실 (권상기, 로프브레이크, 제어반 등)

구매방법 : 나라장터 종합쇼핑몰 구매(다수공급자 공급계약 납품 물품)

○ 수탁자(시설관리공단) 시설 담당 의견 등을 수렴하여 안전 우선 우수 중소기업 제품 선정[필요시 타 (공공)기관 벤치마킹]

○ 다수공급자 공급계약(2단계 경쟁 업체 선정) 관련

: 중소기업 제조 등 제품인 경우 1억 원 미만시 예외 가능

※ 물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준 제3조(조달청고시)(제2021-5호)

○ 계약심사 및 특정기술(제품) 선정심사 대상 여부 : 해당 없음

5		소요예산

: 80,000천원(구비)

구 성 안 : 철거(총 5개층) 및 승강기 구매, 설치비(5개층), 방화도어,                 슈퍼미러, 인조대리석, 에어컨 설치비 등

예산과목 : 건강체육과, 생활체육 육성, 생활체육시설 확충, 생활체육시설 유지관리, 일반운영비, 시설비 및 부대비, 시설비

6		향후일정

2023.   4. : 물품 구매 발주

2023. ~ 8. : 물품 인도 및 설치(발주 후 120일 이내 인도 가정)

2023.   9. : 승강기 운영 재개시 ※ 공사기간 : 약 20일(예정, 변동가능)

붙임 물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준(조달청고시) 1부  끝.