등록번호

푸른도시과-807

주무관

자연생태팀장

푸른도시과장

안전건설국장

등록일자

2023.1.19.

결재일자

2023.1.19.

공개구분

비공개(5)

협  조

주무관

주무관

2023년 근교산 정비사업 추진계획

서 대 문 구

푸른도시과

2023년 근교산 정비사업 추진계획

주민들의 건강에 대한 관심 증가로 최근 근교산 등산객의 수가 증가함에 따라 산림 내 노후된 등산로를 정비 및 시설을 개선하여 숲 이용 활성화 및 주민 건강에 기여하고자 함

1	추 진 방 향

□ 산림내 편의시설 설치 및 노후시설물 개선을 통한 숲이용 활성화

□ 급경사지는 목재계단 및 안전난간을 설치하여 이용자 안전사고 예방

□ 노후된 원목, 침목계단 등을 철거 및 교체하여 이용편익 제고

2	사 업 개 요

□ 대 상 지 : 안산 등 5개소

○ 안 산(9개소) : 만남의 광장~봉원사, 천연마당, 박두진시비 인근, 만남의 광장~메타세콰이어 숲, 독립공원 남측, 약수터 4개소

○ 북한산(2개소) : 북한산자락길 ~ 둘레길구간, 홍록배드민턴장 진입로

○ 인왕산(3개소) : 인왕산 둘레길 주변, 인왕골 마당, 청련사 ~ 상수도 사업본부

○ 백련산(2개소) : 10번 마을버스 종점 ~ 백련산 능선부, 논골지구

○ 궁동산(1개소) : 연희어린이공원 ~ 궁동산등산로

□ 사업기간 : 2023. 1.~ 11.

□ 사 업 비 : 2,204백만원(시비100백만원, 구비 2,104백만원)

□ 사업내용 : 사업설명서 참조

○ 등산로 정비 : 목재데크, 목재계단, 산책로 노면 정리, 수목식재 등

○ 시 설 개 선 : 반려견 쉼터 및 놀이터, 특화숲 조성, 노후시설 정비 등

3	세부추진내용

□ 사업별 세부내용

연번	사 업 명	위 치	사업내용	사업비 (백만원)	비고
합계	12개 사업(시비1, 구비11)			2,204
1	서대문 이음길 특화숲 조성	인왕산 둘레길 일대	특화수종 식재	220	구비
2	반려견 산책로 및 놀이터 조성	만남의 광장 ~ 봉원사, 천연마당	반려견 산책로 및 놀이터 조성	250	구비
3	안산 등산로 정비	박두신 시비 인근, 만남의장소~메타세콰이어숲	목계단, 흙막이 횡단배수로 설치 등	450	시비 구비
4	북한산 등산로 정비	북한산자락길 ~ 둘레길	데크로드 설치, 토사유실구간 정비 등	250	구비
5	인왕산 등산로 정비	청련사 ~ 상수도사업본부	데크로드 설치 등	200	구비
6	백련산 등산로 정비	10번 마을버스 종점 ~ 능선	목계단, 목재휀스 설치 등	250	구비
7	궁동산 등산로 정비	연희어린이공원 ~ 등산로	목재데크 설치	200	구비
8	북한산 산책로 급경사 보행로 핸드레일 설치	홍록배드민턴장 입구	핸드레일 설치	70	구비 (주민참여)
9	안산 등산로 주변 배수로 등 정비 및 휴식공간 조성	독립문극동아파트 ~ 천연마당	배수로 및 축대 정비 및 휴식공간 조성	150	구비
10	안산 시설물 정비	복주우물 약수터, 안산대운동장 등	먼지털이기 설치 및 황토포장 등	100	구비
11	인왕골마당 정비사업	인왕골마당	데크시설 보완 및 파고라 설치	44	구비 (사고이월)
12	인왕골마당 정비사업	인왕골마당	데크주변 수목식재	20	구비

□ 추진계획

○ 사업일정 : 여름철 집중호우(7월) 전까지 사업완료

- 신년 비전(핵심사업)은 현황조사, 의견수렴 및 보고절차 수행으로 12월까지 사업완료

※ 서대문 이음길 특화숲 조성, 반려견 산책로 및 놀이터 조성

○ 안전관리

- 공사착수전 안전관리계획 수립

- 등산로 정비공사(4천만원 이상) 감리 시행

○ 예산과목

- 자연생태과, 생태계복원 및 보전과 야생동식물보호, 생태계 보전사업, 근교산 등산로 정비, 시설비(시비)

- 푸른도시과, 도시자연생태 기반구축, 산림재해 방지 및 관리, 등산로 및 약수터 주변 환경 개선, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

- 푸른도시과, 도시자연생태 기반구축, 산림재해 방지 및 관리, 서대문 이음길 특화숲 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

- 푸른도시과, 도시자연생태 기반구축, 산림재해 방지 및 관리, 반려견 산책로 및 쉼터 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

4	추 진 일 정

□ 2023. 1.         : 대상지 현장조사

□ 2023. 2. ~  3.  : 실시설계용역

□ 2023. 3. ~  4. : 설계심의 및 계약심사

□ 2023. 4. ~ 12. : 공사시행 및 준공

5	기 대 효 과

□ 근교산 정비를 통한 안전하고 편리한 등산 환경 제공

□ 산림복원 및 건강, 여가, 휴식공간으로 활용하여 주민만족도 제고

붙임  사업설명서 1부.  끝.