문서번호	환경과-23627		주무관	에너지관리담당	환경과장		안전생활국장
결재일자	2023. 6. 16.		김태현	한선희	김성동		06/16
공개여부	부분공개(5)						맹홍재
방침번호			협조
방침번호
				어르신장애인복지과장					곽정숙
				어르신시설담당					오순자

- 시립성북노인종합복지관 별관 -

공공태양광 발전설비 설치 계획

2023. 6.

안전생활국

(환  경  과)

- 시립성북노인종합복지관 별관 -

공공태양광 발전설비 설치 계획

공공건축물 옥상에 태양광 발전설비를 설치하여 신재생에너지 이용·보급 촉진 및 탄소중립에 기여하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」제27조(보급사업)

□「성북구 기금관리 기본조례」제26조(기후변화기금)

□ 시립성북노인종합복지관 별관 옥상 공공태양광 발전설비 설치 승낙

○ 성북구 어르신·장애인복지과-21957(2023. 5. 22.)

○ 서울특별시 어르신복지과-14004(2023. 6. 8.)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사업명 : 시립성북노인종합복지관 별관 공공태양광 발전설비 설치

○ 사업대상 : 시립성북노인종합복지관 별관(종암로21길 21-4)

○ 사업기간 : 2023. 6. ~ 7.

○ 총사업비 : 26,000천원(기후변화기금 100%)

- 예산과목 : 환경과, 기후변화 대응기반 조성, 기후변화기금 운용, 신재생에너지 보급(태양광), 시설비및부대비, 시설비

Ⅲ		사 업 상 세

□ 구조안전검토 용역

○ 용역근거 :「서울특별시 에너지 조례」제18조(설치기준의 마련 등)

○ 용역내용 : 태양광 발전설비 설치에 따른 구조하중·풍하중·적설하중, 지지부 앵커 내력, 구조물 내력 안전성 검토 등

○ 사업비 : 약 5,000천원

○ 계약방법 : 1인견적 수의계약

- 계약근거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조제1항제5호 나목

□ 개발행위허가

○ 근거 :「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」제51조(개발행위허가의 대상) 및「서울특별시 도시계획 조례」제20조(허가를 받지 아니하여도 되는 경미한 행위)

○ 내용 : 공사 계획, 피해확산방지 계획 및 구조안전확인서 등 공작물설치 부대 사항 검토(도시계획과)

□ 태양광 발전설비(8kW) 구조물, 모니터링시스템 구매

○ 내용 : 발전장치 계통연계형(8kW)·모니터링시스템(RTU) 구매(설치포함)

○ 사업비 : 약 20,700천원

○ 계약방법 : 다수공급자계약(조달구매)

- 계약근거 :「조달사업에 관한 법률」제11조(계약체결의 요청) 및 같은 법 시행령 제11조제1항제2호 나목

□ 소화기 구매

○ 내용 : 수동식소화기 3.3kg(ABC형) 2대 구매

○ 사업비 : 약 100천원

○ 계약방법 : 제3자를 위한 단가계약(조달구매)

- 계약근거 :「조달사업에 관한 법률」제11조(계약체결의 요청) 및 같은 법 시행령 제11조제1항제2호 가목

□ 사용전검사, 계통연계

○ 내용 : 전기시설물 전력계통 안전검사(한국전기안전공사)

계량기 전기요금 계통연계(한국전력공사)

○ 수수료 : 약 200천원

Ⅳ		추 진 일 정

□ 2023. 6. :	구조안전검토
□ 2023. 7. :	개발행위허가, 태양광 발전설비·모니터링장치·소화기 설치
	시운전 및 사용전검사, 발전 개시

Ⅴ		기 대 효 과

□ 전력생산량 : 약 9,300킬로와트시(kWh)/연

Ⅵ		향 후 계 획

□ 준공 다음연도(2024년)부터 공공태양광 전기안전점검 실시(연 2회)

□ 태양광 설비 고장 발생시 보수(상시)

Ⅶ		행 정 사 항

□ 개발행위허가(도시계획과)

□ 구조안전검토 용역계약 및 태양광 발전설비 구조물·모니터링시스템·소화기 구매의뢰(재무과)

□ 시공 일정 및 현장 협조(어르신·장애인복지과, 시립성북노인종합복지관 별관)

붙임  1. 협조문 각 1부.

2. 건축물대장 1부.

3. 현장도 1부.

4. 설계도 1부.

5. 예정공정표 1부.  끝.