문서번호	주차행정과-40552
결재일자	2023. 11. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	구청장 제378호

주무관		주차행정팀장	주차행정과장		건설교통국장		부구청장	구청장
김재현		김귀은	황창선		이상용		김경탁	11/07
								이수희
협 조						도로과장		윤득근
						푸른도시과장		이현삼
	기획경제국장			장병조		명일제1동장		심건희
	도시관리국장			심재욱		예산팀장		代김선경
	기획예산과장			김점희		시장지원팀장		代김소현
	지역경제과장			정진수		계약팀장		심은진
	재무과장			이성수		어르신시설팀장		조소혜
	어르신복지과장			박선녀		도심정비팀장		최영숙
	도시계획과장			임영철		공공건축팀장		김정수
	건축과장			유영섭		공원관리팀장		代김은정

	강동을 새롭게, 구민을 신나게!

강동첨단복합청사 연계 지하 공영주차장 건립 계획

2023. 11. 7.

건설교통국

(주차행정과)

사전 검토사항

☞ 해당사항에‘■’표시 후 필요 시 괄호 안에 검토내용을 기입하시기 바랍니다.

검 토 항 목		검 토 여 부
법규 검토	관련법규	■ 검토 완료(법규명: 주차장법)	□ 해당 없음
	공직선거법	□ 검토 완료	■ 해당 없음
재원확보		■ 국비 ■ 시비 ■ 구비 □ 민자 유치 □ 기타( )	□ 비 예 산
주민의견 반영 및 참여방안		□ 설문조사 □ 공청회 □ 토론회 □ 공모 ■ 기타(주민설명회)	□ 해당 없음
갈등관리		□ 이해관계자 간 갈등 발생 가능 □ 민원발생 가능 (갈등요소: )	■ 해당 없음
전문가 자문		□ 이행 완료 □ 예정 (이행방안: )	■ 해당 없음
협업 협치	타 기관 및 단체	□ 중앙부처 □ 서울시 □ 타 지자체 □ 투자출연기관 □ 민간단체 □ 구의원 업무공유 □ 기타( )	■ 해당 없음
	관 련 부 서	■ 협업 필요(해당부서: 기획예산과, 지역경제과, 재무과, 어르신복지과, 도시계획과, 건축과, 도로과, 푸른도시과 등)	□ 해당 없음
추진절차		■ 일상감사 □ 투자심사 □ 용역심사 □ 민간투자사업 심의 □ 타당성 검토 □ 공유재산 심의 □ 의회 심의 □ 기타 위원회 심의 등	□ 해당 없음
홍보방안		■ 보도자료 제공 □ 기자 설명회 □ 구 소식지 □ SNS □ 기타( )	□ 해당 없음
기타 고려사항		□ 인권영향평가(구민 인권보장 및 증진) □ 아동친화 및 아동영향평가 □ 교육영향평가(학생 안전과 수업권 확보) □ 여성친화 및 성별영향 □ 건강친화요소 □ 환경인지 □ 사회적 약자 배려 ■ 타 기관 사례 파악 비교 ■ 안전대책 ■ 유지관리비용 □ 시장조사 □ 미래행정 수요예측 □ 고용효과 □ 행사의전 ■ 바른 우리말(행정순화어)

강동첨단복합청사 연계 지하 공영주차장 건립 계획

우리 구 명일동 주택밀집지역 주차난 해소 및 명일전통시장 활성화를 위해 강동첨단복합청사와 연계하여 염주골어린이공원 지하 공영주차장을 건립하고자 함

1		추진배경 및 근거

○ 민선8기 공약사항: 「명일동 주택가 공영주차장 건립」

○ 강동첨단복합청사 건립 추진에 따른 염주골어린이공원 지하주차장 연계 개발

○ 주택밀집지역 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성

○ 명일전통시장 이용고객을 위한 주차공간 확보로 지역경제 활성화

2		그간 추진경과

ㅇ ’20. 12.  중소벤처기업부 ‘전통시장 주차환경개선사업’ 공모 선정(국·시비 25.2억)

ㅇ ’22. 3.   강동첨단복합청사 연계 지하 공영주차장 건립계획 수립

ㅇ ’22. 4.   건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 발주

ㅇ ’22. 11.  市 도시계획·공원위원회 공동자문(조건부동의)

ㅇ ’23. 3.   市 투자심사(조건부추진)

ㅇ ’23. 5.   區 공유재산심의(원안가결)

ㅇ ’23. 6.   공유재산관리계획 區의회 승인(원안가결)

ㅇ ’23. 8.   市 ‘2024년 주택가 공동주차장 보조금 지원사업’ 선정(시비 36억)

ㅇ ’23. 9.   區 도시계획위원회 심의(원안가결)

ㅇ ’23. 10.  도시계획시설 중복결정 및 지형도면 고시(강동구고시 제2023-164호)

ㅇ ’23. 10.  市 공공건축심의(조건부의결)

3		건립계획

○ 위     치: 명일동 326-10(염주골어린이공원, 구유지), 327-4일부(도로, 구유지)

○ 부지면적: 1,259.0㎡(공원 991.3㎡, 도로 267.7㎡)

○ 건축규모: 주차면수 52면(지하2개층, 연면적 2,207.66㎡)

구 분	면적(㎡)	세부내용
지상층	44.86	*************
지하1층	1,090.80	************************ *******************************
지하2층	1,072.00	********************************

○ 총사업비: 10,326백만원(국비 1,800 / 시비 4,320 / 구비 4,206)

총사업비	*****	***	***	***	******	**	***
10,326	*	***	*****	***	***	**	***

- 총 사업비 증액: 326백만원(전액 구비 추가 부담)

- 증액 사유: 市 공공건축심의시 건축·조경분야 위원의 검토의견에 따라 ************************************* 추가 반영

(※ 기본 및 실시설계 용역 결과에 따라 변동 가능)

○ 위치도

**************************************************

********************************************************************************

4		사업비 세부내역

□ 연도별 소요예산                               (단위: 천원)

구 분		계	2022년 (기투자)	2023년	2024년	2025년
*		**********	******	*******	*********	*********
*****		*********	******	*******	*********	*********
	*****	*********	*	*	*********	*********
	*****	*******	*	*******	*	*
	*****	*******	*	*	*******	*******
	***** ************	******	*	*	******	*
	*** *********** *******	*******	******	*	*******	*
	*** ***********	******	*	*	******	*
*****		*******	*	*	*	*******
*****		******	*	*	*	******
*********		******	*	*	*	******
***		*******	*	*	*	*******

□ 재원 확보방안                                (단위: 백만원)

구분	합계	2022년	2023년	2024년	2025년
계	10,326	****	*****	*****	*****
국비	1,800	*	*	*****	*
시비	4,320	*	*	***	*****
구비	4,206	****	*****	*****	*****

********************************************************

*******************************************************

5		향후계획

ㅇ ’23.12.  기본 및 실시설계 용역 발주

ㅇ ’24. 7.  市 도시공원위원회 자문 / 공원조성계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

ㅇ ’24.10.  설계 준공 / 도시계획시설사업 실시계획인가 및 고시

ㅇ ’24.11.  착공

ㅇ ’26. 5.  준공

※ 상기 일정은 추후 제반여건 및 사업 추진경과에 따라 변경될 수 있음

*************

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************