문서번호	기전과-14635
결재일자	2023. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
강준석		11/24
		최경주
협 조

금화터널 진입차단시설 설치공사 준공 설계변경 검토 보고

금화터널 진입차단시설 설치공사 준공

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

서부도로사업소

(기  전  과)

금화터널 진입차단시설 설치공사

준공 설계변경 검토 보고

서부도로사업소장 : 최연우☎300-8300 기전과장 : 최경주☎8390 담당 : 강준석☎8397

금화터널 진입차단시설 설치가 완료되어 설치된 내역에 따라 준공 설계변경 사항을 검토하고 이를 아래와 같이 보고함

□ 추진근거

ㅇ 1회 실정보고 검토보고(기전과-13982, 2023.11.14.)

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명: 금화터널 진입차단시설 설치공사

ㅇ 계약금액: *************

ㅇ 공사기간: 2023. 8. 28. ~ 2023. 11. 25.

ㅇ 공사업체:*******************

ㅇ 주요공정

- 편주형 진입차단시설 2개소 제작 및 설치

- 차단시설 제어장치 등 부대장비 설치

□ 설계변경 사항

ㅇ 주요 변경사항

구 분	변경사항	증감액 (순공사비 기준)
충격흡수장치 미설치 물량 삭제	*******************	***********
피뢰침 설치 내역 조정	*************** *****************	********
보험료 정산	******************************* *********************** *************	************

ㅇ 금액변경내역

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	************	************	*************
	부가세	**********	**********	************
	도급비계	***********	************	*************

□ 보고자 의견

ㅇ 실제 설치내역 및 보험료 사후정산 반영하여 검토 완료하였으며  상기 내역으로 설계변경하고 준공하고자 함

붙임  1. 시공업체 준공 실정보고 1부.
2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율검증확인서 1부.  끝.