				★과장			팀장	주차시설운영처장	교통사업본부장
									12/20
문서번호		주차시설운영처-26821
보존기간		준영구		협 조			총무처장
결재일자		2023.12.20.					기획조정실장
공개여부		부분공개(5)
2023년 주차시설운영처 예산 사고이월 계획(안)
			2023.
						주차시설운영처

2023년 주차시설운영처 예산 사고이월 계획(안)

< 사고이월 사업 총괄 : 1건 >

사 업 명	완료시기	항 목	이월금액(원)
상암공영차고지 버스세차기 구매설치	’24.3	수선유지비	101,972,000

「상암공영차고지 버스세차기 구매설치」와 관련하여 금년 내 공사를 완료할 수 없어 사고이월 하고 자, 아래와 같이 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 상암공영차고지 버스세차기 구매설치

○ 공사기간 : 2023.12.13. ~ 2023. 3.12

○ 공 사 비 : 금101,972,000원

○ 공사개요 : 버스세차기 구매설치 1식

□ 사고이월 보고

○ 관련근거

- 지방공기업법 제30조(예산의 이월)

- 지방재정법 제50조(세출예산의 이월)

- 회계규정 제117조(예산의 이월)

- 2023년 예산 사고이월 계획 제출요청 (기획조정실-6618,’23.11.23.)

○ 사고이월 사유

- 중랑공영차고지 세차기 발주준비 과정에서 물가상승 및 철거비요구 등  추가 예산이 필요하여 정상적인 사업이 불가능

- 확보된 예산 범위 내에서 구매설치가 가능한 차고지 선정(상암차고지) 후  市 주무과 협의, 市 계약심사의뢰 등으로  ’23.12.13. 계약자가 선정됨

- 설치 기간이 계약일로부터 90일로, 절대공기가 부족하여 연말까지 준공이 어려워 사고이월이 불가피

○ 사고이월 예산

- 예산과목 : 공영차고지, 대행 사업비, 수선유지비, 기타수선유지

- 이월 세부내역

구 분	예산금액(A) (지출원인행위액)	선급/기성금(B)	사고이월액 (A-B)
계	101,972,000	-	101,972,000
버스세차기 구매설치	101,972,000	-	101,972,000

○ 향후 추진계획

- 공사계약                   : ’23.12.13.

- 공사착공 및 준공           : ’23.12.14. ~ ’24. 03.12(90일)

□ 조치계획

○ 상기 보고 내용과 같이 금년도 공사 준공이 불가하므로 사고이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 일상감사 검토의견 회신 및 관련서류 각 1부.  끝.