등록번호

도로과-488

주무관

도로조명팀장

도로과장 직무대리

안전건설국장 직무대리

등록일자

장민정

소해준

최종구

01/09

결재일자

2024. 1. 9.

공개구분

부분공개(5,6)

황원근

협  조

무악재 하늘다리 홍보조명 설치 계획

안전건설국

도 로 과

무악재 하늘다리 홍보조명 설치 계획

안산과 인왕산 연결 통로『무악재 하늘다리』홍보조명을 설치하여  야간볼거리 제공 및 산행의 묘미를 느낄수 있는 이정표를 제공하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례

□ 인공조명에 의한 빛공해 방지법

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 6.

□ 사업위치 : 서대문구 현저동 1-150

□ 사업내용 : 무악재 하늘다리 홍보조명 2개소 설치 등

□ 소요예산 : 80,000천원(구비)

□ 시설현황 및 조감도

위치도	무악재 하늘다리 현황

`

조감도(1안)	조감도(2안)

Ⅲ		추 진 계 획

□ 2024.  1. : 무악재 하늘다리 홍보조명 설치계획 수립

□ 2024.  1. : 홍보조명 설치공사 실시설계용역 시행

□ 2024.  2. : 서울시 좋은빛위원회 빛공해 심의

□ 2024.  3. : 홍보조명 설치공사 발주 및 착공

□ 2024.  6. : 홍보조명 설치공사 준공

Ⅳ		세부추진계획

구 분	무악재 하늘다리 홍보조명 설치공사 심의자료작성 및 실시설계용역	홍보조명 설치
추진기간	2024. 01. ~ 2024. 02.	2024. 03. ~ 2024. 06.
소요예산	5,690천원(구비)	74,310천원(구비) ※ 전기공사 40,000천원/간판공사 34,310천원
추진방법	수의계약	수의계약(전기공사/간판공사 별도 발주)
추진내용	- 홍보조명 설치 심의자료 작성및실시설계 - 좋은빛 심의 추진 등	무악재 하늘다리 홍보조명 설치
예산과목	도로과, 도로인프라 확충·정비, 가로등및보안등관리, 조명시설유지관리, 시설비및부대비, 시설비

※ 실시설계용역에 따라 전기공사 소요예산(공사용 자재 포함)이 변동될 수 있음.

Ⅴ		기 대 효 과

□ 무악재 하늘다리 홍보조명 설치하여 새로운 이정표(만남의 장소로 활용 등) 탄생으로 서대문구 홍보효과 극대화

□ 무악재 하늘다리 미관 개선 및 야간 이용객에게 볼거리 제공.  끝.