문서번호	도시철도토목부-11702
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
임준호		홍숭희	10/28 이은상
협 조
	주무관			성원배

지하철9호선 2단계 궤도공사

궤도시설물 사전점검 및 시설물검증시험 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10. 24

도시철도토목부

지하철9호선 2단계 궤도공사

궤도시설물 사전점검 및 시설물검증시험 시행계획

지하철9호선 2단계 철도종합시험운행 관련 사전점검과 시설물검증시험을 운영사와 합동으로 시행하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 철도안전법 제38조(종합시험운행) 및 동법 시행규칙 제75조

① 철도운영자등은 철도노선을 새로 건설하거나 기존노선을 개량하여 운영하려는 경우에는 정상운행을 하기 전에 종합시험운행을 실시한 후 그 결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

❍ 철도종합시험운행시행지침(국토교통부 고시 제2014-143호(’14.3.19.))

※ 철도종합시험운행 시행(시운전)절차

❍ 공종별시험 → 사전점검 → 종합시험운행(시설물검증시험, 영업시운전) → 영업시운전

Ⅱ		공사현황

❍ 규    모 : 궤도부설 4.5km(복선), 분기기 7틀(정거장 5개소)

❍ 사업기간 : 2012.12.18 ～ 2014.03.12

❍ 공 사 비 : 10,046백만원(도급비 7,578, 관급비 2,268)

❍ 추진현황                                          (단위 : 백만원)

구 분	총괄	1차(준공)	2차(준공)
도급비	7,755	1,129	6,626
공사기간	‘12.12.18 ～‘14.3.12	‘12.12.18 ～‘13.6.12	‘13.3.12 ～‘14.3.12

Ⅲ		시행계획(안)

❍ 점검일정 : 2014.10.27(월) ～ 2014.10.28(화)

❍ 점 검 자 : 본부, 운영사 서울메트로, 감리사 ㈜천일, 시공사 (주)한일철도

❍ 사전점검

구 분	시설물	점 검 항 목	비고
궤도시설물 (본선)	콘크리트도상 (LVT, 60Kg)	시공 상태(궤간, 수평, 면·줄맞춤 등) 적정 여부
		도상 배수처리 상태 적정 여부
		궤도재료(침목, 체결구 등)상태 적정 여부
	분기부 (탄성, 60Kg)	시공 상태(궤간, 수평, 면·줄맞춤 등) 적정 여부
		분기기 재료상태 적정 여부
	기타	각종 제표설치 적정 여부
		차막이 설치상태 적정 여부
		기타 시설물 상태 적정 여부

❍ 시설물검증시험(철도종합시험운행 시행지침 시설물 점검항목)

(X 생략, △ 협의, ● 적용)

가. 선로구조물(궤도/노반/교량/터널/역시설 등)
시험항목	시험내용	도시철도(지하철)	비고
궤도검증 시험	○ 궤도선형검측 - 궤간, 수평, 고저, 방향 등 검측	●	운영기관 장비 검측
	○ 레일탐상 - 레일결함 검측	●	운영기관 장비 검측
	○ 궤도육안점검 - 차량에 의한 증속시험 전 점검	●	시설물 사전점검 시 실시
	○ 취약구간 궤도검증시험 - 윤중․횡압 - 레일응력 - 레일변위(연직변위/횡변위) - 침목변위(연직변위)	△	협의 후 처리

※ 도시철도 시설물검증시험 점검항목인 “선로시설 시험내용(궤도 및 성능시험)” 의 성능시험 방법 등이 구체적으로 명시가 되어있지 않아 일반철도 점검항목을 적용하여 효율적인 시설물검증시험 실시

Ⅳ		조치계획 및 행정사항

❍ 위와 같이 종합시험운행을 위한 사전점검 및 시설물검증시험 점검을 시행하고 결과를 총괄부서인 도시철도설비부에 통보하고자 함

❍ 시설물검증시험에 필요한 레일탐상 및 궤도검증시험 등은 운영사(서울메트로)의 장비 및 측정 데이터를 활용하여 실시 하고자 함.

첨 부 : 9호선 2단계 개통대비 궤도분야 Check List 1부. 끝.