문서번호	일자리정책과-13615
결재일자	2014.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	청년일자리팀장	일자리정책과장
이남숙	김성건	10/31 엄연숙

근로청년공용공간 조성을 위한

공간기획 및 인테리어 디자인용역 준공기한 연기보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
용역과업 내용서 (감독시행)	블랭크	준공기한 연기	준공기한 연기	21,150천원

경 제 진 흥 실

(일자리정책과)

근로청년공용공간 조성을 위한

공간기획 및 인테리어 디자인용역 준공기한 연기보고

무중력지대 G밸리(근로청년공용공간)의 원활한 조성을 위하여 인테리어   디자인 용역의 준공기한을 연기 시행하고자 함

▢ 용역개요

○ 용 역 명 : 근로청년공용공간 조성을 위한 공간기획 및 인테리어 디자인 용역

○ 계약업체 : 블랭크(대표 김동리, 문승규)

○ 계약금액 : 금21,150,000원(금이천일백일십오만원정)

○ 계약년월일 : 2014.09.02

○ 준공예정일 : 2014.10.31

▢ 준공기한 연기

○ 변경내용

구 분	준 공 기 한
당 초	2014.9.2.~2014.10.31
변 경	2014.9.2.~2014.11.28

○ 변경사유

- 커뮤니티 확대, 시설의 다목적기능 강화를 위한 공간기획 및 디자인 보강으로 인해 디자인성과 납품 지연

- 디자인 용역은 완료되었으나 인테리어 공사(2014.11.5.~11.26)에 따른  감독 시행을 위해 준공기한을 연기하고자 함

○ 귀책소재 및 지체상금 부과

- 귀책소재 : 서울시

- 지체상금 : 미부과

▢ 조치사항

○ 준공기한 연기의뢰 : 서울특별시 경리관

○ 준공기한 연기안내 : 계약업체에 안내하여 용역수행에 차질 없도록 조치

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부

2. 합의서 1부