업무연락전

작 성 자

김상용

작성일자

2014-11-03

문서번호

도시기반시설본부-14-42875

대상현장

[서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업](주)도화엔지니어링

제    목

예비준공검사 결과 통보

내    용

1. 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업(4차)와 관련 2014.10. 28(화) 실시한 예비준공검사 결과를 아래와 같이 통보하오니 4차공사 준공에 만전을 기하시기 바랍니다.

아               래 -

■ 예비준공검사 : 4차공사

○ 사업기간 : 2013. 11. 21 ∼ 2014. 11. 17

○ 도 급 비 : 20,000백만원

○ 주요공사 내용

․ 1처리장 2계열 구조물 철거공사( 기존 기계, 전기시설 포함)

․ 토공작업(터파기 및 운반)

․ 가시설 차수벽 및 소화조 내부 가시설

․ 기타 부대공(타워크레인 설치, 임시동력 설치 등)

■ 검 사 일 : 2014.10.28(화)

■ 검 사 자

○ 발주처 : 공사관리관 : 김상용

○ 입회자 : 책임감리원 : 김봉주,

현장대리인 : 한상명,

기술지원감리원 : 공종복, 박을축

■ 예비준공검사 결과

공종	규격	단위	계약수량	시공수량	미시공수량
가시설공 (소화조)	쉬트파일 L=16.5M	본	404	284	120

붙임 :

서울특별시