투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결 - 2014년 한강수중보 기전시설물 보수공사

1. 기전설비1과-4081(2014.11.12.)호와 관련입니다.

2. 기전설비1과에서 시행하는『2014년 한강수중보 기전시설물 보수공사』건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

계 약 명	계약업체(대표자)	계약금액(원)	계약기간
2014년 한강수중보 기전시설물 보수공사	㈜이일엔지니어링 (******)	182,239,900	2014.4.29. ~ 2014.10.31.

나. 변경내역 : 계약금액 변경(감 5,423,260*), 준공기한 변동없음

구분	계 약 명	계약업체	계약금액(원)	계약기간
변경 전	2014년 한강수중보 기전시설물 보수공사	㈜이일엔지니어링 (******)	182,239,900	2014.4.29. ~ 2014.10.31.
변경 후	2014년 한강수중보 기전시설물 보수공사	㈜이일엔지니어링 (******)	*********** *************	2014.4.29. ~ 2014.10.31.

다. 변경사유 **물량 일부 감소 및 보험료 사후정산

붙임 :  1. 정산(변경)도서 제출공문 1부.

2. 정산보고서 1부.

3. 정산(변경)내역서 1부.  끝.

주무관	이재승		총무과장	최대봉		총무부장	전결 11/12 서영관
협조자
시행	총무과-17303	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	existwin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)