문서번호	주거환경과-9379
결재일자	2013.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	주거환경관리팀장	주거환경과장	주거재생정책관		주택정책실장
임동수	양준모	최성태	진희선		10/24 이건기
협 조
	예산담당관			김상한
	주무관			이동호

도봉동 주거환경관리사업

예산과목 변경 계획(통계목)

2013. 10

주택정책실

(주거환경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	도봉동 새동네 주민	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	도봉구청 도시계획과	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

도봉동 주거환경관리사업

예산과목 변경 계획(통계목)

도봉동 주거환경관리사업 마을회관 조성공사의 품질관리 등 원활한 사업관리를 위해 시설비 일부를 감리비로 예산변경(통계목)하여 집행하고자 함

□ 예산변경 : 시설비 및 부대비(시설비 → 감리비, 변경금액 : 11,000천원)

사업개요

❍ 위치 : 도봉구 도봉동 280 일대

❍ 면적 : 42,365㎡

❍ 현황 : 제1종 일반주거지역, 최고고도지구

❍ 규모 : 391명 / 168세대 / 108개동 / 131필지

❍ 사업내용 : 마을회관 신축(398㎡), 도로정비사업(6,340㎡), 가로공원 조성사업(2,000㎡)

CCTV 설치(9개소), CPTED 컨설팅 결과 반영 등

추진 경위

❍ ‘12. 05. : 주민참여형 재생사업 사업대상지 선정

❍ ‘12. 08. 20 : 지구단위계획 수립용역 계약 및 착수

- 계약업체 : ㈜하우드엔지니어링(계약금액 137,780천원)

❍ ‘13. 07. 10 : 도시건축공동위원회 심의(조건부 가결)

❍ ‘13. 07. 16 : 실시설계 용역비 자치구 재배정

❍ ‘13. 08. 26 : 기반시설 실시설계 용역 계약

- 계약업체 : 동해종합기술공사(계약금액 62,819천원)

❍ ‘13. 09. 24 : 마을회관 실시설계 용역 계약

- 계약업체 : ㈜제이앤제이건축사사무소(계약금액 50,350천원)

❍ ‘13. 10. 14 : 마을회관 감리비 예산 배정 요청(구 → 시)

- 요청금액 : 11,000천원

예산 편성현황

❍ 대상사업 : 도봉동 주거환경관리사업

❍ 예산 현황

단위 : 백만원

2013년 예산편성 (명시이월)	집행 현황		비고
	원인행위액(재배정액 포함)	집행 잔액
23,320	8,827	14,493

※ 향후 집행 예정금액 : 6,500백만원

❍ 예산 과목 : (부서)주택정책실 주거환경과 (정책)평생 살고 싶은 마을만들기 추진 (단위)주거지 재생사업 추진(도정) (세부)주민참여형 주거지 재생사업 (통계목) 시설비(명시이월 예산)

예산변경 계획

(단위 : 천원)

구 분	2013년 편성예산		증 · 감	비고
	당초	변경
시설비	23,320,000	23,309,000	감) 11,000
감리비	-	11,000	증) 11,000

❍ 변경사유

- 도봉동 주거환경관리사업 마을회관 조성공사의 품질관리 등 원활한 사업 추진을 위해 시설비 일부를 감리비로 예산변경(통계목)하여 집행하고자 함

향후 계획

❍ ‘13. 11월 : 실시설계 완료 및 감리용역 계약

❍ ‘13. 12월 : 공사 발주 및 계약

따로붙임 : 도봉동 예산집행 현황 1부. 끝.