함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	(주)통일건설기술원 김태규님
(경유)
제 목	지연배상금 부과 및 수의계약 결격 사항 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 사업소와 계약 체결하여 시행한 「강서수도사업소(민원센터)건축물 정밀안전

진단 용역」건이 지연 완수되었기에 지연 기간에 대하여 ‘지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조 및 동법 시행규칙 제75조’의 규정에 따라 아래와 같이 지연배상금을 부과 고지하오니 기한내 납부하여 주시기 바라며,

3. 아울러, 지연배상금 10일 이상 발생으로 인하여 귀 사가 수의계약 결격업체로 결정되었음을 알려드립니다.

가. 계약사항

- 계 약 명 : 강서수도사업소(민원센터)건축물 정밀안전진단 용역

- 계약일자 : 2014.07.14.

- 완수기한 : 2014.09.11.

- 완수일자 : 2014.11.14.

나. 지연배상금 내역

- 금    액 : 금7,308,810원(금칠백삼십만팔천팔백일십원)

- 산출내역 : 계약금액 × 지체상금율 × 지체일수

= 45,680,090 × 0.25% × 64일

- 부과근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조(지연배상금)                                 및 시행규칙 제75조(지연배상금률)

다. 수의계약 결격 내역

- 제한기간 : 2014.11.17. ~ 2015.05.16 (6개월)

- 결격사유 : 지연배상금 10일 이상 부과

- 제한근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제5장 수의계약 운영요령

첨부 : 지연배상금 고지서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김미애		행정관리팀장	김경식		★행정지원과장	전결 11/17 代김경식
협조자
시행	행정지원과-22418	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울 양천구 신정6동 319-15	/
전화	02-3146-3843	/전송	02-3146-3879	/		/	부분공개(5)