문서번호	건축기획과-25942
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	녹색건축팀장	건축기획과장	주택건축정책관
공경배	고현정	한병용	11/21 한규상

녹색건축물 실태파악 및 조성계획 수립용역 설계변경

2014. 11

주 택 정 책 실

(건축기획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	지방자치단체세출예산집행기준	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

녹색건축물 실태파악 및 조성계획 수립 용역 설계변경

녹색건축 조성계획 수립 과정에서 도출된 도심 열섬방지 목적의 쿨 루프(Cool Roofs)에 대한 실증사업 및 모니터링을 통해 효과를 검증하고 우리시 녹색건축 활성화에 활용하기 위함

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 녹색건축물 실태파악 및 조성계획 수립을 위한 연구용역

□ 용역기간 : 2014. 4. 9. ~ 2015. 4. 8(12개월)

□ 사업내용

○ 우리 시 녹색건축물의 현황 및 전망파악을 위한 실태조사

○ 녹색건축물 조성의 기본방향과 달성목표 설정

○ 녹색건축물 조성 및 지원방안 도출

○ 녹색건축물 관련 법령·제도 개선방안 제시 등

□ 계약금액 : 136,400천원

□ 계 약 자 : (사)한국교육환경연구원, ㈜친환경계획그룹 청연

Ⅱ		설계변경 내역

□ 설계변경 사유

○ 녹색건축물 조성 확대를 위한 실증사업 추진에 따른 과업 추가

- 도심열섬 방지를 위한 쿨 루프(Cool Roofs)의 효과적 도입을 위한 실증사업 및 모니터링 추진

□ 설계변경 주요내용

○ 과업내용 추가

- 쿨 루프(Cool Roofs) 실증사업 추진

☞ 강남구 보건소 옥상 시공 : 기존 방수마감 위 쿨루프 도료 추가 시공

- 쿨 루프 사업 모니터링 및 보고서 작성(‘14.12.~’15.4, 5개월)

☞ 실내온도 측정, 특수카메라 등을 활용한 건축물 표면온도 측정 등

☞ 현재 방수방식, 도료종류 등 고려한 실정에 맞는 효과적인 도입방안 도출

○ 계약금액 변경(증액)

- 당 초 : 136,400,000원

- 변 경 : 150,000,000원(증 13,600,000원)

○ 계약기간 변경 : 없음

Ⅲ		추진근거(예산 및 과업추가)

○ 관련근거(방침)

- 쿨 루프 등 녹색건축 기준도입 검토 자문결과(건축기획과-24996, ‘14.11.10)

- 도시 열섬현상 저감을 위한 녹색건축 시범사업(쿨푸프) 추진계획(건축기획과-25372, ‘14.11.14)

○ 추가 용역비

- 소요예산 : 당초 용역비의 낙찰차액(13,600,000원) 사용

☞ 예산과목 : 주택정책실 건축기획과,아름답고 매력있는 도시건축조성 지원,건축물 공공성 강화,녹색건축물 실태파악 및 조성계획 수립,연구용역비

Ⅳ		향후 추진계획

○ ‘14.11 : 용역변경계약 체결 및 실증사업 추진

○ ‘14.12~’15.04 : 실증사업 모니터링 및 녹색건축물 조성계획 수립

붙임 : 변경 과업지시서 및 산출내역서 각 1부.  끝.