함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경(제1회)계약의뢰(2014년 서초구관내 상수도시설물...)

1. 우리 사업소에서 시행중인″ 2014년 서초구관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사 ″에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회)을 시행하고 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명  : 2014년 서초구관내 상수도시설물설치 및 보수공사

나. 계 약 자 : ㈜화영건설, 대표자 송미영

다. 계약기간 : 2014. 5. 2.~2015. 4. 30

라. 설계 변경금액(금액변경없음)

구 분	설계변경			비고
	당 초	변 경	증·감
계약금액	733,798,100	733,798,100	-

마. 설계변경 사유 : 시공물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 변경

바. 하자기간 : 준공검사일로 부터 3년

사. 예산과목 :

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(노후밸브)

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(기타교체비)

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템구축,소방용수시설등의 설치 및 관리,일반회계,소방용수시설설치,시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 일반회계, 소방용수시설보수,시설비

따로붙임 : 1. 설계변경 관련문서 각1부.

2. 합의서 1부1.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	최덕환		시설관리과장	11/21 송근호
협조자
시행	시설관리과-24174	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4904	/전송	02-3146-4939	/	cowboy8817@seoul.go.kr	/	대시민공개