문서번호	설비부-13183
결재일자	2014.11.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		녹색성장과장	설비부장
성호준		김창균	11/24 박기형
협조

서울과학관 건립 정보통신공사

통합배선반 실정보고 사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비 (천원)
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

도시기반시설본부

(설 비 부)

서울과학관 건립 정보통신공사

통합배선반 실정보고 사항 검토보고

서울과학관 건립 정보통신공사 관련하여 책임감리원의 통합배선반에  대한 실정보고가 있어 검토하고 보고 드림.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울과학관 건립 정보통신공사

❍ 공사규모 : 전관방송 1식, A/V설비 1식 등

❍ 공사기간 : `14. 4. 23. ~ `16. 1. 12.

❍ 계 약 자 : ㈜엠케이씨티 대표 장재철

- 감리사 : ㈜정림건축종합건축사사무소

❍ 계약금액 : 891,253천원

□ 추진경위

❍ `14.11.13. : 설계도서 검토지시(설비부-12733)

❍ `14.11.20. : 책임감리원 실정보고(정과감 제14-232호)

□ 실정보고 내용

❍ 주요내용 : 통합배선설비의 효과적인 운용을 위해 광모듈 및 2중화 구성에 따른 장비를 반영하고 불필요한 교환기 운영 S/W 삭제

❍ 변경금액

(단위 : 천원)
구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
금 액	309,364	266,156	-43,208	조달수수료 제외

□ 책임감리원 검토 의견

❍ 통합배선설비의 시공품질 향상 및 운용의 편리성을 위하여 규격변경하는 것이 타당함

□ 조치의견

❍ 책임감리원의 실정보고 사항 검토결과 적정하므로 통합배선반 규격 변경하여 조달 구매코자 함

□ 향후추진계획

❍ 2014. 11. : 조달구매 의뢰

❍ 2014. 12. : 계약

❍ 2016.  1. : 준공

따로붙임 : 책임감리원 실정보고서 1부.  끝.