함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	광진구청장(도로과장)
(경유)
제목	도로점용(굴착.복구)허가 기간 연기요청

1. 도로과-16722호,16723호(2014.11.20.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리사업소에서 시행하는 『중곡동589-9~181-14호간송배수배관정비공사-시험시공』을 시행하고자 도로점용 허가을 받아 공사 시행 중 아래와 같은 사유로 허가 기간의 연기를 요청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

가. 도로점용(굴착.복구) 허가신청내역

점용위치	점용목적	점용면적 (고압보도)	도로점용(굴착.복구)기간		허가번호
			당초 허가기간	변경 허가기간
********	작업구 설치	12㎡(3×4)	14.11.20~11.30	14.11.20~12.07	2014-상수-00339
*********	작업구 설치	12㎡(3×4)	〃	〃	2014-상수-00340

나. 도로점용(굴착.복구)허가기간 연기 요청 사유

- 굴착지점에 지장물(하수도, 통신, 전기케이블 등)이 다수 매설되어 있어 당초 기계굴착을 인력굴착으로 변경함에 따른 추후 공정(상수도관 갱생공사, 신기술 사후평가 시행 및 보도복구)의 순차적인 지연이 예상됨에 따라 도로점용 허가기간을 연기. 끝.

	동부수도사업소장
★주무관	권영안		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	11/27 안재엽
협조자
시행	급수운영과-29469	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울특별시 성동구 고산자로10길 (행당동142-1)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2763	/전송	02-3146-2789	/	kwon1901@seoul.go.kr	/	부분공개(6)