설계변경자문회의(소위원회)결과(제11차)

【2014. 11. 21(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			박웅교					요청일자			2014. 11
공 사 명			도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사										심의안건		③ 가설방음벽 설치 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 도로 L=553m B=5～6.2m(연결램프 1개소 설치)
			공사기간				2013. 12. 30 ~ 2016. 12. 29
			감 리 사				극동엔지니어링(주), (주)동일기술공사
			설 계 사				㈜수성엔지니어링, (주)대한콘설탄트,
			시 공 사				풍림산업(주), 흥일토건
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 81,602천원
설계변경사유(요약) ○ 공사시 건설장비 소음 및 진동 저감 대책으로 환경관리시설인 가설방음벽 설치․철거 변경 ⇒ 설계내역서와 종합보고서 및 도면, 수량산출서 상호 모순 ⇒ EGI휀스 설치철거는 소음․진동등을 저감할수 없으므로 가설방음벽 설치철거로 변경
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 가설방음벽 설치기간 적용을 3개(12개월, 16개월, 24개월)로 구분 적용하였으나, 실공사 기간을 감안 필요한 구간만 개월수를 일률적으로 적용하는 것이 오히려 방음에 효과적으로 판된되니 재검토하여 반영하도록 할 것 ○ 기타, 가설방음벽에 대한 시험성적서가 누락되어 있으니 보완할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원