문서번호	설비부-13585
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
이재홍		김창균	12/02 박기형
협조

『관악산 저류조 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 및 구매 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

도시기반시설본부 설비부

『관악산 저류조 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 및 구매 검토 보고

「관악산 저류조 전기공사」 관련, 관급자재 납품기한 연기(수중조명등) 및 구매(LED보안등기구 외 1종)에 대하여 검토 보고드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 관악산 저류조 전기공사

○ 규    모 : 전력수전 및 간선설비, 전등․전열설비, 기타(배관, 배선 등)

저류조 65,000㎥(서울대정문 40,000㎥, 버들골 20,000㎥, 공대폭포 5,000㎥)

○ 공사기간 : 2014. 04. 21 ~ 2015. 05. 30

○ 감 리 사 : ㈜신명건설기술공사

○ 시 공 사 : 에이포유전기(주)

○ 계약금액 : 258백만원

관련근거

○ 분할납품요구 및 통지(조달청) : 수중조명등 1종(납품기한 2014.12.11.)

○ 설비부-13033(2014.11.20)호 : 실정보고 승인(LED보안등 관급자재 승인)

관급자재 납품기한 연기보고

품 명	계약업체	계약금액(원)	납품기한		비고
			당초	변경
수중조명등(LED45W)	(주)태평양기술	89,892,000	2014.12.11	2015.05.30	3자단가

※ 연기사유 : 설치시기 미도래(지체상금 미부과)

관급자재 구매 보고

품명	규격	단위	수량	금액(천원)	구매방법	비고
LED보안등기구 외 1종 구매				8,688	조달구매 (3자단가)
LED보안등기구	40W	개	6	4,488
보안등주	4m 1등용	본	6	4,200

※ 비상 시 수동조작 및 유지관리를 위하여 조명등 설치(실정보고 승인사항)

보고자 의견

○ 공사추진에 차질이 없도록 납품기한 연기 및 구매 추진.

붙임 : 실정보고 승인(LED보안등 관급자재 승인) 1부.  끝.