문서번호	도로보수과-5389
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	도로보수과장
홍수종	12/04 국중진

작업완료 보고서(제8차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

성동도로사업소

(도로보수과)

·

작업완료보고

□ 공사 일반현황

○ 공  사  명 : 2014년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가계약)

○ 공 사 개 요 : 소규모 포장복구 : 91a, 절삭후덧씌우기 : 197a

○ 공사기간 : 2014. 3. 28 ~ 2015. 2. 28

○ 착  공  일 : 2014. 3. 28

○ 준공예정일 : 2015. 2. 28

○ 도  급  자 : 한림토건  이현숙

○ 도 급 비 : 885,214,000원

□ 보고현황

【8차】

○ 8차 작업지시

- 작업지시일 : 2014. 10. 21

- 작업지시내용 : 상왕십리동 347-2 앞외 6개소

(굴착복구A-1 : 15.46a, 차로단위복구 : 43.01a)

○ 작업완료 내용(8차)

- 작업완료일 : 2014. 11. 30

- 작업완료내용 : 용답동 228-5 맞은편(장안동 414-4) 앞외 3개소

(굴착복구A-1 : 18.43a, 차로단위복구 : 72.6a)

○ 작업현황

지시 번호		위 치	포장 종류	지시내용			완료내용			비고
				폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
8-1		상왕십리동 347-2 앞	A-1	2.0	2.0	4.0				원인자복구
8-2		용답동 228-5 맞은편(장안동 414-4)	A-1	1.2	10.0	12.0	1.2	12.0	14.4
			평삭(A-1)				2.0	13.0	26.0
8-3	1	제기동 671 앞	A-1	1.2	140.0	168.0	1.3~15.6	174.1	284.78
			평삭(A-1)	3.0	140.0	420.0	3.2~3.8	205.0	725.8
	2	제기동 671 앞	A-1	1.2	112.0	134.4				8-3-1에 포함
			평삭(A-1)	3.0	112.0	336.0
8-4		제기동 1000 ~ 용두동 10-12	A-1	1.2	50.0	60.0				작업취소
			평삭(A-1)	3.0	50.0	150.0
8-5		용답동 224-2 ~224-1	A-1	1.2	370.0	444.0	1.2~4.5	444.2	656.5
			평삭(A-1)	3.5	370.0	1,295.0	2.8~3.5	348.6	1,708.1
8-6		하왕십리로 386 앞	A-1	1.2	3.0	3.6				원인자 복구
8-7		금호4가 금남시장삼거리 ~ 옥수동 동인샤인빌 아파트 앞	A-1	1.2	600.0	720.0	1.2~8.0	674.8	887.37
			평삭(A-1)	3.5	600.0	2,100.0	7.5~14.0	549.1	4,826.3
게						1,546.0 (4,301.0)			1,843.05 (7,260.2)

□ 조치사항

○ 위 내용과 같이 작업취소(1개소) 및 원인자 복구(2개소) 구간을 제외한       복구 완료된 구간에 대하여는 추후 설계변경에 반영하여 준공처리 하고자       합니다.

붙임 : 작업완료보고서 1부. 끝.