문서번호	건축부-14576
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
이형재		조영수	12/04 김우성
협조
	DDP정책팀장		최원규

DDP 장애인편의시설 개선 기본계획 수립 용역 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

도시기반시설본부

(건축부)

DDP 장애인편의시설 개선

기본계획 수립용역 추진계획

현재 운영중인 DDP 관련 장애인편의시설 개선을 위한 기본계획 수립을 위한 용역을 아래와 같이 추진코자 함

1		추진경위

○ 2014.05.28. DDP 점자블록 설치 계획 수립

- 디자인정책과에서 예산 반영하고 우리본부에서 설계 및 시공 추진

○ 2014.06.05. BF 본인증 현장심사 결과 통보(한국장애인개발원)

- 접근로, 안내시설 등 편의시설에 대한 현장심사 의견 제시

○ 2014.07.20. 혹두기 불편 MBC뉴스 보도

- 무장애공간의 경계인 혹두기 마감이 시각장애인들에게 불편

○ 2014.10.17. DDP 보행편의용 점자블록 구축 의뢰(서울디자인재단)

○ 2014.12.01. 기술용역타당성심사 결과 통보(기술심사담당관)

2		용역개요

○ 용 역 명 : DDP 장애인편의시설 개선 기본계획 수립 용역

○ 용역목적 : 동대문디자인플라자파크를 이용하는 장애인들의 보행환경 등 장애인편의시설을 개선

○ 용역기간 : 착수일로부터 50일

○ 용 역 비 : 9,790,000원

○ 과업내용

- 장애인편의시설 현황 조사

- 장애인단체 등과 자문단 구성하여 개선방안 자문

- 장애인편의시설 개선 정비계획 및 공사계획 수립

3		소요예산 확보 및 계약방법

□ 예산확보 방안

○ 소요예산 : 135,000천원

- 용역비    9,790천원

- 시설비 125,210천원

○ 예산확보 방안

- (재)서울디자인재단 예산을 우리본부 세입세출외현금 계좌로 입금 후 사용

▸예산과목 : DDP운영준비, DDP시설운영관리, DDP시설관리, 지급수수료

□ 계약업체 및 계약방법

○ 계약업체

- ㈜휴먼케어 대표 한치영

○ 계약방법

- 근거 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항에 의한 수의계약

- 사유

▸소요예산이 2,000만원 이하 소액이며,

▸DDP 장애인편의시설 설치공사에 참여하였던 업체로서, 장애인단체간의 의견을 조율할 수 있는 업체와 수의계약

4		향후 추진계획

○ 2014. 12 : 용약계약 체결 및 시행

○ 2015. 02 : 용약완료 및 공사시행

붙임 : 과업내용서 1부.