문서번호	설비부-13916
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
김경남	이달영	12/08 박기형

『신림2 빗물펌프장 건설 기계공사』

준공기한 연기요청 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『신림2 빗물펌프장 건설 기계설비공사』

준공기한 연기요청 검토보고

『신림2 빗물펌프장 건설 기계공사』 관련 책임감리단으로부터 선행공정(토목.건축) 지연에 따른 공사 준공기한 연기요청에 대한 검토 보고임.

관련근거

❍ 준공기한 연기요청 보고 : 책임감리단

▶ 신림감 제2014-418(2014.12.05)

공사 계약 현황                                   (단위 : 원)

공사명	계약번호	계약자	계약금액	납품기한
				금차	총차
신림2 빗물펌프장 건설 기계공사(2차)	20140*******00	세경엔지니어링(주)	135,576,000	‘14.12.15

감리단 의견

❍ 연기사유 : 선행공정(토목 및 건축) 지연에 따른 기계공사 준공기한 연기

❍ 준공기한 연기 내용

공사명	당초		변경		비 고
	금차	총차	금차	총차
신림2 빗물펌프장 건설 기계공사(2차)	‘14.12.15		‘15.12.31		총액계약

❍ 지체지상급 부과여부 : 미부과

검토의견

❍ 책임감리단 실정보고에 대한 검토결과 선행 공정(토목 및 건축) 지연으로 원활한 공사추진을 위해 기계공사 준공기한 연기가 타당하므로 건설총괄부로 계약변경 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 준공기한 연기요청 공문 1부.   끝.