문서번호	도시철도설비부-11270
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
배종수		이용기	12/08 정찬웅
협 조

『9호선 연장건설(2단계) 정보통신설비공사』 설계변경 자문회의 심의결과 보고

2014. 12

도시철도설비부

『9호선 연장건설(2단계) 정보통신설비공사』

설계변경 자문회의 심의결과 보고

서울지하철 9호선 연장건설(2단계) 정보통신설비공사 변경관련 부 설계변경 자문위원회(소위원회) 결과(2차)를 아래와 같이 보고 함.

Ⅰ		공사현황

사업개요

공 사 명 : 서울지하철 9호선연장건설 정보통신설비공사

시 공 사 : 대선이엔씨(주) 대표 최승재

공사규모 : 본선((광·동)케이블 설치 17Km, 5개정거장 배선 145km

계약금액 : 4,670,024,000원

계약기간 : 2012. 12. 26 ~ 2015. 03. 31

감 리 자 : 책임감리 벽산파워(주) (통신분야 : ㈜안세기술)

Ⅱ		자문개요

자문대상 : 정보통신설비공사 설계변경

설계변경 자문 요청내용

번호	내 용	설계변경 자문 내용
1	음성유도기용 전원 케이블 신설 및 음성유도기 수량변경	- 음성유도기 전원케이블 누락에 따른 배관, 배선 반영 및 정거장 건축구조 변경에 따른 음성유도기 수량 변경(감)
2	가. T/F사무실 신설	- T/F 사무실 신설에 따른 통신설비 신설
	나. 927정거장 통합역무실 이전	- 927정거장 역무실 장소 변경(발매기실→통합역무실)에 따른 케이블길이 증가
	다. 환승E/V AFC 신설	- 927정거장 환승 E/V용 게이트 신설에 따른 배관배선 신설
	라. 종합운동장역 MIS 이설	- 2호선종합운동장역 대합실 건축구조 변경에 따른 MIS장비 이설
3	임대상가 신설	- 정거장 수익시설 확충계획에 따른 신설 임대상가에 대한 전화, 인터넷, TV공시청 설비 및 배관, 배선 신설

Ⅲ		설계변경 자문 소위원회 자문결과

자문위원회 개최

일   자 : 2014. 12. 05(금) 14:00 ~ 18:00

장   소 : 도시철도국 3층 회의실

자문위원회 구성

구 분	자 문 위 원	비 고
위 원 장	∘ 차량과장
외부위원	∘ 서울메트로 강희관 차장, 이성계 차장 ∘ 이재석(전기철도 기술사) ∘ 오준한(정보통신기술사)
내부위원	∘ 황영필, 조대근
간 사	∘ 배종수

자문위원회 결과

자문요청 사항	자문결과	자문의견 요약
설계변경 사유의 적정성	가결
단가적용 및 변경물량의 적정성	조건부 가결	- 신규비목단가: 조달단가 조사후 최저단가 산출후 적용 - 발주청 요구사항 증가물량 또는 신설물량은 협의단가를 적용토록 되어있으므로 협의서 보완
공법의 적정성	가결

Ⅳ		조치 계획

설계변경 자문회의 개최결과  시스템분야 책임감리원에 통보

심의결과내용을 반영하여 변경설계 최종보고(감리단)

심의결과내용을 반영하여 변경계약 추진(시공사)

Ⅴ		행정 사항

외부 자문위원 수당지급

소요예산액 : 600,000원(150,000원×4인)

예산과목 : 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선2단계건설 시설비 및 부대비, 시설부대비

붙임  설계변경 자문위원회(소위원회) 자문결과 및 검토의견서  1부. 끝.