문서번호	도시철도설비부-11263
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
김한수		김영하	12/08 정찬웅
협조
	차량과장		황영일

“9호선 연장건설(2,3단계구간) 신호시스템 제작구매설치”

3단계구간 신호시스템 현장반입시기 연기 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

도시기반시설본부

도시철도설비부

“9호선 연장건설(2,3단계구간) 신호시스템 제작구매설치”

3단계구간 신호시스템 현장반입시기 연기 검토

총사업비 투자율 부족으로 9호선 3단계구간 개통일이 연기됨에 따라 신호시스템(Alstorm/현대정보기술) 현장 반입시기를 `16. 8월로 연기코자 함.

관련근거

❍ 도시철도토목부-9614호(2014.9.2) “9호선 2·3단계 개통관련 회신”

‣ 수신 : 교통정책과, 도시철도계획부

‣ 내용 : 3단계구간 `17년 하반기 개통예정(사유: 시 재정예산 부족)

※ 예산편성(`15년) : (최초요구) 3,362억원 → (최종조정) 2,009억원

현황 및 문제점

❍ 주요 선행공정(토목) 계획(예상)

- `14. 09월말 : 45%

- `15. 12월말 : 66% 예상

- `16. 06월말 : 75% 예상 ⇒ `18년 6월 실지개통 예상

❍ 현장여건미비로 신호시스템 현장반입일정 연기 필요(※ 당초반입일정 : `15.4월)

반입시기 검토

❍ 현장설치(5개월)부터 개별시험·연동검사(3개월)까지 8개월 소요

❍ 본선 기술시운전(12개월)과 영업시운전(2개월)에 14개월 소요

⇒ 현장설치부터 개통까지 총 22개월 소요 예상되므로 장비반입시기는 `16. 8월이 적정할 것으로 판단됨

※ 차량은 발주후 영업시운전까지 총 42개월 소요예상(`15.1~`18.6)

향후 계획

❍ 계약상대자(현대정보기술)에 반입일정조정 통보 및 수정예정공정표 제출 지시

붙임 : 도시철도토목부 관련공문 사본 1부.  끝.