종합인터페이스시험 열차운행 시나리오

▢ 일일열차 운행계획

일 시	구 분		내 용	비 고
12.8	오전	10:00 ~ 11:00	차량기지출발(회송열차모드) → 신논현경유 → 926(상선) 도착	931편성
		11:00 ~ 11:20	1,2단계 경계구간 통과(차수판, 안전문, 구름방지막 개방․복원)
		11:20 ~ 11:50	926상선 → 930상선, 회차 → 927하선 (수동 부본선운행) : 각역 무정차 통과, 상선회차	터널 안전 점검
	오후	13:10 ~ 13:40	926상선(일반출발)→930상선 → 회차(일반회차번호 변경) → 926하선(일반도착) → MCS 모드 변환 후 927상선 이동	FA운행 (자자)
		13:40 ~ 14:10	927상선(급행출발)→930하선 → 회차(급행회차번호 변경) → 927하선(급행도착) → MCS 모드 변환 후 926하선 이동	FA운행 (자자)
		14:10 ~ 14:40	926상선(일반출발)→930상선→ 회차(일반회차번호 변경) →926하선(일반도착) → MCS 모드 변환 후 927상선 이동	AUTO모드 (자수)
		14:40 ~ 15:10	927상선(급행출발)→930하선→회차(급행회차번호 변경) →927하선(급행도착) → 운행시험 종료	AUTO모드 (자수)
		15:10 ~ 16:00	1,2단계 경계구간 통과(차수판, 안전문, 구름방지막 개방․복원) → 925하선 주박선 정차
		16:00 ~ 17:00	925하선 주박선 → 차량기지입고(회송열차모드)

일 시	구 분		내 용	비 고
12.9	오전	10:00 ~ 11:00	차량기지출발(회송열차모드) → 신논현경유 → 926(상선) 도착
		11:00 ~ 11:20	1,2단계 경계구간 통과(차수판, 안전문, 구름방지막 개방․복원)
		11:20 ~ 11:50	926상선 → 930상선, 회차 → 927하선 (수동 부본선운행) : 각역 무정차 통과, 상선회차	터널안전 점검
	오후	13:10 ~ 13:40	926상선(일반출발)→930상선 → 회차(일반회차번호 변경) → 926하선(일반도착) → MCS 모드 변환 후 927상선 이동	FA운행 (자자)
		13:40 ~ 14:10	927상선(급행출발)→930하선 → 회차(급행회차번호 변경) → 927하선(급행도착) → MCS 모드 변환 후 926하선 이동	FA운행 (자자)
		14:10 ~ 14:40	926상선(일반출발)→930상선→ 회차(일반회차번호 변경) →926하선(일반도착) → MCS 모드 변환 후 927상선 이동	AUTO모드 (자수)
		14:40 ~ 15:10	927상선(급행출발)→930하선→회차(급행회차번호 변경) →927하선(급행도착) → 시험 종료	AUTO모드 (자수)
		15:10 ~ 16:00	927하선 → MCS 모드 변환 후 926하선 이동 → 927상선 이동 및 주박
12.10 ~ 12.11	오전	09:30 ~ 10:20	927상선 → 930상선, 회차 → 926하선 → 926상선 (수동 부본선운행) : 각역 무정차 통과, 상선회차	터널안전 점검
		10:30 ~ 11:00	926상선(일반출발)→930상선 → 회차(일반회차번호 변경) → 926하선(일반도착) → MCS 모드 변환 후 927상선 이동	FA운행 (자자)
		11:00 ~ 11:30	927상선(급행출발)→930하선 → 회차(급행회차번호 변경) → 927하선(급행도착) → MCS 모드 변환 후 926하선 이동	FA운행 (자자)
	오후	13:10 ~ 13:40	926상선(일반출발)→930상선→ 회차(일반회차번호 변경) →926하선(일반도착) → MCS 모드 변환 후 927상선 이동	AUTO모드 (자수)
		13:40 ~ 14:10	927상선(급행출발)→930하선→회차(급행회차번호 변경) →927하선(급행도착) → 시험 종료	AUTO모드 (자수)
		14:10 ~ 15:00	927하선 → MCS 모드 변환 후 926하선 이동 → 927상선 이동 및 주박

일 시	구 분		내 용	비 고
12.12	오전	09:30 ~ 10:20	927상선 → 930상선, 회차 → 926하선 → 926상선 (수동 부본선운행) : 각역 무정차 통과, 상선회차	터널 안전 점검
		10:30 ~ 11:00	926상선(일반출발)→930상선 → 회차(일반회차번호 변경) → 926하선(일반도착) → MCS 모드 변환 후 927상선 이동	FA운행 (자자)
		11:00 ~ 11:30	927상선(급행출발)→930하선 → 회차(급행회차번호 변경) → 927하선(급행도착) → MCS 모드 변환 후 926하선 이동	FA운행 (자자)
	오후	13:10 ~ 13:40	926상선(일반출발)→930상선→ 회차(일반회차번호 변경) →926하선(일반도착) → MCS 모드 변환 후 927상선 이동	AUTO모드 (자수)
		13:40 ~ 14:10	927상선(급행출발)→930하선→회차(급행회차번호 변경) →927하선(급행도착) → 시험 종료	AUTO모드 (자수)
		14:10 ~ 15:00	1,2단계 경계구간 통과(차수판, 안전문, 구름방지막 개방․복원) → 925하선 주박선 정차
		15:00 ~ 16:00	925하선 주박선 → 차량기지입고(회송열차모드)

▢ 시험열차운행 다이어(표준)

※ 열차출발 시간은 시험상황에 맞춰 유동적으로 조정(2단계관제)