문서번호	정수시설과-3608
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
정인영		12/09 윤종민
협조
	주무관		최양교

설계변경(제2회) 심의위원회 결과 보고

(2014년 기계설비 보수공사(연간단가))

2014. 12.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

설계변경(제2회) 심의 결과 보고

(2014년 기계설비 보수공사(연간단가))

「2014년 기계설비 보수공사(연간단가)」에 대한 설계변경(제2회) 심의위원회 개최 결과를 아래와 같이 보고 드림.

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 기계설비 보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2014. 4. 2. ~ 2014. 12. 31.

○ 공사개요

- 송수펌프실 지배수펌프 및 밸브류, 배관 교체(3.7kw 2대)

- 구내식당 배수정펌프  및 밸브류, 배관 교체(1.5kw 2대)

- 샘플링펌프 배관시스템 개선 2개소

- 활성탄 저장탱크 에어배관 및 밸브류 교체

- 알류미늄 보온관 교체

- 각종 잡철물 제작 설치 및 기계설비 도장

○ 계 약 자 : 덕원개발 대표 이철민

▢ 설계변경 심의위원회 개최 현황

○ 일    시 : 2014년 12월 9일(화) 09:20

○ 장    소 : 1층 정수시설과 회의실

○ 참석 인원 : 총 5명

- 위 원 장 : 정수시설과장

- 심의위원 : 공업6급 최양교, 공업6급 곽희영, 공업6급 윤양호, 시설6급 변병수

○ 심의내용

- 설계변경 타당성 여부

- 신규공종 수량 산출 및 단가 적정성 여부

- 계약물량 증감 공종 수량산출 및 단가 적정성 여부

- 계약물량 적정산정 및 요율의 적정성 여부

▢ 심의결과

○ 의결 내용 : 본안통과

- 설계변경 타당성 : 적정함

- 신규공종 및 단가적용타당성 : 타당함

- 물량증감 공종 수량산출 및 단가적용 타당성 : 타당함

- 각종 제반규정 준수여부 : 적정하게 준수

▢ 향후계획

○ 설계변경 심의위원회 심의결과에 따라 본안대로 설계변경 시행.

붙임 : 1. 설계변경 심의 의결서 1부.

2. 설계변경 심의 요청서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.    끝.