문서번호	기전설비2과-1475
결재일자	2012.12.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비2과장	시설부장		한강사업본부장
협 조
	총무부장
	총무과장
	기획예산과장

- 망원 초록길 조성사업 -

지하차도 상부 우회도로 변경(안) 추진계획

2012. 12

한강사업본부 시설부

(기전설비2과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	마포구	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

- 망원 초록길 조성사업 -

지하차도 상부 우회도로 변경(안)추진 계획

시장님 검토지시 및 마포구 요구사항과 관련, 망원초록길 지하차도 상부에 설치 예정인 우회도로 취소와 이에 따른 주변 환경정비개선(안)에 대한 추진계획 검토 보고임

Ⅰ		추진배경

○ ‘12.10.12 한강 자전거투어시 시장님 검토지시 사항과 관할구청(마포구)         및 시의원(채재선, 마포구) 요구사항 관련임

	《우회도로관련 검토지시․요구사항》
○ 시장님 검토지시 사항 - 망원초록길이 당초 차도와 자전거도로 구분되어 있는데, 자전거도로만 조성하였으면 함 ○ 시의원 및 마포구 요구사항 - 초록길 상부에 계획된 U-turn 차선 취소 ▸시민들이 이용할 초록길 폭이 더 협소해지고, 사람과 차량이 인접 하여 통행한다는 것은 어울리지 않음

Ⅱ		지하차도 상부 우회도로(U-turn차로) 취소 검토

○ 검토사유

- 시장님 검토지시와 마포구 및 시의원 요구사항과 관련하여 당초 계획된  지하차도 상부 우회도로 개설 취소 여부 검토

○ 설치목적

- 강변북로에서 한강망원공원으로의 진입을 위한 것으로, 지하차도 설치로  인하여 폐쇄되는 기존 진출로에 대한 대체도로(구리방향→한강공원 진입)

○ 설치개요

- 시설규모 : 폭 3.5m (1개 차로),  총연장 473m

- 공 사 비 : 200백만원

○ 우회도로 개설 취소에 따른 대체도로 검토

- 강변북로에서 한강공원으로 진출로

□ 구리방향 진출로 : 상행선 ＃1진출로로 진출(그림①)

□ 일산방향 진출로 : 하행선 ＃2진출로를 이용 망원나들목으로 진출(그림②)

- 한강공원에서 강변북로로의 진입로 : 망원나들목에서 진입(그림③)

①

③

②

초록길

안내센터

군부대

일산

구리

망원나들목

○ 검토의견

- 지하차도 상부에 설치예정이었던 우회도로(U-turn차로)의 목적이 강변북로 구리방향에서 한강망원공원으로의 진입을 위한 것이나, 현재 ＃2진출로를 이용한 망원나들목으로의 진출이 가능한 여건으로 취소하여도 별 무리가 없다고 판단되므로,

- 시장님 검토지시와 마포구 및 시의원 요구사항과 관련하여, 지하차도 상부 우회도로 구간중 자전거도로는 유지하고 차로구간은 초록길 공원으로 조성코자 함

○ 개선효과

- 시장님 검토지시와 마포구 및 시의원 요구사항 등에 대한 적극적 검토수용

- 상부공원 폭 확대로 초록길 효과 증대 : 확대면적 242㎡(전체공원의 10.3%)

- 공원내 차량 통행에 따른 소음, 분진 등 사전 방지로 쾌적한 공원분위기 조성

○ 조치계획

- 우회도로(U-turn차로) 개설 취소에 따른 기술적 측면의 관련분야 전문가 의견수렴 후 추진

Ⅲ		우회도로 취소에 따른 주변 환경정비(안) 수립

▣ 망원2주차장 이전(안)

○ 사 유

- 우회도로 개설 취소에 따라 접근이 불가

- 초록길과 망원생태공원 사이에 위치하여 공간단절 요소임

○ 이전 대상부지 : 망원나들목 제외지측 기존 주차장 인접 녹지대

- 주차장 관리부서인 공원기획과와 협의하여 주차장 위치 및 규모 결정후 추진

▣ 망원2주차장 이전부지 활용(안)

○ 사 유

- 초록길 ~ 망원 생태공원 사이에 위치하고 있는 망원2주차장 및 론볼장 이전부지 등이 나대지로 존치하게 되어 활용방안 강구 필요

○ 활용(안) : 초록길 ~ 망원생태공원과 연계한 녹지공간 조성

- 정비구간 : 망원2주차장 ~ 나대지 ~ 론볼장 이전부지

□ 정비규모 : 폭 50m,  연장172m,   면적 8,600㎡

▣ 망원나들목 ～ 망원 안내센터간 도로정비(안)

○ 사 유

- 초록길 지하차도로 기존 진입로가 폐쇄됨에 따라 현재 일방통행으로 운영 중인 망원 안내센터에서 망원나들목 구간 양방통행으로 개선 필요

○ 도로정비(안)

- 구    간 : 망원 나들목 ~ 망원 안내센터 앞(망원2주차장 예정부지)

- 도로확장(일방향 ⇒ 양방향) : B=6.0m,  L=420m

- 보도개설(신설) : B=4.0m,  L=420m

초록길

망원2

주차장

론볼장

망원

생태공원

안내센터

기존

주차장

망원

나들목

주차장

이전부지

기존: 일방통행

개선: 양방통행

주차장 이전

Ⅳ		시행방안 및 예산조치

○ 시행방안

- 관련전문가의 의견을 수렴한 최종(안)으로 설계 및 공사 시행

□ 시행방법 : 현재 추진중인 망원초록길 조성 공사에 포함 시행

□ 소요예산 : 2,100백만원

구 분		규 모	소요예산
공사비	상부우회도로 취소	․우회도로 취소 1차로	-200
	망원2주차장 이전	․잔디블럭 주차장 : 80면	475
	진입도로 정비	․도로확장 : 1차로→2차로 ․보도신설 : A=15a, B=4.0m	350
	유휴 고수부지 정비	․고수부지 정비 : 8,600㎡	950
	우회도로 취소구간 정비	․조경정비 : 1,655㎡	460
	소 계		2,035
설 계 비		․실시설계 1식	65
총 소요예산			2,100

- 망원2주차장 이전 및 진입도로 정비공사는 Fast-Track으로 우선 시행

□ 사 유 : ’13. 2월 3단계 공사 착공시 Sheet Pile 공사로 한강망원공원 및 주차장 진입로 폐쇄가 불가피하여 이용시민의 불편 및 민원 예상

□ 추진방안 : 시행 방침을 득한 후 우선 용역시행과 공사 병행 추진

○ 예산조치

- 총사업비를 변경하여 소요예산 추가 확보

(금액단위 : 억원)

구 분	당 초	변 경	증․감
총사업비	375	396	21
설 계 비	15	15	-
공 사 비	340	361	21
감 리 비	20	20	-

- 총사업비 증액에 따른 투자심사 재심사 조치

□ 사 유 : 지방재정 투․융자심사지침에 의거 공사계약 체결 이후 사업비가 30억원(E/S 금액제외) 이상 증액됨에 따라 재심사 대상임

□ 사업비 증액내역

(금액단위 : 억원)

공사계약체결시 (’09.12.30)	1차 변경(’11.12.08)			2차변경(예정)
	총사업비	증액금액		총사업비	증액금액(누계)
		전체분	E/S 제외		전체분	E/S 제외
335	375	40	29	396	61	50

○ 향후 추진일정

- ’12. 12 : 우회도로 취소 및 주변 환경정비(안)에 대한 관련 전문가 자문회의 실시

- ’13. 01 : 사업계획 변경 시행방안 확정 - 본부장 방침

- ‘13. 03 : 투자심사 재심사 실시

첨부 1. 주변 현황도 1부.(별도첨부).

2. 소요 사업비 산출근거 1부.