요구번호 : 2013-13

결산검사위원 요구자료

박 양 숙  위원

□ 요구일시 : 2013. 5. 2. (목)

□ 요구자료내용

- 상임위원회별 사업설명서 제출(119건)

※ 도시안전실 : 총 23건
건설위(12건), 도안위(11건)

□ 제출부서 : 도시안전실

〈 상임위원회별 제출사업 목록 〉

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*******                                     (단위 : 백만원)

연번	사업명	’12년 예산액	소관기관
1	************	162,212	도시안전실 (*****)
2	**********	29,412	도시안전실 (*******)
3	***********	30,000	도시안전실 (*****)
4	********	15,000	도시안전실 (*****)
5	*************	6,600	도시안전실 (*****)
8	*********************	5,400	도시안전실 (*****)
9	*************	4,200	도시안전실 (*****)
10	*********	600	도시안전실 (*****)
11	**********************	380	도시안전실 (*****)
12	********************	52,000	도시안전실 (*****)
13	*********	32,500	도시안전실 (*****)
14	*****************	5,571	도시안전실 (*****)

※ 건설위 소관 요구사업목록 중 ‘도시안전실’만 발췌

1		강남순환도시고속도로 건설

(도시안전실, 도로계획과)

강남지역 외곽을 통과하는 도시고속도로를 건설하여 동ㆍ서간 교통을 원활히 하고 강북지역의 내부순환로와 연계하여 체계적인 통합간선 도로망을 구축

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 위    치 : 금천구 독산동(소하JCT) ~ 강남구 일원동(수서IC)

-  규    모 : 폭 6~8차로, 연장 22.9㎞ (민자사업구간 12.4km)

❍ 사업기간 : 1994~2016

❍ 총사업비 :1,551,445백만원(민간자본 537,100백만원 별도)

- ’11년이전 :   728,537백만원 ,  ’12년 :   161,200백만원 ,  ’13년 이후 :   661,708백만원

❍ 기대효과

- 서울시 내․외부 연계로 환상형 순환체계를 형성하고 수도권 주요 간선도로와의 연계체계를 확립하여 교통용량 증대 및 분산을 유도 하고 서울시 전체 균형발전 도모

2		추 진 결 과

○  '94.07 ~ '96.12 : 타당성조사 시행

○  '97.12 ~ '02.12 : 기본 및 실시설계 시행

○  '07.05.31    : 4공구 착공

○ '07.11.20     : 민자구간 착공

○ '09.03.31     : 8공구 착공

○ '13.04.30      : 전체 공정율 50.0%

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	140,000	30,274	-300	169,974	159,543	10,396	35	93.9%
2011	136,900	10,396		147,296	144,375	1,012	1,909	98.0%
2012	161,200	1,012		162,212	159,619	2,588	4	98.4%

※ 당해연도 추경은 당초예산에 포함 작성, ‘12년 신규사업은 ’12년도만 작성

※ 예비비 사용이 있을 경우에는 이․전용에 포함하고, 예비비 액수를 별도로 표시

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
162,212	159,619	98.4%

3		추진상 애로점

❍ 과천시 통과구간 도시계획시설 결정 지연

- 과천시 구간(과천시 주암동 L=570m)의 도시계획시설 결정과 관련하여 그 간 10년간 과천시와 수십차례 협의해왔고, `13.3.21 과천시로부터 도시계획시설 결정 절차를 추진하겠다는 통보가 있었음.

- 과천시에서는 열람공고(`13.4.8)하고 시의회 의견을 청취하는 등 관련 절차를 이행중임.

- 도시계획시설 결정 절차가 정상적으로 추진시 `13.9월경 완료될 것으로 예상되므로, 2016년 5월 개통하려면 적기 예산투자가 필요한 실정임.

4		향 후 계 획

❍ `16.5월 : 사업완료

2		지하도상가 위탁관리

(도시안전실, 보도환경개선과)

시 산하 시설물관리 전문기관인 시설관리공단에 지하도상가를 위탁하여 상가의 공공성을 확보하고 상가활성화 등 시설물관리의 효율성 도모

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 위탁관리기관 시설관리공단에 월별 또는 분기별 위탁관리비 지출

- 지하도상가의 안정적인 관리를 위해 시설관리공단 지속적 지도·감독

❍ 사업기간 : 2012.1∼2012.12

❍ 총사업비 : 29,412백만원

- ’12년 : 29,412백만원

❍ 기대효과

- 쾌적하고 안전한 쇼핑문화 공간 제공 및 상가경쟁력 제고와 활성화

도모

2		추 진 결 과

① 매월 위탁관리비 지출

구분	계	민간위탁금	시책추진업무추진비	비고
계	29,412	29,406	5
1월	2,678	2,677	0.4
2월	1,656	1,656	0.4
3월	2,465	2,464	0.4
4월	1,805	1,804	0.4
5월	2,112	2,112	0.4
6월	1,808	1,807	0.4
7월	1,495	1,495	0
8월	1,979	1,978	0.8
9월	2,603	2,603	0.3
10월	2,869	2,869	0.5
11월	3,104	3,104	0.4
12월	4,838	4,837	0.4

(단위 : 백만원)

② 결산잔액 반납

계	민간위탁금	시책추진업무추진비	비고
313	313	0	2013.2월 반납

(단위 : 백만원)

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	27,218		9	27,227	26,653		574	97.9%
2011	25,834			25,834	25,834		0	100.0%
2012	29,412			29,412	29,099		313	98.9%

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
29,412	29,099	98.9%

3		향 후 계 획

❍ 위탁관리사업 지속추진

- 사업기간 : 2013.1∼12월

- 총사업비 : 31,271백만원

3		신림~봉천터널 건설

(도시안전실, 도로계획과)

서울 남부지역에 동․서간 간선도로를 확충하여 극심한 교통정체를 일으키고    있는 남부순환로의 교통량 분산으로 관악구, 금천구, 구로구, 영등포구 지역    주민 통행불편 해소 및 지역균형발전 촉진

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 위    치 : 남부순환로 시흥IC ~ 낙성대JCT

- 규    모 : 왕복4차로, 연장 5.58km

❍ 사업기간 : 2007~2018이후

❍ 총사업비 : 550,700백만원

- ’11년이전 :   32,000백만원 ,  ’12년 :   30,000백만원 ,  ’13년 이후 :   488,700백만원

❍ 기대효과

- 남부순환로 교통량 분산효과로 남부순환로 교통정체 해소 및 서울 서남부 지역 주민들의 강남순환도시고속도로 이용 거리 단축으로 서울 남부지역 동․서간 통행시간 단축 및 차량운행비, 환경비용 절감 효과

2		추 진 결 과

○ ’07.11.02 : 서울 서남부 도로망체계 개편계획 수립

○ ’10.04.01 : 도시계획시설(도로) 결정

○ ’10.10.08 : 공사 착공

○ ’12.5.1, 5.18 : 행정1,2부시장 연석회의(2회)

○ ’12.6.29 : 숙의 개최(시장단 및 외부전문가)

- 신림~봉천터널은 지역 교통여건상 필요한 도로이므로 조속 사업추진

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	28,000	138		28,138	13,218	14,887	32	47.0%
2011	0	14,887		14,887	14,281		606	98.9%
2012	30,000			30,000	2,339	27,661		7.8%

※ 당해연도 추경은 당초예산에 포함 작성, ‘12년 신규사업은 ’12년도만 작성

※ 예비비 사용이 있을 경우에는 이․전용에 포함하고, 예비비 액수를 별도로 표시

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
30,000	2,339	7.8%

3		추진상 애로점

❍ 남부순환로 교통정체 해소와 지역발전을 위해 조속 사업추진 필요

- 서울 서남부 지역의 교통정체 해소와 지역균형발전 촉진을 위하여 조속히 사업이 추진되어야 하고, 2016년 개통예정인 강남순환도시고속도로와 동시 개통하여 사업효과를 극대화할 필요가 있음

- 사업추진 필요성 등 사업추진방향에 대한 검토가 완료된 만큼, 원활한 사업추진을 위하여 연차별로 적정 규모의 재정투자가 필요함

4		향 후 계 획

❍ `14.12월 : 보상완료

❍ `18.12월 : 공사완료

4		월드컵대교 건설공사

(도시안전실, 도로계획과)

성산대교 및 성산로 주변의 상습정체 해소 및 서부간선지하도로와 연계한
서울 서남부지역 간선도로망 체계 구축

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 위  치 : 마포구 상암동 ~ 영등포구 양평동

- 규  모 : 교량건설 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장=1,980m

주경간교 855m(비대칭 복합 사장교 540m, 강박스거더교 315m)

접속교 1,125m(남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)

❍ 사업기간 : 1999 ~2015

❍ 총사업비 : 355,049백만원

- ’11년이전 : 26,720백만원 ,  ’12년 : 15,000백만원 ,  ’13년 이후 : 313,329백만원

❍ 기대효과

- 포화상태인 성산대교의 교통처리 용량을 분담함으로써 서울 서부지역의 교통정체를 해소하고 통행여건 개선에 기여

2		추 진 결 과

① '01. 4∼'06.12 : 기본 및 실시설계 시행

② '09. 1.19	: 월드컵대교 추진계획 방침(부시장)

③ '10. 3.22	: 공사계약 및 착수

④ '13.05 현재     : 수상구간 우물통기초 15기 시공중

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	7,500	200		7,700	5,502	2,198	0	71.4
2011	10,000	2,198		12,198	12,195	0	3	99.9
2012	15,000	0		15,000	15,000	0	0	100

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
15,000	15,000	100%

3		추진상 애로점

❍ 연간 600억 규모의 예산이 투입되어야 하나 서울시 재정악화로 인하여 예산확보가 이루어지지 않아 준공기한내 완료가 어려워 공기연장이 불가피한 실정임

4		향 후 계 획

❍ '13. 12 : 교량 하부구조물 완료

❍ '14. 12 : 교량 상부구조물 완료

❍ '15. 08 : 공사준공 예정(준공기한 연기예정)

5		도로시설물 내진성능 개선

(도시안전실, 도로시설과)

최근 한반도 주변에서 잇따른 강진 발생으로 많은 피해가 발생하고 있으며 우리나라도 매년 지진 발생횟수가 증가 추세에 있어 도로시설물에 대한 내진 성능개선 등 내진대책을 강화하여 재해 및 재난방지

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 대상 및 위치

․탄천2고가교 : 강남구 청담동 ~ 일원동(동부간선로)

․신천1․2교  : 송파구 신천동 ~ 풍납동(올림픽대로)

- 규모 : 교량받침 교체 467개소(탄천2고가 257개소, 신천1․2교 210개소)

❍ 사업기간 : 2011. 1. 1 ~ 2013. 5. 24

❍ 총사업비 : 9,665백만원

- ’11년이전 : 3,065백만원, ’12년 : 6,600백만원, ’13년이후 : -

❍ 기대효과

- 도로시설물에 대한 안정성 확보로 도시기반시설에 대한 안정성 유지

2		추 진 결 과

❍ 내진보강 시행

- 탄천2고가교 : 257개소 내진받침교체 완료

- 신천1․2교 : 210개소 내진받침교체 완료

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010
2011	3,065			3,065	1,402	1,598	65	45.7
2012	6,600	1,598		8,198	7,142	604	452	87.1

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
8,198	7,142	87.1

3		추진상 애로점

❍ 없음

4		향 후 계 획

❍ 신천1․2교 내진보강 공사 완료

- 2013. 5. 24 : 준공 예정

8		서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사

(도시안전실 도로계획과)

보광동과 강변북로를 연결하는 서빙고 고가교를 철거후 왕복 2차로로 재설치하여
강변북로 교통정체 해소 및 서빙고로와 두무개길의 도로효율을 제고하여 원활한
교통소통으로 시민 교통편의 제공

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 위  치 : 용산구 보광동 36-10 ~ 서빙고동 271-79

- 규  모 : 기존교량철거 : PSC Beam교, RC옹벽

기존교량 보수보강 : 경원선통과구간(1식)

교량공사: 강변북로구간(B=6.4m, L=115m)

두무개길구간(B=10.4m, L=290m)

❍ 사업기간 : 2010.12 ~2014.12

❍ 총사업비 : 27,300백만원

- ’11년이전 : 1,596백만원 ,  ’12년 :5,400백만원 ,  ’13년 이후 : 20,304백만원

❍ 기대효과

- 서빙고로 및 두무개길 도로효율 제고

- 강변북로 일산방향 차로확보(3→4차로)로 시민 교통편의 제공

2		추 진 결 과

① ´08. 10. 4 : 강변북로 연결로 개선계획 부시장 방침(제483호)

② ´10. 09    : 실시설계 완료

③ ´10.12.30  : 공사 계약 및 착수

④ ´13.05.현재  : 가교 구조물 설치완료

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	1,000	0	0	1,000	1,000	-	-	100
2011	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	5,400	-	-	5.400	5.370	-	30	99.4

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
5,400	5,370	99.4

3		추진상 애로점

❍ 차수(연차)별 예산 부족으로 전체공기 지연 및 사업추진 어려움

- 적정예산 미확보로 효율적인 사업진행 곤란, 시민 교통불편 가중

4		향 후 계 획

❍ 2013.06 : 가설교량 교통 우회후 본교량 철거 작업 시행

❍ 2014.12 : 공용 개시

9		내부순환로 교면포장 개량공사

(도시안전실, 도로시설과)

내부순환로 포장개선 추진계획에 따라 노후 및 손상부분에 대해 적기 포장보수를 시행하여 평탄성 개선 및 시설물 수명연장

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 위    치 : 내부순환로 전구간(22km, 성산대교 북단 ~ 성동구 성수동 동부간선로)

․ 홍제천고가교(서부), 홍지문터널(북부), 정릉터널(북부), 북부고가교(북부), 정릉천고가교(성동)

- 사업규모 : 5,482a(전면 3,231a, 부분 2,251a)

❍ 사업기간 : 2011. 1.  ~ 2015.12.

❍ 총사업비 : 34,000백만원

- ’11년이전 : 6,481백만원 ,  ’12년 : 4,200백만원 ,  ’13년 이후 : 23,319백만원

❍ 기대효과

- 내부순환로 교면포장의 저하된 기능의 회복 및 향상

- 하부구조물의 피해억제 및 수명연장을 통한 안정성 증대

2		추 진 결 과

❍ 2011 ~ 2012년 포장공사 시행

- 2011년 : 홍제천고가 성산대교 북단~홍제램프(양방향) A=1,338a

- 2012년 : 홍제천고가 홍제램프~홍지문터널 앞(양방향, 정릉천고가 마장램프~동부간선로 접속부(성동방향)  A=764a

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010
2011	6,481	-	-	6,481	6,473	-	8	99.9
2012	4,200	-	-	4,200	4,181	-	19	99.5

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
4,200	4,181	99.5

3		추진상 애로점

❍ 예산 부족에 따라 투자심사 당시 계획에 비해 사업 추진이 지연됨

- 연차별 소요예산 비교

(단위:백만원)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년 이후	비고
당초 계획	6,481	7,580	6,532	13,407	2014년 완료
변경 계획	6,481	4,200	3,000	20,319	2015년 완료

4		향 후 계 획

❍ 2013년 시행 계획

- 홍지문터널(양방향), 정릉터널(양방향), 북부고가교(정릉터널→정릉  램프, 성동방향) 포장 시행  A=892a

❍ 2014년 이후 시행 계획

- 정릉천고가교 및 북부고가교 포장 시행 A=2,488a

10		북악터널보수공사

(도시안전실, 도로시설과)

터널내 파손된 배수로 및 덮개를 정비하여 구조물의 기능을 회복하고,
방호책설치 및 보도를 정비하여 보행자안전 확보 및 환경개선

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 보행로 환경개선 : 도보조성(L) = 810m, 차량방호책 = 813m

❍ 사업기간 : 2012. 4. 2 ~ 2012. 9.21

❍ 총사업비 : 600백만원

- ’11년이전 : -,  ’12년 : 600백만원,  ’13년이후 : -

❍ 기대효과

- 노후된 터널내부 점검통로를 시민이 안전하게 걸을 수 있도록 안전시설을 강화하고, 정릉동 주민과 평창동 주민이 교류할 수 있는 보행 통로를 제공 시민편의 증진

2		추 진 결 과

❍ ‘11. 4.29 ~ 9.25 : 북악터널 정밀점검 완료

❍ ‘12. 4. 2 ~ 9.21 : 공사 시행

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010
2011
2012	600			600	590		10	98.3

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
600	590	98.3%

3		추진상 애로점

❍ 없음

4		향 후 계 획

❍ 없음

11		한강교량 및 1종시설물 경관조명 유지관리

(도시안전실, 도로시설과)

한강교량 및 1종시설물에 설치된 경관조명을 처음 설치한 상태로 관리하여 외국관광객들과 시민들에게 볼거리를 제공하고 서울의 야경을 국제적인 도시로 만들기 위함

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 위    치 : 한강교량 및 1종시설물

- 규    모 : 총 32개소

∙한강상 교량 23개소

∙기타 교량, 고가차도 9개소

- 내    용

∙경관조명 일상유지보수(연간단가) 공사

∙램프‧안정기 등 보수자재 구매 등

❍ 사업기간 : 2012. 2. ～ 2013. 2.

❍ 총사업비 : 1,180백만원

- ’11년이전 : 400백만원 ,  ’12년 : 380백만원 ,  ’13년 이후 : 400백만원

❍ 기대효과

- 외국 관광객들과 시민들에게 볼거리 제공으로 관광객 유치 효과

- 서울의 야경을 국제적인 도시로 꾸며 서울 위상 제고

2		추 진 결 과

❍ ‘12. 2~ ’13. 2 : 공사시행 및 보수자재 구매

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	442	-	-	442	442	-	-	100
2011	400	-	-	400	313	-	87	78
2012	380	-	-	380	361	-	19	95.0

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
380	361	95.0%

3		추진상 애로점

❍ 없   음

4		향 후 계 획

❍ ‘13. 2 ~ ’14. 2 : 공사시행 및 보수자재 구매 (사업비 400백만원)

12		사가정길~암사동간 도로개설(암사대교)

(도시안전실, 도로계획과)

강동구, 중랑구 및 구리시를 연결하는 한강횡단 도로망을 구축하여 서울 동부권에 급증하는 교통수요를 대처하고 강동구 및 구리시 지역의 교통소통개선 및 동북지역 발전 도모

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 위    치 : 강동구 암사동 ~ 구리시 아천동

- 규    모 : B=4~6차로, L=2.74km (암사대교 1,133m)

❍ 사업기간 : 2001 ~ 2014

❍ 총사업비 : 378,312백만원

- ’11년이전 :  264,370백만원 ,  ’12년 :26,152백만원 ,  ’13년 이후 : 87,790백만원

❍ 기대효과

- 동부지역의 동서방향 교통 소요시간 단축

- 동부간선, 천호대로, 강변북로 등 인근 간선도로의 교통량 부담 완화

- 중랑 및 강동구 일대의 접근 경로 다양화

2		추 진 결 과

○ '03.09.    : 기본설계 시행

○ '04.04.    : 제2차 수도권 광역교통 5개년계획 계속사업으로 지정

○ '05.09.    : 실시설계 시행

○ '06.04.    : 보상 및 공사착수

○ '12.06.20 : 총사업비 자율조정 승인

○ '13.04.30 : 강남북IC 보상 및 시공중 (공정율 80%)

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	60,000	6,457	-	66,457	39,502	16,944	10,011	59.43%
2011	54,000	16,944	-	70,944	44,189	26,437	318	62.29%
2012	26,152	26,437	-	52,589	46,433	5,912	244	88.29%

※ 당해연도 추경은 당초예산에 포함 작성, ‘12년 신규사업은 ’12년도만 작성

※ 예비비 사용이 있을 경우에는 이․전용에 포함하고, 예비비 액수를 별도로 표시

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
52,589	46,433	88.29%

3		추진상 애로점

❍ 토평삼거리 지하화 공사비 부담을 요구하며 도시관리계획 변경, 행위허가 등 행정절차 미 협조로 인한 공사 지연

- 본 사업 계획시 구리시와의 협의과정에서('05.12) 구리시 토평삼거리의 교통정체를 예상하여 강변북로를 횡단하는 토평삼거리 지하차도 설치를 요구하였으며,

- 우리시는 국비보조 50%인 광역도로사업에 포함 시행키로 방침결정후 구리시에 통보 하였고 암사대교 건설공사시 시행코자 그간 중앙정부와의 협의 및 방문 등 지속적인 노력을 기울였으나,

- 본 사업 과업범위와 직접 관련이 없다는 국토부의 최종의견('13.3.5)으로, 지하차도 대신 다른 구리시 요구 시설물을 설치해주는 대안으로 구리시 및 국토부와 협의중임

4		향 후 계 획

❍ `13. 12	: 공사 및 연결도로 보상 시행 (목표공정 90%)

❍ `14.  5	: 개통 (용마터널과 동시개통 추진)

❍ `14. 12월    : 사업완료

13		포장도로 유지보수

(도시안전실, 도로관리과)

장기간 사용에 따른 노후․파손․균열발생 등 포장상태가 불량하고 기상악화(강우, 강설)로 소파(패임)가 빈번하게 발생되는 등 시민고객에의 안전을 저해하는 지역을 신속하게 정비하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 위 치 : 방아다리길 등 258개 노선

- 규 모 : 연장 127㎞  면적 10,497a

❍ 사업기간 : 2012.1.1 ~ 2012.12.31

❍ 사업비 : 32,394백만원

❍ 기대효과

- 포장상태 불량으로 시민고객의 안전을 저해하는 지역을 신속하게 정비하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

2		추 진 결 과

❍ 방아다리길 등 1,718개소를 깨끗이 정비하여 도로파손(포트홀) 억제 및 도로평탄성 향상 등으로 시민불편 해소에 만전을 기하였음

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	23,918	1,003	9,274 (예비비 8,194)	34,195	34,018		177	99.5%
2011	24,638		8,000 (예비비 8,000)	32,638	32,108		530	98.4%
2012	32,500		-106	32,394	32,242		152	99.5%

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
32,394	32,242	99.5

3		추진상 애로점

❍ 없 음

4		향 후 계 획

❍ 지속적으로 불량 아스팔트 포장도로를 정비하여 쾌적한 도로환경 조성에 만전을 기하고자 함

14		시설물(교량) 안전점검 및 진단

(도시안전실, 도로시설과)

도로시설물 상태를 정기적으로 관찰하여 시설물 손상부분을 사전 발견하고 보수보강 방법을 제시함으로써 시설물의 안전 확보

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 대  상 : 반포대교 외 134개소 도로시설물

- 규  모 : 정밀점검 116개소, 정밀안전진단 19개소

※ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조(안전점검의 실시) 및 제9조

(정밀안전진단의 실시)

∙ 실시시기 : 정밀점검 1~3년에 1회이상, 정밀안전진단 4~6년에 1회이상

❍ 사업기간 : ‘12. 1 ~ ’13. 2

❍ 총사업비 : 17,124백만원

- ’11년 : 6,770백만원 ,  ’12년 :  5,571백만원 ,  ’13년  : 4,783백만원

❍ 기대효과

- 도로시설물 손상부분을 사전 보수보강함으로써 시설물의 기능유지 및 안전성 확보

2		추 진 결 과

① 올림픽대교 등 정밀점검 116개소 완료

② 반포대교 등 정밀안전진단 18개소 완료

※ 동호대교 정밀안전진단 : 1개소 진행중(‘13.7 준공예정)

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	9,800	-	▿ 151	9,649	8,358	-	1,442	86.6
2011	6,770	-	-	6,770	6,102	-	668	90.1
2012	5,571	-	-	5,571	4,440	536	595	79.7

※ ‘12년 사고이월 사유 : 동호대교 정밀안전진단용역(536백만원)은 서울메트로 관리하는          철도교와 통합발주로 착수가 늦어져 절대공기 부족(용역기간 : ‘12.8.9~’13.7.23)

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
5,571	4,440	79.7%

3		추진상 애로점

❍ 없  음

4		향 후 계 획

❍ ‘13년 정밀점검 및 정밀안전진단 시행

- 정밀점검 114개소, 정밀안전진단 12개소(사업비 4,783백만원)

*********                                 (단위 : 백만원)

연번	사업명	’12년 예산액	소관기관
1	************ *******	139,080	도시안전실 (******)
2	********************	27,985	도시안전실 (******)
3	**********	27,096	도시안전실 (*******)
7	************	8,277	도시안전실 (*****)
8	*****************	5,045	도시안전실 (******)
9	**************	3,000	도시안전실 (*****)
10	************	1,836	도시안전실 (******)
11	****************	4,125	도시안전실 (*****)
12	*********************	2,504	도시안전실 (******)
18	***************	996	도시안전실 (******)
19	*********	644	도시안전실 (******)

※ 도안위 소관 요구사업목록 중 ‘도시안전실’만 발췌

1		하수관거 종합정비사업(27개 사업)

(도시안전실, 물재생계획과)

균열, 침하, 경사불량, 통수능 부족 등 노후불량 하수관거를 배수분구 단위로 체계적이고 합리적으로 정비함으로써 침수피해 예방, 배수체계 개선, 시민 생활환경 개선 도모

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 27개 배수분구 노후․불량 하수관거 정비

- D300mm ~ □2.5×2.0m, L=808㎞

❍ 사업기간 : '07 ~ '20년

❍ 총사업비 : 979,889백만원

- ‘11년이전 :  250,613백만원 ,  ‘12년 : 138,809백만원 ,  ‘13년 이후 : 590,467백만원

❍ 기대효과

- 통수능 부족관거 정비를 통한 침수피해 예방

- 노후 하수관 정비를 통한 지하수․토양오염 방지, 안전사고 예방, 처리장 운영효율 제고

- 배수체계 개선을 통한 악취저감 등 시민 생활환경 개선

2		추 진 결 과

① 27개 배수분구 하수관거 정비 344㎞(‘07년~’12년)

② '12년 추진실적

- 관거정비 : D300mm ~ □2.5×2.0m, L=116㎞

- 실시설계 용역 : 6건 65% 추진

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	100,803	5,969	0	106,772	98,303	2,069	6,400	92%
2011	82,024	2,069	3	84,096	81,459	671	1,966	97%
2012	138,809	271	0	139,080	133,058	3,388	2,634	96%

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
139,080	133,058	96%

3		추진상 애로점

❍ 하수도사업특별회계 재원 부족으로 배수분구별 종합정비사업 완료기간 장기화 및 적정사업비 지원에 어려움이 있음

4		향 후 계 획

❍ 2021년까지 저지대 침수 취약지역 47개 배수분구 집중 정비

❍ 연차별 투자계획

구 분	계	2012	2013	2014	'15~'21
정비연장(㎞)	1,340	116	95	80	1,049
사업비(억원)	21,551	1,388	1,212	1,183	17,768

2		서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화

(도시안전실, 물재생시설과)

물재생센터 방류수 수질개선으로 수질환경을 보전하고, 친환경․주민친화적 시설로 전환하여 지역주민의 생활환경 향상 도모

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 고도처리 개량 127만톤/일

- 시설현대화사업  36만톤/일

- 초기우수처리시설 72만톤/일

※ 구조물 상부 부지활용 조경시설 설치(35,590㎡)

❍ 사업기간 :2009.11 ~ 2015. 8

❍ 총사업비 : 306,000백만원

- ’11년이전 : 41,433백만원 ,  ’12년 : 27,985백만원 ,

’13년 이후 : 236,582백만원

❍ 기대효과

- 방류수역 수질환경 보존 및 지역주민 생활환경 개선

2		추 진 경 과

❍ ‘07. 6 ~ ’09. 2 : 고도처리 및 시설현대화사업 기본계획 용역

❍ ‘09. 3 : 입찰공고(설계시공 일괄입찰방식)

❍ ‘09. 8 : 실시설계 적격자 선정

❍ ‘09.11 : 공사 계약 및 착공

❍ ‘12.12 : 고도처리시설 개량 완료

❍ ‘15. 8 : 사업완료

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년 이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	10,000	9,964	-	19,964	18,632	20	1,312	93.3%
2011	16,700	20	-	16,720	16,706	-	14	99.9%
2012	27,985	-	-	27,985	15,722	12,256	7	56.2%

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
27,985	15,722	56.2%

3		추진상 애로점

❍ 하수도사업특별회계 재정부족으로 시설현대화사업 투자 부진

- 사업기간 2~3년 연기 필요

4		향 후 계 획

❍ ‘15. 8월 사업완료 예정

- 사업완료 시기 2~3년 연기 예정

3		중랑물재생센터 운영

(도시안전실, 중랑물재생센터)

물재생센터 수질관리 및 주민친화적 시설운영에 필요한 기본적 경상사업의 안정적 추진으로 효율적 센터운영 제고

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 중랑물재생센터 운영을 위한 기본 경상사업비

※ 전기․상하수도요금 등 공공요금

※ 수처리용 약품, 탈수약품 및 탈취․탈황약품 구입

※ 수처리 및 오니처리분야 소모품 구입 및 하수슬러지폐기물처리 등

❍ 사업기간 : 2012. 1.1 ~ 12.31

❍ 사 업 비 : 27,096백만원

❍ 기대효과

- 효율적 함수율 관리를 통한 법적 방류수질기준 준수

- 탈취시설 적정 운영으로 악취예방을 통한 시민 불편 최소화

2		추 진 결 과

❍ 방류수질 관리

- 방류수질 기준

➣ 하수도법 제7조(방류수질기준) 시행규칙 제3조제1항제1호 〔별표1〕

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수(개/㎎L)
기준 (㎎/ℓ)	10	40	10	20	0.5	3,000

※ 방류수 수질기준 예외 항목 및 기간

항 목	처리장	기준(㎎/ℓ)	예외기준(㎎/ℓ)	예외 기간	비 고
T-P	#3,4	0.5	2.0	'13.06.30까지
	#2	0.5	2.0	‘13.04.30까지

- 처리장별 수질현황

구 분			용량(천톤)	BOD	COD	SS	T-N	T-P
2처리장	계 획 (설계)	유입	460	140	90	130	40	4.5
		방류	-	10	40	10	20	2.0
	처리수 (2012년)	유입	252	152.9	71.0	88.8	35.451	3.829
		방류	252	5.1	7.4	3.5	10.022	0.901

구 분			용량(천톤)	BOD	COD	SS	T-N	T-P
3처리장	계 획 (설계)	유입	1,000	146	72	130	32.8	3.1
		방류	-	20	40	20	20	2.0
	처리수 (2012년)	유입	870	166.8	78.3	102.1	35.487	3.761
		방류	870	8.0	10.6	4.5	14.726	1.374

구 분			용량(천톤)	BOD	COD	SS	T-N	T-P
4처리장	계 획 (설계)	유입	250	146	72	130	32.8	3.1
		방류	-	15	40	13	20	2.0
	처리수 (2012년)	유입	221	142.2	67.7	80.9	31.667	3.376
		방류	221	6.8	8.7	3.3	13.277	0.837

❍ 하수슬러지 처리

- 슬러지 처리현황

연 도 별	계	수도권매립지	직매립	건조처리	해양배출
2010	558(100%)	234(42%)	13(2%)	188(34%)	123(22%)
2011	520(100%)	228(44%)	12(2%)	207(40%)	73(14%)
2012	467(100%)	263(56%)	15(3%)	189(41%)	-

※ 2012년부터 해양배출 금지

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	22,272			22,272	19,659		2,613	88.3%
2011	21,613			21,613	19,229		2,384	88.9%
2012	27,096			27,096	22,655		4,441	83.6%

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
27,096	22,655	83.6

3		추진상 애로점

❍ 하수도법 시행규칙 개정에 따른 하수방류수(총인) 수질기준 강화

- 2012.1.1.부터 총인(T-P) 수질기준이 2.0㎎/L ⇒ 0.5㎎/L로 강화되어 총인처리시설이 보완되고 있으며

- 동절기 수질기준은 준비기간 없이 단기간에 폐지(‘11.2월개정, ’12.1월 적용)되어 기준 준수를 위한 시설개선이 어려워 겨울철 안정적 수질준수를 위해서는 3차처리시설이 필요하나 사업비 과다로 동절기 (12~3월) 수질기준 완화 환경부 건의(4개 물재생센터 공통사항)

4		향 후 계 획

❍ 수질원격감시체계(TMS) 24시간 지속정 운영을 통한 수질관리 강화

- 중앙제어실 통합관리시스템 운영

․근무자 : 14명(일근 2명, 주ㆍ야교대근무 12명 : 3명 1조)

․내  용 : 하수처리공정의 각종 설비 모니터링 및 원격제어

❍ 효율적 약품 구입

- 계절별 슬러지 성상 변화에 따른 적정 응집제 선정으로 탈수효율 증대

- 응집제 Jar테스트 수시 시행으로 최적 제품선정 구입

❍ 하수처리시설 효율적 운영을 통한 에너지 자립율 향상

- 에너지 진단을 통한 하수처리시설 효율적 운영으로 전기사용 절감

- 슬러지 처리방법 변경․건조재 판매 등 재생 에너지 활용 증대

7		청계천 시설물 유지관리

(도시안전실, 하천관리과)

◦ 청계천을 도심 속의 시민 휴식공간으로 쾌적하고 안전하게 관리하고

◦ 다양한 문화행사를 개최‧유치 및 생태교실 등을 운영함으로써 시민의

휴식 공간 및 세계 속의 명소로 자리매김 시키고자 함

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 위    치 : 청계천 시점부(종로구 서린동148번지) ~ 중랑천 합류부

- 사업규모 : 하천관리 8.12km

- 사업내용 : 청계천내 각종 시설물 유지관리(구조물, 기전, 생태, 조경시설 등),

유지유수 정수 및 공급, 이용시민 안전에 관한 사항 등

※ 수탁기관 : 서울특별시시설관리공단

❍ 사업기간 : 2005. 10 ~ 현재까지

❍ 총사업비 : 64,061백만원

- ’11년이전 :  48,524백만원 ,  ’12년 : 7,834백만원 ,  ’13년 이후 : 7,703백만원

❍ 기대효과

- 하천 복원을 통한 볼거리, 즐길거리 제공으로 시민 삶의 질 향상

- 서울 도심 관광의 주요 명소로 자리매김함으로써 경제적 효과 유인

2		추 진 결 과

① 청계천 시설물 (토목, 기전, 조경 등) 유지관리 최적화

- 연간 방문객 (추정) : 17백만명 * 청계광장 상시 행사 및 공연 유치

② 문화행사 추진 및 생태교실 운영으로 시민 볼거리‧즐길거리 제공

- 수상패션쇼 7회 실시(17,900명 관람), 청혼의벽 215회 프러포즈

판잣집테마존 44천명 방문

- 생태교실 운영 : 생태탐방 등 12개 프로그램, 22천명 참여

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	8,402	-	-	8,402	7,783	-	619	92.6%
2011	8,402	-	-	8,402	7,809	-	593	92.9%
2012	8,277	-	-	8,277	7,834	-	443	94.6%

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
8,277	7,834	94.6%

3		추진상 애로점

❍ 우오수 합류식 구조로 인한 강우 시 급격한 수위 상승

- 이용 시민 안전 확보를 위한 시설물 개선 및 시스템 개선

4		향 후 계 획

❍ 안전성 강화

- 시설물 개선 : 비상사다리 추가 및 출구안내표지판 신설

- 수방기간 안전요원 증원 배치를 통한 신속한 대피 유도 등

8		서남분뇨처리시설 증설 및 현대화

(도시안전실, 물재생시설과)

서남분뇨처리시설을 증설 및 현대화하고, 상부에 공원을 조성하여 지속적인 분뇨증가에 적정대응 및 쾌적한 도시환경조성에 기여

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 위치 : 서남물재생센터 부지 내

- 사업규모 : 분뇨처리시설 증설 및 현대화

· 분뇨처리시설 증설(시설용량 2,000 → 4,000㎥/일)

· 분뇨처리시설 현대화(상부 공원조성)

❍ 사업기간 : ‘12.11∼’15.2

❍ 총사업비 : 73,200백만원

- ’11년이전 :  1,119백만원 ,  ’12년 :  5,045백만원 ,

’13년 이후 :  67,036백만원

❍ 기대효과

- 분뇨처리시설 현대화 및 상부 공원조성으로 쾌적한 생활환경 조성

-  분뇨수거량 지속적 증가에 적정대응하여 공중위생 향상

2		추 진 결 과

❍ '11. 6.29 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 계획

❍ '11. 9.16 : 설계시공 일괄입찰 공고

❍ '12. 2.29 : 실시설계 적격자 선정

❍ '12. 7.20 : 실시설계 적격심의

❍ '12.11.13 : 공사 계약

❍ '12.11.15 : 공사 착공

※ '13. 4월 현재 공정률 : 6%

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	5,000			5,000			5,000	0
2011	1,397			1,397		1,397		0
2012	3,648	1,397		5,045	4,201	837	7	83.3%

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
5,045	4,201	83.3%

3		추진상 애로점

❍ 없음

4		향 후 계 획

❍ '13.   : 가시설공 완료 및 토목구조물 공사 시행, 관급자재 등 구매

❍ '15. 2. : 공사 준공

9		지하주택 침수방지시설 설치

(도시안전실, 하천관리과)

저지대 지하주택 등 침수취약 주택에 우기 전까지 물막이판 등 소규모    침수방지시설을 맞춤형으로 지원하여 주택 침수예방에 만전을 기하고자 함

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 노면수 월류 취약지점 물막이판 설치 (주택 출입구, 지하계단 입구, 반지하주택 창문 등)

- 하수역류 취약주택 옥내역지변 설치 (배수구, 씽크대, 화장실 등)

- 대지내 배수불량 주택 수중모터펌프 지급

❍ 사업기간 : ‘07. 3. ~ ’13. 12.

❍ 총사업비 : 25,539백만원 (재난관리기금 19,539백만원)

- ’11년이전 : 16,788백만원(재난관리기금)

- ’12년 : 5,751백만원(본예산 3,000백만원, 재난관리기금 2,751백만원)

- ’13년 이후 : 3,000백만원(본예산)

❍ 기대효과

- 맞춤형 침수방지시설 설치 지원으로 저지대 지하주택 침수예방에 기여

2		추 진 결 과

구 분		단위	계	2007	2008	2009	2010	2011	2012
설치 가구		가구	32,588	2,658	1,885	1,822	3,272	9,347	13,604
설치시설	물막이판	개	19,870	-	-	-	254	7,423	12,193
	옥내역지변	개	60,136	-	-	-	-	19,235	40,901
	수중펌프 지급	대	2,152	-	-	-	-	1,006	1,146
	수중자동펌프(집수정)	개소	12,589	2,681	1,914	1,823	3,159	3,012	-

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	0	0	4,659 (재난관리기금)	4,659	3,975	0	684	85%
2011	0	0	7,053 (재난관리기금)	7,053	5,910	0	1,143	84%
2012	3,000	0	2,751 (재난관리기금)	5,751	5,290	0	461	92%

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
3,000	5,290	176%

※ 당초예산 3,000백만원에 재난관리기금 2,290백만원 포함 5,290백만원 집행

3		추진상 애로점

❍ 없음

4		향 후 계 획

❍ 침수취약주택에 대한 침수방지시설 지원 마무리

- ‘13년 7,678가구 지원으로 침수취약 40,266가구 지원 마무리
(기지원 32,588가구)

❍ 기지원 시설 관리대책, 침수취약 가구 추가 발굴 지원방안 마련

10		잠실상수원 퇴적물 준설

(도시안전실, 물관리정책과)

잠실수중보 상류 상수원보호구역내 취수장 및 강북취수장 하상에 퇴적된 오니토 등 토사를 적기에 준설하여 안정적인 상수원 확보 및 수질개선

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 잠실상수원 및 강북취수장 주변 퇴적물 준설

․ 성남취수장 22,915㎥, 풍납취수장 35,220㎥

❍ 사업기간 : 2012. 1 ~ 2012. 12

❍ 사 업 비 : 1,836백만원

❍ 기대효과

- 잠실수중보 상류 상수원보호구역내 하상에 퇴적된 오니토 등 준설을 통한 안정적인 상수원 취수 및 수질개선

- 계획하상고를 유지하여 홍수 시 범람 예방

2		추 진 결 과

① 2012.3.19~2013. 1.15 : 수로조사 용역 시행

- 수심측량 조사 및 설계

② 2012.4.25~2012.12.30 : 상수원취수장 정비공사 시행

- 성남취수장, 풍납취수장 준설공사 시행

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	2,016			2,016	1,614	186	216	80.1
2011	1,915	186		2,101	2,083		18	99.1
2012	1,836			1,836	1,836		0	100

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
1,836	1,836	100

3		추진상 애로점

❍ 특이사항 없음

4		향 후 계 획

❍ 2013년 공사 시행중 (2013. 3 ~ 2013. 10)

- 사업예산 : 1,865백만원

11		상도동 성대시장 주변 침수해소 사업

(도시안전실, 하천관리과)

집중호우시 통수단면이 부족한 상도동 성대시장 주변 대방천의 홍수 및 침수피해를     최소화하기 위하여 기존단면 확장 및 수로 신설을 통해 침수피해를 예방하고자 함

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 위치 : 동작구 대방동407-47~상도동190-9(참새어린이공원~상도동 동광교회)

- 규모 : 하수암거 신설 및 확장(▣3.5×2.0~2▣4.5×2.2m),L=1,282m

❍ 사업기간 : 2007 ~ 2014

❍ 총사업비 : 19,898백만원

- ’11년이전 : 7,173백만원 ,  ’12년 : 4,125백만원 ,  ’13년 이후 : 8,600백만원

❍ 기대효과

- 대방천 통수단면 개선 및 확대로 침수피해 예방 및 생활환경 개선

2		추 진 결 과

① 상도동 성대시장 주변 침수해소 기본 및 실시설계 완료

- 기 간 : 2007.6.8~2009.2.19

②『참새어린이공원 ~ 신림로』구간 공사완료

- 기 간 : 2009.6.4 ~ 2010.12.28

- 규 모 : 하수암거 신설(▣3.5×2.0m), L=525m

③『신림로 횡단』구간 공사완료

- 기 간 : 2011.5.26 ~ 2012.12.31

- 규 모 : 하수암거 신설 및 확장(▣3.5×2.0~2▣4.5×2.2m),L=90m

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	-	2,560		2,560	2,560			100
2011	3,000	-		3,000	1,875	1,125		62
2012	3,000	1,125		4,125	2,983		1,142	72

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
4,125	2,983	72.3%

3		추진상 애로점

❍ 없음

-

4		향 후 계 획

❍ 2013 ~ 2014 : 대방동 농협 ~ 동광교회간 하수암거 설치

- 하수암거 신설 및 확장(▣3.5×2.0~2▣4.5×2.2m),L=667m

12		면목동 612일원 외 3개소 하수관거 개선

(도시안전실, 물재생계획과)

‘10.9.21, ’11.7.27 집중호우시 침수에 따른 하수관거 통수단면 확대로
침수예방

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

사업년도	위 치	공사종류	사업규모
기시행	면목동 612 일대	실시설계	1식
2012년	면목동 572-28~524-15	신설(유로변경)	- D=1,500mm, L=201m
	망우동 409-1~412-6	확 관(통수능 부족)	- D=900~▣1.2m×1.2m, L=420m
	면목동 673-61~340-61	확 관(통수능 부족)	- D=900~1,000mm, L=388m
	면목동 506-57~118-48	확 관(통수능 부족)	- ▣1.5m×1.5m, L=178m
2013년	면목동 506-57~118-48	확 관(통수능 부족)	- D=900~1,500mm, L=221m

❍ 사업기간 : ‘11. 2 ∼ ’13. 6

❍ 총사업비 : 2,872백만원

- ‘11년이전 : 98백만원 ,  ‘12년 : 2,504백만원 ,  ‘13년 이후 : 270백만원

❍ 기대효과

- 용량부족 하수관거 개량 및 불량하수관거 정비로 침수피해 예방 및 주민불편사항 해소

2		추 진 결 과

① 면목동 612주변 외 3개소 신설 및 확관 완료

- 사업규모 : D=900mm∼▣1.5m×1.5m, L=1,187m

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010
2011	1,302			1,302	83	1,204	15	6%
2012	1,300	1,204		2,504	2,412		92	96%

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
2,504	2,412	96

3		추진상 애로점

❍ 없음.

4		향 후 계 획

❍ 2013년 하수관거 개선구간 정비예정

- 공사개요 : 하수관거 정비 D=900mm ∼ 1,500mm, L=221m

- 공사착공 : 2013.04.17

- 공사준공예정 : 2013.06.30

18		하수도 분야 연구운영비 전출금

(도시안전실, 물재생계획과)

하수도 분야 주요 현안사항의 연구를 위하여 상수도연구원에 설치된 하수도

연구부서의 운영에 필요한 예산지원

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 사업근거 : 서울특별시 행정기구설치조례 시행규칙 제79조

- 연구인력 : 9명(하수처리과 5, 하수계획과 4)

- 주요 추진업무

․ 하수처리과 : 물재생센터 분야 연구업무

(고도처리 및 처리수 재이용, 슬러지처리, 감량화 등)

․ 하수계획과 : 하수관거 공사, 악취 등에 관한 연구, 초기우수 및 월류수 처리대책 연구 등

❍ 사업기간 : 2012. 1월 ~ 2012. 12월

❍ 사 업 비 : 996백만원

❍ 기대효과

- 하수도 분야 주요 현안사항 연구로 우리시 하수도 사업의 효율적 발전 도모

2		추 진 결 과(‘12년)

① 응집제 자동투입시스템 개발 연구

- 총인 처리비용 절감을 위한 응집제 자동투입장치 개발 및 개선

② 하수슬러지 탈수여액의 인 회수장치 개발 연구

- 하수슬러지 탈수 과정에서 발생하는 탈수여액 내 인 회수장치 개발

③ 하수도시설에서의 악취저감 연구

- 악취오염도 및 악취발생 원인물질을 분석, 평가하여 개선방안 마련 및 악취저감 연구

④ 포기조 산기관의 최적수심 결정 연구

- 송풍기 동력절감을 위한 최적 산기수심 높이 결정

⑤ 옥상 빗물 유출지연 시설 연구

- 집중호우시 빗물의 유출시간을 지체시켜 도심지역내 침수방지 및 월류수 저감

④ 안전한 도시배수시스템 최적화 연구

- 우수토실 개선 및 분산저류조 등 연구하여 내수침수 방지

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	861			861	759		102	88%
2011	1.134			1,134	1.066		68	94%
2012	996			996	853		143	86%

※ 당해연도 추경은 당초예산에 포함 작성, ‘12년 신규사업은 ’12년도만 작성

※ 예비비 사용이 있을 경우에는 이․전용에 포함하고, 예비비 액수를 별도로 표시

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
996	853	86%

3		추진상 애로점

❍ 전체 직원이 2개과 총 9명으로 전담인력 부족

- 하수처리과 5명, 하수계획과 4명

❍ 조직체계가 이원화 되어 있어 유기적인 협조체계 미흡

- 상수도사업본부 소속으로 지도감독의 한계

4		향 후 계 획

❍ 물재생센터 하수처리 및 슬러지처리 개선에 대한 연구 강화

- 하수슬러지 탈수여액의 인 회수장치 개발 연구

- 반류수 처리시설 개선방안 연구

- 하수처리장 총인처리시설 공법 개선방안 연구

- 에너지 절감으로 하수처리장 운영비 절감방안 연구

❍ 기후변화 대응 침수피해 저감을 위한 연구 강화

- 안전한 도시 배수시스템 최적화 개발 연구

- 하수도시설에서의 악취저감 방안 연구

- 도심지역 침수방지 및 월류수 저감을 위한 빗물유출지연시설 연구

19		빗물관리시설 확충

(도시안전실, 물관리정책과)

빗물의 침투량 증대와 빗물이용 활성화를 통한 친환경 물순환 도시의 조성을 위해 빗물관리시설을 확대 설치

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 빗물의 침투․저류․이용을 위한 빗물관리시설 설치 비용 보조

▸ 대상 : 자치구의 공공시설 및 대지면적 2천㎡미만, 연면적 3천㎡미만 건축물 등에 빗물관리시설 설치시

∘ 자치구 지원 : 총공사비의 50%지원(자치구 예산 50%확보)

∘ 민 간 지 원 : 총공사비의 90%지원, 최대 1천만원

❍ 사업기간 : 2012. 1 ~ 12

❍ 사 업 비 : 644백만원

❍ 기대효과

- 빗물관리시설 설치 지원을 통한 빗물관리의 확대와 인식 제고

- 빗물의 침투량 증대와 빗물이용 활성화를 통하여 친환경 물순환 도시 조성에 기여

2		추 진 결 과

① 자치구 빗물관리시설 설치

- 구로구 고척동 계남근린공원 등 22개소(총 394㎥)

② 민간 빗물관리시설 설치

- 중랑구 상봉동 118-34 등 16개소(총 26㎥)

③ 공공시설 빗물관리시설 설치

- 서울시립대 학생회관 등 4개 건물(총 120㎥)

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	659			659	632		27	95.9
2011	672			672	644		28	95.8
2012	644			644	577		67	89.6

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
644	577	89.6%

3		추진상 애로점

❍ 자치구에서 빗물관리시설 설치 시, 총공사비의 50% 보조가 가능하나 자치구에서 구비 50%를 확보하지 못하여 빗물관리시설 설치가 어려움

4		향 후 계 획

❍ ’60년대 이후 개발로 악화된 서울의 물환경 개선과 물순환 도시 조성을 위해 지속적으로 빗물관리 확대 추진