문서번호	도로관리과-8045
결재일자	2013.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도로정보화팀장	도로관리과장		시설안전정책관
박종윤	문상조	代권완택		05/21 고인석
협 조

- 도로시설물 주요결함관리시스템 구축에 따른 -

도로관리시스템 DB갱신사업 준공기한 연장 계획

2013. 5

도시안전실

(도로관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

- 도로시설물 주요결함관리시스템 구축에 따른 -

도로관리시스템 DB갱신사업 준공기한 연장 계획

도로관리시스템 DB갱신사업의 QR코드부착 사업이 도로시설물 주요결함관리시스템 구축으로 변경됨에 따라 준공기한을 연장하여 점검보수이력 집중 관리 및 정보시스템 이용의 활성화와 시민안전에 대한 서비스를 대폭 제고하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

사 업 명 : 도로관리시스템 DB갱신 사업

사업기간 : 2012. 8. 9 ~ 2013. 5. 31

소요예산 : 121백만원

계약자 : (주)지노시스템

사업내용

❍ 지형변화구간 위치정보 및 DB 갱신(67.8㎢)

- 대상 : 도로구간 변경자료 DB구축 및 관련자료 출력 프로그램 개발

․ 전면갱신구간(도봉, 노원, 강동) 63.9㎢

․ 일부갱신구간(도로공사 등 갱신) 3.99㎢

❍ 급경사지 DB구축

- 대상 : 급경사지, 옹벽, 석축 200개소 DB구축

❍ 도로시설물 QR코드 부착

- 대상 : 한강상 20개 교량 부착 및 관련자료 구축

❍ DB보관용 외장하드 도입

- 수량 : 2개

Ⅱ		그간 추진사항

2012.05.16 : 용역시행 방침

2012.08.09 : 용역착수

2012.11.15 : 사면DB구축 및 백업용 장비 납품

❍ 대상 : 급경사지 위치 및 관리대장 (422개소)

- 급경사지 72개소, 옹벽 및 석축 등 350개소

❍ 자료저장용 외장하드 2개 구매

2012.12 ~ 2013.05 : 공간정보담당관 수치지도 적용 DB갱신사업 수행

도로시설과 주요결함관리시스템 구축 업무협의

❍ 1차 : ‘13.4.8 15:00(도로시설과), 시설기획 팀장 등 5명 시스템추가와 비용협의

❍ 2차 : ‘13.4.17 15:00(도로시설과), 추가개발 스토리보드 검토

Ⅲ		준공기한 연기

추진근거

❍ 도로관리시스템(시설물분야) 개선방안 검토보고(도로시설과-5381, ‘13.3.26)

❍ 도로시설물 주요결함관리시스템 구축계획(도로관리과-7811, ‘13.5.16)

준공기한

❍ 당 초 : 2012.8.9 ~ 2013.5.31

❍ 변 경 : 2012.8.9 ~ 2013.7.31(2개월 연장)

귀책사유 : 서울특별시

지체상금 부과여부 : 미부과

연기사유

❍ “도로관리시스템 DB갱신” 사업과 관련한 과업 중 QR코드부착 사업이 도로시설물 주요결함관리시스템 구축과업으로 변경되어 이를 개발/적용하고 최적의 시스템을 구축하기 위하여 계약기간을 연장 하고자 함.  끝.