함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경 및 차수별 금액변경에 따른 계약의뢰(2014년 강동구 관내 상수도 시설물공사-2차)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2014년 강동구 관내 상수도 시설물공사(장기계속단가계약)』에 대하여 설계변경(2차) 및 차수별 금액변경을 시행하고 아래와 같이 계약의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 강동구 관내 상수도 시설물공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 : 당초-원형변실 201개소, 중형변실 55개소 등

변경-원형변실 162개소, 중형변실 55개소 등

다. 공사기간 : 2014.06.02 ~ 2014.12.31.(총부기기간:2014.06.02~2015.06.30)

라. 계약상대자 : 매일엔지니어링(주) 대표 이계옥

마. 변경내용 : 신규공종 및 계약물량 증․감 발생

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
도 급 비	519,511,900	519,511,900	금액변경 없음

바. 차수별 부기금액

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
총부기금액	519,511,900	519,511,900	총부기금액 변경없음
1차부기금액	300,000000	164,104,000	(감) 135,896,000
2차부기금액	219,511,900	355,407,900	(증) 135,896,000

사. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브정비)

- 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치

- 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 보수

아. 설계변경 및 차수별 금액변경 사유

- 신규공종 및 계약물량 증․감발생에 따른 차수별 금액변경

붙  임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 관련서류 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	황대룡		주무관	송종범		시설관리과장	전결 12/18 이계환
협조자
시행	시설관리과-20415	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5208	/전송		/	daeryong@seoul.go.kr	/	대시민공개