투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	변경 계약의뢰(한강도심생태공원확충조성사업)

1. 생태공원과-2936(2014.12.18.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리본부 시행중인『한강도심생태공원확충조성사업』에 대하여 설계변경 시행하고 아래와 같이 변경계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 한강도심생태공원확충조성사업(서래섬 주변)

나. 공사위치 : 서초구 반포동 반포한강공원

다. 변경내역

(단위:원)

구분	총 괄			1차 (기준공)	2차			장 래	비 고
	당 초	변 경	증․감		당 초	변 경	증․감
도급비	6,315,866,000	6,103,740,000	감212,126,000	835,700,000	667,900,000	717,060,000	증49,160,000	4,550,980,000
공사 기간	‘13.8.1.~ ’15.7.31	’13.8.1.~ ‘16.12.10	증527일	2013.8.1.~ 2014.3.31	2014.3.21~2015.2.28			~2016.12.10

라. 변경사유 : - 총괄 : 물가변동금액적용 및 공사물량조정

- 2차공사 준공에 따른 시공물량 증감

- 준공기한 연기 : 시 재정여건에 따른 예산 미확보

- 지연배상금 부과여부: 미부과

마 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강의자연성회복및시민편의개선,한강생태계복원,한강생태공원확충(서래섬주변),시설비및부대비,시설비 (100-401-01)

따로붙임  1. 설계변경시행방침 및 변경내역서

2. 보고서(변경,준공기한연기,물가변동)각 1부.

3. 관련문서. 끝.

	생태공원과장
주무관	김일문		생태공원과장	12/18 최병언
협조자
시행	생태공원과-2939	(		)	접수		(		)
우	133-820	성동구 강변북로 257 (성수동1가642-25)	/
전화	02-3780-0632	/전송	02-3780-0745	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개