문서번호	택시물류과-34904
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	택시정책팀장	택시물류과장		교통정책관
박노산	최한철	김규룡		전결 12/19 백호
협 조	신문팀장		강옥현
	법제심사팀장		주재완

서울동남권유통단지

지정변경 및 실시계획변경 승인

2014. 12.

서 울 특 별 시

(택시물류과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

서울동남권유통단지

지정변경 및 실시계획변경 승인

서울동남권유통단지 조성사업에 대한 시행자(SH공사)의 대표자 변경 및 위례신도시와 연결되는 지하차도 공사지연으로 사업기간 연장 등 지정변경 및 실시계획변경신청에 대하여 변경승인 하고자 함

1				개 요

□ 관련법률 : 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 제22조 및 제28조

□ 사업개요

○ 위    치 : 송파구 문정동 280번지 일대

○ 시 행 자 : SH공사

○ 부지면적 : 560,694㎡ (3개 공구)

- 1공구(활성화단지), 2공구(이주단지), 3공구(물류단지)

○ 사업기간 : 2004.11 ~ 2014.12

□ 그 간의 추진경위

○ ‘02.01.07   유통단지개발 시범사업 부지 선정

○ ‘02.07.02   서울동남권유통단지 개발계획 수립

○ ‘04.11.25   유통단지 지정 및 사업시행자 지정

○ ‘05.11.07   실시계획 승인 (실시계획변경 7회)

○ ‘13.06.19   1공구 및 2공구 준공

○ ‘14.12.08   단지지정변경 및 실시계획변경 승인신청 (SH공사 → 시)

○ ‘14.12월 현재 물류단지 및 기반시설(지하차도) 공사중

2				변경승인 내용

□ 사업시행자(SH공사)의 대표자 변경

○ 이종수 → 변창흠

- 대표자 신규 선임에 따른 대표자 변경

□ 사업기간 변경(연장)

○ 2004.11.25.~2014.12.31 → 2014.11.25.~2016.12.31 (2년 연장)

- 위례신도시와 연결되는 지하차도(장지교 입체화공사)의 위례신도시 구간 지장물철거 지연 등으로 공사기간 부족하여 사업기간 연장

【장지교 입체화공사 현황】

▹ 길    이 : 1,275m

▹ 너    비 : 18m ~ 24m (4차로)

▹ 사 업 비 : 1,080억원 (SH공사 50%, LH공사 50%)

▹ 시 공 자 : 진흥기업(주)

▹ 준공예정일 : 2015.6.30. (현 공정 : 60%)

지하차도 공사구간

3				행정사항

○ 동남권유통단지 변경지정 및 실시계획변경승인 고시 (시보)

○ 동남권유통단지 변경지정 및 실시계획변경승인도서 일반인 열람

따로붙임 : 고시문 1부.  끝.