문서번호	공공개발센터-10535
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공공건축팀장	공공개발센터장	도시관리정책관		도시계획국장
노경래	안중욱	이성창	류훈		12/26 이제원
협 조
	도시계획과장			이정화
	주무관			백명선

학술용역 추진체계 및 계약 변경 검토 보고

-「준공업지역 재생 및 활성화방안 연구」중 ‘서울디지털산업단지(G-Valley)’ 관련 -

2014. 12.

도시계획국

(공공개발센터)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

학술용역 추진체계 및 계약 변경 검토 보고

-「준공업지역 재생 및 활성화방안 연구」중 ‘서울디지털산업단지(G-Valley)’ 관련 -

「준공업지역 재생 및 활성화방안 연구」와 관련하여 조직개편에 따른 추진체계를 일원화하고 ‘서울디지털산업단지(G-Valley) 재생 및 활성화방안’에 대한 계약 변경(준공기한 연장)을 통하여 업무의 연속성 및 효율성을 제고하기 위함.

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 준공업지역 재생과 활성화방안 연구(학술용역)

○ 용역기간 : '14. 5. 9 ~ '15. 9. 8

○ 계약금액 ********(1차 : 414,942천원 / 2차 : 264,058천원)

○ 수행기관 : (사)대한국토도시계획학회

○ 주요 과업내용

◊ 1차년도('14. 5. 9 ~ '15. 1. 8)

-「준공업지역 종합발전계획('09)」의 진단과 평가

- 준공업지역의 산업, 공간부문에 대한 관리방안 마련

- 온수산업단지 관리방안 및 G-Valley 재생․활성화 방안

	<G-Valley 재생 및 활성화 부문 >
◆ 대상범위 : 구로구 구로동, 금천구 가산동 일원 (1,922,261㎡) ◆ 연구책임 : 서울시립대 교수 양승우 [산업단지 재생] + ㈜인토 대표 여춘동 [도시․건축] ◆ 과업내용 ∘광역(지역)적, 산업적 측면을 고려한 G-Valley의 비전, 전략구상안 마련 ∘산업단지 재생 및 활성화를 위한 도시계획적 관리방안 제시 ∘산업단지내 공공가용부지의 활용방향 제시

◊ 2차년도

- 관련 법․제도의 개선방안 도출

- 준공업지역 관리를 위한 사업화 방안

- 시민 공감대 형성

Ⅱ		추 진 경 위

○ '13. 05. 02      서울디지털산업단지(G-Valley) 관련 현장시장실

○ '14. 02. 20      학술용역 시행계획 수립(도시계획국장)

○ '14. 05. 09      학술용역 계약

○ '14. 05. 21      착수보고

○ '14. 06. ～       과업수행단 자문회의(10회) 등

- ‘G-Valley’ 관련 추진사항 : 자문회의 5회, 워크숍 3회 등

○ '14. 10. 07      중간보고(도시계획국장)

○ '14. 11. 10      추진현황 보고(행정2부시장)

Ⅲ		변경 검토(안)

○ 추진체계 변경

<현  행>                             <변  경>

준공업지역 재생 및 활성화방안 연구							G - 밸리 산업현황 조 사
준공업지역․온수산단				G-밸리 시범사업
도시계획과				공공개발센터			(경제정책과)

⇨

준공업지역 재생 및 활성화방안 연구			G - 밸리 산업현황 조 사
준공업지역․온수산단․G-밸리 시범사업
도시계획과 공공개발센터			(경제정책과)

- 변경시기 : 조직 개편시

※ 시장님 보고('15. 1월 예정) 및 보고서 작성 등은 지속적 업무 협조 추진

○ 계약기간 변경 : 용역(1차)기간 연장(51일)

기정 '14. 5. 9 ～ '15. 1. 8[8개월] ⇒ 변경 '14. 5. 9 ～ '15. 2. 28[10개월]

※ '14. 12. 18 합의각서 및 예정공정표(변경)가 제출되었으며, 계약금액 등

다른 사항은 변경없음

- 연장 사유 : 관련용역 연계 추진을 위한 절대공기 부족

․서남권 광역중심 및 서울형 창조경제 거점으로서『G-밸리』의 중요성을 고려할 때,

경제진흥실에서 추진중인 용역 결과를 물리(공간)적 재생 및 도시관리 방안에

충실히 반영 및 연계할 수 있도록 준공기한의 연장이 필요함

	<경제진흥실 용역 개요>
◆ 용 역 명 : G-밸리 飛上프로젝트 본격 추진을 위한 산업현황 조사용역 ◆ 기 간 : 당초 '14. 9. 15 ~ 12. 31(6개월) ⇒ 변경 '14. 9. 15 ~ '15. 2. 28(8개월) ◆ 수행업체 : 서울연구원(책임연구원 김묵한) ◆ 용역금액 : 124,580,000원(위탁 60백만원)

○ 귀책사유 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		조 치 의 견

○ 2015년 1월 조직 개편으로 인해 관련 용역업무를 2개 본부․국에서

나누어 추진하는 것은 바람직하지 않으므로 용역 주관부서(도시계획과)에서

‘G-밸리 부문’ 업무까지 함께 총괄하도록 조정하고,

○ 경제진흥실 관련용역(G-밸리 산업현황 조사) 결과의 충실한 반영 및 상호연계를

위하여 관련규정(지방자치단체 용역계약 일반조건)에 따라 '15년 2월말까지

계약 변경을 시행하고자 함

○ 용역(1차) 변경내역

구 분	기 정	변 경	증․감	비고
계약금액	414,942,000원	414,942,000원	****
용역기간	'14. 5. 9 ~ '15. 1. 8	'14. 5. 9 ~ '15. 2. 28	증 51일

○ 향후계획

- '14. 12.  용역(1차) 계약 변경

- '15.  1.  용역(1차) 최종보고

- '15.  2.  용역(1차) 준공

Ⅴ		행 정 사 항

○ 학술용역 계약 변경 의뢰 : 도시계획과 ⇒ 재무과

붙임 : 합의각서 및 예정공정표(변경) 각 1부. 끝.