문서번호	자연생태과-1029
결재일자	2013.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장		푸른도시국장
이순자	김상근	윤주경		01/21 오해영
협 조
	주무관		이영일

2013년도 물순환생태계류 복원사업 추진계획

2013. 1

푸른도시국

(자연생태과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 물순환생태계류 복원사업 추진계획

산림 내 계류의 생태적 조성으로 물순환 체계 구축을 통한 생물서식공간 창출 및 산림 보존에 기여하고자 함

Ⅰ		배 경

산림 내 토양 건조화 및 계곡부 건천화 심화

직강화 배수로에 의한 수자원 낭비 및 생물서식 공간 감소

Ⅱ		목 적

산림 내 수자원 함양으로 지속적 물공급 시스템 구축

산림의 건전성 유지를 통한 홍수 및 재해예방

계류유역 주변이 생명체로서 다양한 생물서식공간이 될 수 있도록 조성

Ⅲ		추진방향

치수적으로 안전하고 생태적으로 건강한 산림 계류 조성

빗물저수 및 홍수방지 기능을 병행할 수 있도록 조성

다양한 호안공법 적용으로 계류의 자연적 기능 제고

Ⅳ		기추진실적(2008-2012)

‘2008 ~ ’2012 실적 : 12개소  57,527㎡

- 2008년 : 마포구 와우산   등      2개소   1,600㎡

- 2009년 : 도봉구 초안산   등      4개소   5,700㎡

- 2010년 : 종로구 삼청공원  등     4개소  22,887㎡

- 2011년 : 금천구 시흥동 시흥계곡  1개소   24,500㎡

- 2012년 : 도봉구 방학동 산25-9    1개소    2,840㎡   ※ 세부추진내역 별첨

Ⅴ		’13년 사업개요

위    치 : 강북구 번2동 산17번지 등 75개소(계류 15개소, 누수식생태보 60개소)

사업내용 : 계류의 친환경 정비, 생태보 설치, 수변 식생대 조성 등

사업기간 : 2013. 1 ~ 2013. 10

사 업 비 : 1,999백만원

세부 사업개요                                          (단위 : 백만원)

위 치	사업규모	예산액(가내시액)	사업내용 및 추진사항	추진부서
계	24,300㎡	1,999(1,944)
① 강북구 번2동 산17번지	5,000㎡	196(186)	계류 정비, 생태보 설치, 초화류 및 수생식물 식재 등	강북구
② 용산구 한남동 산8-1번지	200㎡	100(100)		용산구
③ 도봉구 쌍문동 산267-1번지	1,200㎡	100(100)		도봉구
④ 노원구 상계동 불암산	8,000㎡	500(480)		노원구
⑤ 광진구 아차산	7,100㎡	500(480)		광진구
⑥ 누수식 생태보	2,800㎡	598	누수식 생태보 설치 60개소	전자치구
⑦ 시설부대비 및 시책추진비		5		자연생태과

※ 상기 누수식 생태보 설치대상지는

- 자치구(사업소 포함)의 설치 희망신청을 ’13. 1. 30.까지 받아 확정 후 시행

Ⅵ		’13 추진일정

설계용역 및 공사 조기발주로 10월까지 완료

- ’13. 1월 : 대상지 현황 조사 및 용역타당성 심사(시행부서⇨기술심사담당관)

- ’13. 2월 : 설계용역발주 품의

- ’13. 2월 ~ 5월 : 기본 및 실시설계 완료

․ 설계심의는 공정 70% 정도 진행 시 요청(시행부서→자연생태과)

□ 준비물 : 도면, 내역서, 설명 PPT 등 10부 내외

․ 계약심사 요청

□ 조경공사비 3억 이상 : 시행부서→계약심사과

□ 조경공사비 3억 미만 : 자체 감사과

- ’13. 6월 : 공사발주

- ’13. 7월 ~ 10월 : 공사착공 및 완공

Ⅶ		추진시 유의사항

관련 전문가를 설계 단계부터 참여토록 하고, 목표종을 설정하여 사업취지에 부합하는 생태복원 구현

- 가급적 콘크리트(화강석) 사용을 자제하고 년중 우수 저장이 가능한 별첨 누수식 생태보 설치 등 지속가능한 공법(자재)을 사용하기 바람

설계단계부터 주민 및 유관기관의 의견을 적극적으로 수렴하여 사업이 지연되는 사례가 없도록 추진

별첨 ‘공원 색채디자인 가이드라인’ 에 맞게 자연과 조화되는 색채와 디자인 반영

- 목재 등 자연친화적 재료 사용하되 광택의 스테인레스 및 철재 사용 자제

- 자연에 녹아드는 색채 사용

과도한 시설물 설치 지양, 도심 내 새로운 생물서식공간 창출이라는 인식하에 접근 및 주변 식생, 경관과의 조화는 물론 사후 유지관리까지 고려

여름철 우기를 고려한 설계용역 및 공사 조기발주 시행으로 10월말까지 공사완료 조치

관급자재 구매 및 공사 발주시 특정제품선정위원회 심사 절차를 받을 것

- 물품제조․구매의 경우

․ 특정제품의 품명당 가격이 2천만원을 초과하는 경우

․ 특정한 설비․기술이 요구되는 추정가격이 2천만원을 초과하는 물품제조의 경우 등

- 공사의 경우

․ 공사금액중 특정제품의 품명당 가격이 5천만원을 초과하는 경우

․ 특정공법의 설계금액이 1억원을 초과하는 전문공사를 포함하는 경우 등

Ⅷ		행정사항

주민설명회, 착/준공식 행사는 시(자연생태과)와 사전 협의 후 시행

설계용역 수행 시 최종 성과품에 대한 설계변경 등 주요사항은 우리시와 사전 협의를 거친 후 시행

별첨 누수식 생태보 설명자료를 참조하여 자치구(사업소 포함)에서는 대상지를 선정하여 ‘13. 1. 30.까지 사진 첨부 제출 : 1개구(사업소 포함)당 약3개소 내외

(’13. 2월초 별도 담당자 회의 개최 예정)

사업완료 후 모니터링 및 관리방안을 수립하여 시행

첨부  1) 연도별 추진실적 1부.

2) ’13년도 사업대상지 위치도 및 현황사진 각1부.

3) 공원 색채디자인 가이드라인 1부.

4) 물품구매 및 공사발주시 특정제품 선정 절차개선(안) 1부.

5) 누수식 생태보 설명자료 1부. 끝.