투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(방송설비) 납품기한 연기 의뢰(관악산 저류조 통신공사)

우리부에서 시행중인 “관악산 저류조 통신공사”에 소요되는 관급자재의 납품기한을 다음과 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 납품기한 연기 의뢰

○ 건 명 : 관악산 저류조 방송설비 추가구매 설비

○ 납품기한 연기

납품요구번호 (계 약 번 호)	품 명	계약금액(원)	계약업체	납품기한
				당초	변경
12-14-2-41457-00 (00128276613)	방송설비 3종 (3자단가)	7,676,000	㈜인터엠	2014.12.30	2015.05.30

○ 연기 사유 : 관급자재 설치시기 미도래

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 보고서 및 합의서 각 1부.

2. 관급자재 계약현황 1부.  끝.

	설비부장
주무관	이재홍		녹색성장과장	김창균		설비부장	12/24 박기형
협조자	경리과장	허금도
시행	설비부-14757	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 설비부(15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/	hong2495@seoul.go.kr	/	대시민공개