투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이신설경전철주식회사 대표이사 귀하
(경유)
제목	우이신설 민간투자사업 공사지연에 따른 공정관리 강화 요청(2차)

1. 도시철도사업부-8143(2014.12.04.)호와 관련입니다

2. 우이신설 사업의 공기연장을 한 이후에 공정이 계속 지연(계획 54.27%, 실적53.42%, 대비 98.4%)되고 있어 위 호로 공정관리 강화 및 대책을 촉구하였으나 '14.12. 30일 자 공정지연이 심화(계획 56.02%, 실적 54.57%, 대비 97.40% 로 28일 만에 1.04% 추가 지연)되고 있을 뿐 아니라 공정계획상 12월 31일 완료하여야 할 구조물 완료일정도 미준수(1공구 : 본선 5개 및 정거장 4개소 , 2공구 : 본선 3개 구간, 3공구 : 본선 2개 구간) 함에 따라 후속 공종 공사추진 지연과 공사 적기 완공이 어려울 것으로 우려되고 있습니다.

3. 귀사와 우리시 간의 26.5개월 공기연장 합의 및 실시계획 승인한 이후 추가 발생되는 공사지연에 대한 책임을 전적으로 귀사에게 있음을 재차 알려드리는 바이며, 추가 공사 지연으로 인한 시민불편 및 사업성 악화 예방을 위하여 공정관리를 강화하는 등 특단의 대책을 수립하고 강력한 의지로 공정추진하여 적기 공사완공되도록 간곡히 요청합니다.

붙임 : 1. 공정보고 자료(2014.12.30 및 2014.12.2.) 1부.

2. 토목구조물 완료 일정 이행여부 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	안규홍		경전철1과장	박동룡		도시철도사업부장	12/31 이은상
협조자	주무관	위성환		주무관	김정수		주무관	임병관
경전철2과장	이승우
시행	도시철도사업부-8877	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 9층)	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7179	/전송	02-772-7305	/	workyes@seoul.go.kr	/	대시민공개