문서번호	기전과-55
결재일자	2015.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
차준원	채희준	01/05 최주용

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연기요청에 따른 검토 보고(용마터널)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01

성동도로사업소

(기 전 과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연기요청에 따른 검토 보고

교통안전시설물 원인자 부담공사 준공기한 연기 요청이 있어 관련서류 및 현장 확인후 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 용마터널 건설공사 중 교통안전시설물 설치공사

공사구간 : 중랑구 면목동 사가정길 일대

공사기간 및 지연사유

구분	공사기간		지연사유	비고
	변경 전	변경 후
신호	2011.01.14 ~ 2014.12.30	2014.04.15 ~ 2015.02.28	기상악화로 인한 절대공기 부족
표지

원인자 및 관련업체 현황

구분	시공	감리	설계	원인자
신호	㈜건영이앤씨	서울시강북감리	㈜영호이앤씨	에스케이건설(주)
표지	㈜현대표지	㈜영호이앤씨

Ⅱ		검 토 결 과

-교통안전시설물 설치에 대한「교통안전시설물 원인자부담공사」준공기한 연기요청 건에 대하여 검토 한바, 기상악화로 인한 절대공기 부족으로 상기공사에 대하여 준공기한을 연기 승인코자 합니다.

붙     임 : 1. 준공기한 연기요청 2부. 끝.