문서번호	도시철도계획부-384
결재일자	2015.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공정관리과장	도시철도계획부장	도시철도국장
이덕배	이윤권	박상돈	01/16 김준기
협 조

- 우이~신설 경전철 민간투자사업 -

통합 공정회의 개최 결과 보고

2015. 01.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『우이~신설 경전철 민간투자사업』

통합 공정회의 개최 결과 보고

우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업의 효율적인 관리와 원할한 사업추진을 위하여 월간 통합 공정회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : 2015. 1. 14(수) 13:30 ~ 15:30

○ 장    소 : 도시철도 3층 공용회의실

○ 참 석 자 : 총 35명

- 발  주  처 : 도시철도국장, 분야별 담당과장 및 업무담당

- 사업시행자 : 법인대표자, 건설사업단장

- 현장관리자 : 각 공구 현장대리인 및 책임감리원, 궤도 및 시스템

분야 책임감리원

□ 회의결과

○ 주요 회의내용

- 공사 추진사항 및 현안사항, 공정 만회대책 등 공정보고

- 공정 및 사업관리와 관련한 협조 및 지시사항 등 토론

- 사업추진에 따른 문제점 및 향후대책 등

○ 분야별 공정관리 보고내용(붙임 회의자료에 의함)

- 사업추진 총괄 보고 : 건설사업단장

- 각 공구별 공정보고 : 1~4공구 현장대리인

- 궤도 및 시스템분야 : 책임감리원

○ 분야별 협조 및 요구사항

- 사업기간 연장(2016.11.30.)에 따른 후속조치 조속 이행할 것.

· 상세공정표 제출(법인대표자)

· 상세공정표에는 기능실 층별 인계 등 세부공정 명시 요망

· 상세공정표에 의한 분야별 역 공정표 작성

- 시스템 분야 소요기간을 감안 분야별 인계 철저

* 2016년 1월부터는 영업시운전, 시험 등 필요

- 선행공정 지연으로 후속공정에 차질이 없도록 공정만회대책 수립

- 설계변경, 지하수 배출신고 등 행정처리 조속 이행

- 동절기 품질 및 안전사고 예방토록 현장관리 철저

○ 국장 지시사항

- 통합공정회의 취지에 부합하도록 회의자료를 충실히 작성할 것.

· 금일 회의 안건에 중요한 부진공정 만회대책을 소홀히 다루었음.

· 건설사업단장은 사업을 총괄한 현안사항 및 대책을 중점 보고할 것.

· 다음 회의는 2주 후(‘15. 1. 28)에 부진공정 만회대책을 보고

- 부진공정 만회대책 이행 철저

· 선행공정인 토목구조물 인계전이라도 후속공정에서 할 수 있는       공정을 발굴하여 추진할 것.

· 현장에서는 돌관작업 등 대책도 중요하지만 투입인력, 장비를 늘리는 방안 강구

- 상세공정표는 큰 틀에서 공정표를 작성하고 그 기준에 따라 세부공정 작성

- 동절기 품질 및 안전사고 예방 철저(금년도 부실벌점 강화 예정)

- 각 종 인·허가 사항이 누락되지 않도록 행정절차 이행 철저

□ 향후계획

○ 금회 회의결과 부진공정 만회대책 및 지시사항은 즉시 현장 이행

○ 다음 공정회의(‘15. 1. 28. 15:00) 개최(일정은 다소 변경될 수 있음)

붙임 : 회의자료 및 공정회의 사진 각 1부.  끝.