	우이-신설 경전철
	시스템공구 사업추진 현황 보고

2015. 1. 14.

도시철도설비부

(시스템 감리단)

월간 공정회의 자료(1월)

(보고일 2015. 1.14)

□ 공사명 : 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 시스템공구

□ 기  간 : 2014. 12.14 ∼ 2015. 1. 13

1. 공종 진도율                                              (Key-Event 단위공정 적용, 2016. 11. 30. 준공일 기준)

구 분	전월까지 ( 11.14～ 12.13 누계)			금 월 (12.14 ~ 1.13)			누 계 ( ～ 1.13누계)
	계 획	실 적	대 비 (%)	계 획	실 적	대 비 (%)	계획	실적	대비 (%)
평 균	22.80	21.98	95		-		22.80	21.98	95
송 변 전	25.94	20.00	77		-		25.94	20.00	77
전 차 선	19.99	19.99	100		-		19.99	19.99	100
통신/AFC	23.20	23.20	100		-		23.20	23.20	100
신 호	29.28	25.64	87		-		29.28	25.64	87
S E	28.57	14.27	50		-		28.57	14.27	50
차 량	18.20	18.20	100		-		20.00	18.20	100

※ 현재까지 상세공정표 미제출(`14.11.28. 제12차 실시계획변경 승인 조건임)

2. 주요 작업내용

구 분	전월 작업사항(11.24~12.13)	금월 작업사항(`14.12.14 ~ `15.1.13)
송변전	○ 한전쌍문변전소~ 차량기지S/S 수전선로 도로굴착공사 (총 1,269m 중 1,123m, 맨홀6개소) ○ 한전미아변전소~L07 S/S 수전선로 도로굴착공사 (총 1,425m 중 486m, 맨홀2개소) ○ 변전장비제작(차량기지)	○ 한전쌍문 및 미아변전소~ 차량기지변전실 및 L07변전 실 수전선로 도로굴착공사 일지중지(~‘15.2말) ○ 변전장비제작(차량기지)
전차선	○ 제3궤조 전차선로 공장검수준비(궤도 시공구간 및 1공구 1차 반입 물량) ○ 전차선분야 애자 공장검수	○ 제3궤조 전차선로 공장검수(궤도 시공구간 및 1공구 1차 반입 물량, `14.12.16)
통신/ AFC	○ 차량통신설비 설치지원(창원공장) ○ L02 정거장 하부 슬라브 상하선 횡단배관 시공 ○ AFC분야 한국스마트카드와 계약완료(`14.12.12)	○ 차량통신설비 차량 초도편성 완성차(철기연) 입회시험(현대로템 창원공장) ○ L01정거장 하부 스라브 상하선 횡단배관 시공 ○ AFC 장비(발매기 등)디자인 2차 시안 검토(1.6)
신 호	○ 차상신호장치(#11~18편성) 철기연시험 및 공장시험 ○ 차량기지 신호기계실 장비 공장시험완료 ○ 차량기지 종합관제실 소프트웨어 공장시험계속	○ 차상신호장치(#11~18편성) 공장검수완료(`14.12.17) ○ 차량기지 신호기계실장비 공장검수시행(`15.1말) ○ 차량기지 종합관제실 소프트웨어 공장시험계속 ○ 현대로템 차량공장내 완성차 시험선 신호설비 구축중 (신호기기실, 지상신호장치 설치공사)
S E	○ 시스템엔지니어링 성과물 작성 및 검토[총9건] - 작성완료 : 5건, 작성진행 : 4건 - 차량/통신/송변전/전차선 분야 SE 성과물 완료 - 신호분야 SE 성과물 개정 진행 중	○ 시스템엔지니어링 성과물 작성 및 검토[총9건] - 작성완료 : 5건, 작성진행 : 4건 ○ 인터페이스 협의자료 개정 ○ 신호분야(안살도STS사) SE 성과물 개정준비
차 량	○ 케이알이엔씨(주) 차량 제작검사(입고,공정)계속 ○ 철도기술연구원 성능시험(완성차 검사)계속 - 형식 31개 항목 중, 12개 항목완료(39%) - 완성차 공장시험선 구축 진행	○ 케이알이엔씨(주) 차량 제작검사(입고, 공정)계속 ○ 철도기술연구원 성능시험(완성차 검사)계속

※ 전월 공통사항 : 선행공정과 병행할 수 있도록 자재발주 시기 및 제작공정일정조정

3. 공사추진 지장원인(중복체크 가능)

보상지연	민원발생	하도업체 부 도	공법변경	지장물 발 생	자재수급 차 질	시 방 변경설계	인력장비 부 족	기 타
없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

4. 현안사항(협조 요청)

구 분	현 안 사 항(문제점)	대 책
공통	○ `14.11.28. 제12차 실시계획변경 승인 조건인 상세공정표 미확정(실질적인 공정관리 기준 부재) ○ 후속공정 시스템분야 절대공기 부족	○ 토목․건축 분야와 협의 승인된 전체공정표 제출 촉구 - 시스템공구 자체 역공정표 작성 완료(타공구와 협의중) ○ 선 작업 가능구간 병행작업 시행 검토 - 차량기지 종합관리동 1~3층 각종 배관 설치 중
송변전/ 전차선	○ 각 정거장 전기실 배전장비 반입ㆍ설치일정 미확정⇒ 변전실 5개소 변전장비 반입ㆍ설치 지연 예상 ○ 궤도공사 미착공으로 차량기지 유치선 제3궤조 전차선로 착공 지연	○ 정거장 일반전기 장비와 동시 설치 요청 - 배전장비 제작업체 계약 조속 추진 필요 ○ 궤도 시공구간 전차선 작업연장 1Km 단위로 확보 요청
통신	○ 통신/AFC 설비 제작규격서 승인 완료(`14.09.19) ○ 차량통신설비 18편성분 전량납품 완료(`14.10.17) ○ AFC설비 ㈜한국스마트카드와 계약완료(`14.12.10)	○ 통신분야 공정의 지연이 없도록 추진 중 - 누설동축케이블 앙카작업 등 병행공사 검토 - 차량통신설비 완성차 시험 중(2편성 완료) - AFC설비 등 통신설비 제작 중
신호	○ 기능실 인도지연으로 차량기지, 신호기계실 공정지연 - 차량기지 신호기계실장비(36대) 자체시험완료 ○ 차상신호설비 18편성분 전량납품완료(`14.12.30)	○ 차량기지 신호기계실 외산장비 검수(1월)후 반입시까지 국내 조립공장 창고 보관 협의 ○ 궤도 및 제3궤조 시공전 케이블트레이 앙카작업 등 시공 검토(사전 공법 및 병행 시공 검토 중)
SE	○ 토목공구 기계(PSD)분야 하도급계약 지연으로 제작설계 단계 검토 및 성과물 작성 지연	○ 토목공구 기계(PSD)분야 하도급계약 조속 추진
차량	○ 초도편성 반입일정 지연예상(`15. 4E→6E)	○ 차량기지 차량반입조건(변전실 급전, 환기실 가동 등)을 위한 건축 기능실 인계 조속 추진 필요

※ 공통 현안사항 : 선행공정과 병행할 수 있는 시스템분야 각종 공법 지속적 검토