문서번호	정보자원운영과-232
결재일자	2015.1.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
박종순		김영숙	01/16 이계헌
협조	기획관리과장		이강옥
	인터넷통신과장		김진하

-2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템 보강사업- 완료보고회 개최 계획

2015. 1.

데이터센터

[정보자원운영과]

- 2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템보강사업 -

완료보고회 개최 계획

「2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템보강」사업 완료 보고회를 개최하여 센터 분야별 담당자 및 업무부서 담당자와 사업 수행결과를 공유 하고자 함

1	완료보고회 개요

○ 일  시 : 2015.1.21(수) 15:00 ~ 16:30

○ 장  소 : 데이터센터 4층 회의실

○ 참  석 : 30명내외

- 데이터센터 : 소장, 각 과장, 업무분야별 주무관

- 세  무  과 : 세무과장, 세외수입팀장, 업무분야 주무관

- 사  업  자 : 쌍용정보통신㈜ 사업 수행인력

○ 주요 보고내용

- 사업수행부문

· 시스템 구축 : 백오피스(내부행정, 민원행정), 프론트오피스 시스템 H/W, S/W 구축 및 설치, 가상화스토리지 이관, 세외수입종합징수시스템 재해복구시스템 구축 등

· 서비스 이관 : 세외수입종합징수시스템 서비스(AP), 연계서비스 이관, 성능 최적화 컨설팅

· DB이관 : 메일DB, 일자리플러스DB, 세외수입종합징수DB

· 성능 최적화컨설팅 : 세외수입종합징수시스템

- 사업관리 : 수행일정, 품질보증 활동, 교육훈련 등

○ 진행일정

시 간	진행 내용	진행
15:00 ~ 15:20	․ 참석자 소개 및 사업추진결과보고	사업담당자
15:20 ~ 16:10	․ 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템 보강 사업수행 결과 보고	수행업체 (PM)
16:10 ~ 16:20	․ 토론 및 질의응답	참석자
16:20 ~ 16:30	․ 인사말씀

2	사업 개요

○ 사 업 명 : 2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템보강

○ 사업기간 : 2014.07.29 ~ 2015.01.25.(180일간)

○ 계약금액 : 6,580백만원

○ 계약업체 : 쌍용정보통신(주)

○ 사업내용 : 21개부서 26개사업 IT인프라 구축

- 유닉스 통합서버 2식 신규 도입 및 파티션 증설

- 소형서버 7식 신규 도입 : 가상서버 2식, 윈도우서버 2식, 리눅스서버 3식

- 블레이드 서버 5식 및 블레이드 새시 1식 신규 도입 : 리눅스서버 4식, 윈도우서버 1식

- 스토리지 증설 : 업무관리 스토리지 가용량 50TB, 통합스토리지 가용량 13TB, 가상화통합스토리지 가용량 3TB, 세외수입스토리지 가용량 30TB, 정보소통광장 홈페이지 유지관리 및 기능 보완 스토리지 48TB

- 신규스토리지 3대 도입 : 문서공개시스템 업무용 NAS스토리지 가용량 32TB, 민원행정 가상화통합스토리지 가용량 20TB, 서울일자리플러스센터 전산망 고도화 전용 스토리지 가용량 4TB

- 백업장비 라이브러리 1식(LTO5 22) 신규 도입 및 드라이브 11개(LTO4 4, LTO5 7) 교체/증설

- 백업용스토리지 증설 : 42TB 증설

- DBMS, 성능 모니터링 S/W, 업무용 패키지, 백업 등 S/W 구입 및 서비스 이관, 이중화 구성 등

- 세외수입종합징수시스템 AP이관 및 이중화, DB 성능최적화

○ 추진경과

- 기본계획 수립(단장방침)                   : ’14.03.12

- TFT 운영계획                             : ’14.03.18

- 입찰공고                                   : ’14.06.02~07.03

- 계약체결                                   : ’14.07.29

- 착수보고회                                : ’14.08.18

- 장비 설치계획                             : ’14.09.05

- 유닉스통합서버 성능 시험계획              : ’14.09.16

- 가상화통합서버 재구성 계획                : ’14.09.16

- 가상화스토리지 이관 계획                  : ’14.09.29

- 통합메일DB서버 이관 계획                 : ’14.10.08

- 일자리플러스 DB서버 이관계획(인터넷통신과) : ’14.10.08

- 세외수입 DR장비 교체 설치 계획           : ’14.11.14

- 물품부분검사실시                          : ’14.11.28

- 세외수입종합징수시스템 신규장비로 전환(이관) 및 운용계획(세무과)                          : ’14.12.15

- 세외수입종합징시스템 인프라개선에 따른 재난복구 모의훈련계획(세무과)                      : ’15.01.13

3	향후 계획

○ 완료보고회 결과 보고        : 2015.  1월

○ 최종검수                    : 2015.  1월

○ 세외수입 서비스 안정화      : 2015.  1월 ~ 2월

붙임 : 2014년 정보자원 통합인프라 구축 사업대상 부서현황 1부.  끝.