문서번호	시설보수과-229
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일	이용재	01/21 민승기
협 조

- 도림천1복개외 1개소 정밀안전진단용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2015. 1.

남부도로사업소

(시설보수과)

- 도림천1복개외 1개소 정밀안전진단용역 -

준공기한 연기 검토 보고

도림천1복개외 1개소 정밀안전진단용역 추진과 관련 장마철 집중호우, 서초구청 복개구조물 공사 등 현장조사 지연 및 철근 실측(파취)에 따른 구조해석 재검토 등 용역수행업체로 부터 용역기한 연기 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 도림천1복개외 1개소 정밀안전진단 용역

○ 용역기간 : 2014. 5. 2. ~ 2015. 1. 26.

○ 용 역 비 : 247,959,000원

○ 용 역 사 : ㈜진화기술공사 대표 차선숙외 1개사

□ 보고내용

○ 근 거 : ㈜진화기술공사 진화 2015-41호 (2015.1.20)

○ 준공기한 연기 사유

- 장마철 집중호우시 복개 내부 수위 상승 및 서초구청 사당천복개구조물

바닥 경사로 조정공사로 인한 현장조사기간 지연

- 기존 진단 구조해석시 적용한 철근과 복원도면상 철근이 상이 하여 실측(파취)을 통한 재검토 기간 소요

- 정밀한 시설물 공용내하력 평가 및 내실있는 진단결과 보고서 작성을 위하여 용역기간을 2015. 2. 28일까지 연장 필요

○ 준공기한 연기 요청사항

- 당 초 : 2014. 5. 2. ~ 2015.  1. 26.

- 변 경 : 2014. 5. 2. ~ 2015.  2. 28. (증33일)

□ 조치의견

○ 진화기술공사(주) 연기 요청사항에 대하여 검토한 바,

- 장마철 집중호우 및 서초구청에서 시행한 사당천 복개 공사로 인한 현장 조사 지연

- 정확한 구조해석을 위한 실측(파취)시행과 재검토 기한 필요 등 용역기한 연장이 필요한 것으로 사료되고,

- 내실있는 과업 수행을 위하여 용역기간을 2015. 2. 28일까지 준공 기한을 연기하고자 합니다.

□ 행정사항

○ 준공기한 연기의뢰 ⇒ 시 재무과 (관리단속과 통보)

- 준공기한 연기내용

∙ 당 초 : 2014. 5. 2. ~ 2015.  1. 26.

∙ 변 경 : 2014. 5. 2. ~ 2015.  2. 28.

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 준공기한 연기요청 서류 1부.  끝.