문서번호	건축부-960
결재일자	2015.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		건축관리과장	건축부장
전재진		곽동호	전결 01/27 김우성
협조
	경리과장		허금도

-서울거리예술창작센터 건설폐기물 처리용역- 준공기한 연장 검토 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

도시기반시설본부

건 축 부

건설폐기물 처리용역 준공기한 연장 검토보고

(서울거리예술창작센터 조성공사)

『서울거리예술창작센터 조성공사』건설폐기물 처리용역과 관련하여 진출입로의 아스콘 포장을 위한 평삭작업 후 건설폐기물 처리에 따른 용역기간 연장 보고.

□ 사업 개요

○ 용 역 명 : 서울거리예술창작센터 조성공사 건설폐기물처리용역

○ 위    치 : 서울시 광진구 광장동 17번지 일대

○ 용역규모

- 구 분

․ 건설폐재류 433Ton

․ 폐콘크리트 683Ton 등

- 내 용 : 서울거리예술창작센터 조성공사 관련 폐기물 수집운반 및 처리

○ 용역기간 : ‘14.10.29 ∼ ’15.2.5(용역기간 : 착수일로부터 100일)

○ 용 역 자 : 하늘환경 외1

○ 용 역 비 : 50,422천원

□ 추진경위

○ ‘14.10.10 : 건설폐기물 처리용역 계약 의뢰

○ ‘14.10.29 : 용역계약 및 착수

□ 용역기간 연장검토

○ 용역기간 연장사유

- 진출입로 아스콘포장을 위한 평삭작업 지연으로 인한 폐기물처리 용역기간 추가필요

○ 용역기간 변경내용

- 당초 : ‘14.10.29~’15.2.5.

- 변경 : ‘14.10.29~’15.3.31. 증)54일

○ 용역비 변경내용 : 변경없음

○ 귀책사유 : 우리본부

○ 처리의견

- 용역기간 연장은 타당하다고 사료되며, 상기와 같이 용역기간 연장하여 계약변경코자 함

□ 향후 추진계획

○ ‘15.3.15 : 건설폐기물처리용역 완료

○ ‘15.3.31 : 건설폐기물처리용역 준공. 끝.