2015년 설명절 점검대비 설비부 공사계약 현황

[열빛총괄과]

구분	사 업 명	규 모	공정율 (%)	사업기간	현장대리인 (연락처)	책임감리원 (연락처)	공종	담당자	비고
1	장충체육관 리모델링 공사	지하2층/지상3층 연면적 11,429m2	99	'12.07~ '15.01	임영수 (*************)	박영민 (*************)	기계	이종근
					김연호 (*************)		전기	김은덕
					김일태 (*************)		통신	김은덕
2	구리암사대교 건설공사	가로등 736본 경관조명등 1,656등	92	‘10.07~ ‘15.06	-	우재경 (*************)	기계	-
					이동진 (*************)		전기	김은덕
3	강남순환 도시고속도로(4공구)	가로등 225본, 지하차도등 155등, 경관조명 1식	43	‘01.12~ ‘16.05	-	장경식 (************)	기계	장석춘
					성기화 ((*************)		전기	곽용길
4	강남순환 도시고속도로(8공구)	L=3km, 지하차도 4개소 구룡지하차도 지하차도등 968등, 가로등 85본	77	‘07.07~ ‘18.07	-	최태규 (*************)	기계	장석춘
					용필헌 (*************)		전기	곽용길
5	잠원2 빗물펌프장 신설공사	유수지 용량 15,000m3, 펌프 6대, TR 4,500kVA	-	'13.01~ '15.12	이재경 (*************)	임재영 (*************)	기계	추한영
					문상운 (*************)		전기	곽용길
6	염창2 외 1개소(방화) 빗물펌프장 증설공사	염창-유수지 11,000m3, TR 4000kVAx2 방화 유수지 8,400m3, TR 2,500kVAx2	95	'13.01~ '15.02	김학수 (************)	정환기 (*************)	기계	추한영
					박성하 (*************)	최의영 (*************)	전기	곽용길

[환경설비과]

구분	사 업 명	규 모	공정율 (%)	사업기간	현장대리인 (연락처)	책임감리원 (연락처)	공종	담당자	비고
9	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업	분뇨처리 4,000톤/일 신설(지하화 및 상부공원화)	30	2012.11~ 2015.07	김진규 (*************)	장철옥 (*************)	기계	이호기	턴키 (주관)
							전기(통신)	박시현
10	마곡지구 재생수 공급사업	1, 2단계 18,000톤/일 (총20,000㎥/일)재생수 공급	79	2011.11~ 2016.06	-	김봉주 (*************)	기계	-	공사 중지 중
					한재연 (************)		전기	박시현
11	선사로~고덕지구간 도로확장 공사	총연장 3,720m 가로등 279등 중계펌프장 1개소	48	2009.01~ 2016.01	-	조석기 (*************)	기계	-
					유용식 (*************)		전기	김현욱
12	겸재교 건설 및 연결도로 확장 공사	총연장 1,085m 가로등 122등 야간경관조명 1식	73	2008.10~ 2015.12	-	이봉우 (************)	기계	-
					김영규 (*************)		전기	김두환
13	남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사	지하차도 706m 터널등 903등 가로등 109등	80	2009.08~ 2015.07	-	탁승국 (************)	기계	-
					우성오 (*************)		전기	김현욱
14	천호대로(광나루역) 확장 공사	도로폭 6차로→10차로 총연장 900m 지하차도 580m 포함	60	2010.09~ 2015.12	-	정하설 (*************)	기계	-
					박현선 (*************)		전기	김두환
15	경의선 숲길 공원조성 공사	공원등 302등 경관조명 2096등 방송설비 및 CCTV설비 1식	40	2013.09~ 2016.03	-	정은호 (*************)	기계	-
					황인용 (010-05-2161)		전기	김현욱
					이재형 (*************)		통신	김현욱
16	서울 거리예술센터 조성 공사	서울 거리예술센터 문화공간 조성	66	2014.10~ 2015.02	최승규 (*************)	진동종 (*************)	기계	김도형
					김재만 (*************)		전기	김두환

[건축설비과]

구분	사 업 명	규 모	공정율 (%)	사업기간	현장대리인 (연락처)	책임감리원 (연락처)	공종	담당자	비고
17	서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로설치 공사	-보행광장 구조물 4,405[eqn: m ^{2}] -경사로 4개소/하부조명설치	67	‘13.05~ ‘14.10	문상필 (*************)	양희만 (*************)	기계	김경남
					이동진 (*************)		전기	배수웅
18	송정 사근 빗물펌프장 증설공사	-펌프 308[eqn: m ^{3} /min][eqn: TIMES]2 (송정) 펌프 510[eqn: m ^{3} /min][eqn: TIMES]2 (사근)	98	‘13.01~ ‘14.12	김준배 (*************)	최완전 (*************)	기계	김경남
					강동호 (*************)	성정모 (*************)	전기	배수웅
19	고척교 확장 공사	-교량확장 폭52.5m/연장203m -차로확장 8차로→10차로 -보도폭확장 4m→15m	67	‘10.10~ ‘14.10	-	홍원돈 (*************)	기계	-
					이동진 (*************)		전기	배수웅
20	경춘선 폐선 부지 공원조성공사(1단계)	-면적 48,170[eqn: m ^{2}] -연장 1.9km	86	‘13.10~ ‘15.01	-	윤상철 (*************)	기계	-
					김영주 (************)		전기	박병환
					안병호 (		통신	박병환
21	성암로 병목구간 확장공사	-도로확장 2차로→4차로 -연장 400m	8	‘14.04~ ‘15.05	-	이윤재 (*************)	기계	-
					고흥진 (*************)		전기	박병환
22	신사사거리~고양시간 도로개설공사	-4차로 개설 L=1,077m B=25m(터널366m) -등기구 580개/수배전반 10면	63	‘14.08~ ‘15.12	-	한광원 (*************)	기계	-
					서준호 (*************)		전기	박병환

[녹색성장과]

구분	사 업 명	규 모	공정율 (%)	사업기간	현장대리인 (연락처)	책임감리원 (연락처)	공종	담당자	비고
23	방화대교 남단 접속도로 공사	수전설비 450kva 터널등1,011조 설치	92	`05.10.5~ `15.10.31	-	김형기 (*************)	기계	-
					권현태 (*************)		전기	이기철
24	응봉교 확장 및 성능개선 공사	교량확장 4차로→6차로	6	`08.10.20~ `15.12.31	-	김종철 (*************)	기계	-
					서정인 (*************)		전기	신정규
25	신이문 빗물펌프장 설치공사	흡수정 용량증설 1,200㎥	50	`03.1.3~ `15.2.28	원용준 (*************)	조현효 (*************)	기계	양우창
					김홍식 (************)		전기	이기철
26	공릉 빗물펌프장 설치공사	흡수정 용량 2,722㎥	30	`03.1.8~ `15.6.30	원용준 (*************)	조현효 (*************)	기계	양우창
					김종인 (02-2207-8915)		전기	이기철
27	서울과학관 건립공사	지하1층/지상3층, 연면적 12,330.81㎡	5	`04.1.13~ `16.1.12	김수태 (*************)	이경용 (*************)	기계	이상협
					권오준 (*************)		전기	이기철
					이순국 (*************)		통신	이기철
28	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	빗물저류조 65,000㎥	60	`12.6.13~ `15.5.30	이상춘 (*************)	김성곤 (*************)	기계	양성구
					신대식 (*************)		전기	신정규
					전승태 (*************)		통신	신정규
29	율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선공사	연장 L=600m 폭원 B=28.2~30.7m	5	`10.10.11~ `15.6.30	-	손기수 (*************)	기계	-
					양동관 (*************)		전기	신정규
					서용한 (*************0		통신	신정규
30	서부권 한양도성 안내쉼터 조성공사	쉼터 140㎡ 조명설치 1식	5	`14.12.12~ `15.4.30	이종권 (449-6673)	-	기계	-
							전기	이기철

[시책사업과]

구분	사 업 명	규 모	공정율 (%)	사업기간	현장대리인 (연락처)	책임감리원 (연락처)	공종	담당자	비고
31	동부간선도로 확장 1공구 건설공사	동부간선도로(월계1교~녹천교) 1.4km 및 초안산지하차도 전기설비	19	‘08.12.29.~ ‘16.12.31	-		기계	-	공사 중지 중
							전기(통신)	김원태
					서창환 (*************)
32	동부간선도로 확장 2공구 건설공사	동부간선도로(녹천교~상계교) 3.2km 및 녹천,도봉 지하차도 기전설비	1.4	‘08.12.29.~ ‘15.12.30	-	김용균 (*************)	기계	-
					김준모 (*************)		전기(통신)	김원태
33	동부간선도로 확장 3공구 건설공사	동부간선도로(상계교~의정부시계) 2.25km 및 상도, 장암지하차도 기전설비	28	‘08.06.26.~ ‘15.12.31	-	김구환 (*************)	기계	-
					김도훈 (*************)		전기	김원태
34	남부순환로~오정대로 삼거리간 도로개설 공사	폭 8차로, 연장1.1km	0	‘10.11.29～ ‘15.12.31	문정주 (*************)	정하설 (*************)	전기	유영선
35	중동 빗물펌프장 증설공사	수전용량 1,500kw 배수펌프 260kW×1대, 135kW×1대	60	‘13.04.15～ ‘15.04.30	배요한 (*************)	임형도 (*************)	기계	조기성
					최광일 (*************)	김길용 (*************)	전기	김홍석
36	용두3 빗물펌프장 신설공사	수전전력 499kva 배수펌프 120kw 등 3대	0	‘13.04.15～ ‘16.04.30	배요한 (*************)	임형도 (*************)	기계	조기성	미착공 (사업계획 변경)
					최광일 (*************)	임경민 (*************)	전기	유영선
37	합정 빗물펌프장 증설공사	수전전력 2,000kva 배수펌프 207kw 등 5대	0	‘13.04.15～ ‘16.04.30	배요한 (*************)	임형도 (*************)	기계	박경철	미착공 (보상지연)
					최광일 (*************)	김길용 (*************)	전기	유영선
38	돈화문로 국악예술당 건립공사	지하3층/지상1층, 총면적 1,760.38㎡	0	‘13.12.23～ ‘15.06.22	오우열 (*************)	이한원 (************)	기계	박경철	미착공
					임명수 (*************)		전기(	유영선
					정윤제 (*************)		통신	유영선
39	양천주민편익시설 증축 및 리모델링 공사	지하3층/지상3층 연면적 6754.02㎡	1	‘14.12.15～ ‘16.06.14	엄재경 (*************)	이형복 *************	기계	조기성
					김용욱 (*************)		전기	유영선
					송광수 (*************)		통신	유영선