문서번호	시설보수과-629
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
나철흠		박용선	02/04 송상영
협 조
	시설기획팀장			김준섭
	교량관리팀장			손수희
	주무관			김종범
	주무관			정병윤
	주무관			조장호
	주무관			한상신

2015년도 예산사업(공사•용역) 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.2.4

동부도로사업소

(시설보수과)

2015년도 예산사업(공사•용역) 시행계획

2015년도 발주대상 사업(공사∙용역)에 대한 세부추진계획을 수립하여 효율적 업무추진으로 계획된 일정에 따라 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업개요

연번	사 업 명	사 업 내 용	예산액 (천원)	비고
합계	8 건		4,146,397
공사	2015도로시설물 일상유지보수공사(연단)	-아스콘포장52a, -교면방수2,735㎡ -콘크리트표면840㎡-단면보수420㎡	1,913,000 (33,000)	(폐기물)
	광평교 보수공사	-아스콘포장46a,-교면방수4,600㎡ -신축이음126m, -배수관설치 317m	634,000 (7,000)	(폐기물)
	탄천2교 보수공사	-아스콘포장90a, -신축이음60m -콘크리트 단면보수 700㎡	934,000 (25,000)	(폐기물)
용역	삼성교 외 8개소 정밀점검	-삼성교,대곡교,가락지하차도,잠실호수교,헌릉교,장지1교,오륜교,상일2교(석촌지하차도)	152,080
	매봉터널외 3개소 자체정밀점검	-매봉터널,대칙,영동3교,성내교	31,317
	헌릉교 외1개소 성능개선 실시설계	-헌릉교, 신내교(성동도로)	100,000
	2014 폐기물처리용역	-탄천2교,광평교보수공사,일상유지	65,000
	2015 도로시설물 세척용역	-터널3개소,석촌지하차도	317,000

Ⅱ		추진계획

추진목표

❍ 『일상유지보수(연간단가)』 관련사업은 즉시 보수•정비 체계확립으로 안전한 유지관리와  시민불편 해소

❍ 회계년도 폐쇄기한 변경(12.31)에 따라 조기발주로 원활한 사업추진 도모

사업추진에 따른 현안 및 조치계획

❍ 우리사업소에서 2014. 11월 강동구 강일지구내 SH공사로부터 인수된 고덕교, 강일육교에 대하여 2015년도 정밀점검 대상교량이나 용역비 미 반영됨

❍ 2015년도 발주예정인 정밀점검용역(또는 자체점검)에 포함하여 시행하고 소요예산은            『석촌지하차도』정밀점검용역비(21,125천원)로 대체 발주코자 함.

※ 석촌지하차도 정밀점검용역은 현재 시행중인 긴급 정밀안전진단용역시행으로 대체코자 함.

(관련근거:시특별 제6조1항 및 제9조제2항 별표1의2-시설물의안전점검 및 정밀안전진단지침)

사업별 세부추진계획

사 업 명	예산액 (천원)	사업기간	담당자	비 고
	4,146,397
2015도로시설물 일상유지보수공사(연단)	1,913,000	2015.2.1~12.31	나철흠/한상신	※고덕교,강일육교는 타당성심의 완료후 발주
광평교 보수공사	634,000	2015.2.1.~8.30	김종범
탄천2교 보수공사	934,000	2015.2.1.~8.30	정병윤
삼성교 외 8개소 정밀점검	152,080	2015.2.1.~10.30	조장호
매봉터널외 3개소 자체정밀점검	31,317	2015.3.1.~8.30	정병윤
헌릉교 외1개소 성능개선 실시설계	100,000	2015.3.1.~8.30	김종범
2015 폐기물처리용역	65,000	2015.2.1.~12.31	한상신
2015 도로시설물 세척용역	317,000	2015.2.1.~12.31

※ 고덕교, 강일육교 정밀점검은 타당성 심사완료후 통합발주 시행

향후 추진일정

❍ 2015.02.05.~02.20 : 현장조사 및 설계

❍ 2015.02.04.       : 고덕교, 강일육교(정밀점검) 타당성심의 요청

❍ 2015.02.20        : 공사 계약심사 의뢰

❍ 2015.03.05        : 공사(용역)발주

Ⅲ		행 정 사 항

예산과목(도시개발특별회계)

❍ 일상유지보수공사/도로시설물세척용역/정밀점검용역/

- 도시안전본부 도로시설과, 도로시설관리(정책), 터널시설관리(단위)

•도로시설물(터널.복개.지하차도.세척) 일상유지보수, 시설비 및 부대비(시설비)

- 도시안전본부 도로시설과, 도로시설관리(정책), 도로시설물운영(단위),

•시설물안전점검 및 진단(세부사업), 시설비 및 부대비(시설비)

•도로시설물 안전자문단운영(세부사업), 사무관리비

□ 일상유지보수공사/단일공사/폐기물처리용역/

- 도시안전본부 교량안전과, 교량관리(정책), 일반교량관리(단위),

•도로시설물(교량) 일상유지보수(세부사업), 시설비 및 부대비(시설비)

•광평교 보수공사(세부사업)/탄천2교 보수공사(세부사업), 시설비 및 부대비(시설비)

붙임 : 사업별 위치도 1부.  끝.