투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업』 설계변경(총괄10회, 9차 2회) 시행

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화』설계변경(총괄 10회, 9차 2회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

2. 공사규모 : 고도처리 시설개량 88만톤/일, 시설 현대화 25만톤/일 등

3. 계약금액 : 총괄 305,962백만원(9차 38,793백만원)

4. 공사기간 : 전체 ‘09.02.13~’15.02.28(9차 ‘14.03.17~‘15.02..18)

5. 시 공 사 : 지에스건설(주) 외 3개사

6. 변경사유 : 실정보고 승인사항 반영 등

7. 예산과목 : 하수도사업특별회계, 물관리정책관 물재생시설과, 물재생시설 개선 및 관리, 물재생시설개선, 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업, 시설비 및 부대비, 시설비

8. 설계변경내역

(단위 : 천원)

차 수	구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 괄	공사기간	2009.02.13 ∼ 2015.02.28	2009.02.13 ∼ 2016.02.28	12개월
	도 급 비	305,962,000	322,005,000	16,043,000	총인처리시설반영
9 차	공사기간	2014.03.17 ∼ 2015.02.18	2014.03.17 ∼ 2015.02.18	변경없음
	도 급 비	38,793,868	38,793,868	변경없음

붙임  1. 설계변경검토 보고서.

2. 설계변경 내역서(총괄 10회, 9차 2회).    끝.

	방재시설부장
주무관	송민영		환경시설과장	윤방식		방재시설부장	02/06 임춘근
협조자	주무관	조양호		경리과장	허금도
시행	방재시설부-1602	(		)	접수		(		)
우	100-191	서울 중구 덕수궁길15 (서울시 서소문별관 2동2층)	/
전화	02-3708-8783	/전송	02-3708-8756	/	songmy01@seoul.go.kr	/	대시민공개