문서번호	급수운영과-3186
결재일자	2015.2.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
강재성		김광운	02/09 최명익
협조

설계변경(3차) 심의결과 보고

(2014년 동부수도사업소관내 포장도로굴착복구공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

동부수도사업소

(급수운영과)

2014년 동부수도사업소 관내포장도로굴착복구공사

설계변경(3차) 심의결과 보고

우리사업소에서 시행중인 2014년 관내 포장도로굴착복구공사에 대한 설계변경(3차)심의를 완료하고 그 결과를 보고드림.

□ 설계변경 개요

가. 공 사 명 : 2014년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속)

나. 공사기간 : 2014.05.22 ~ 2015.05.31

다. 설계변경 금액 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
도 급 액	**************	**************	변동없음

□ 심의내용

가. 일    시 : 2015. 2. 9(월) 11:00

나. 심 의 자 : 급수운영과장외 5명

다. 심의내용

∘ 물량 증∙감 발생에 따른 설계변경의 타당성 검토

□ 심의결과

∘ 위 검토내용에 대하여 심의위원 모두 적정하다는 심의의견을 제시함.

□ 조치의견

∘ 위와 같이 설계변경 심의위원회 개최결과 심의 의견이 모두 적정하므로,이를 설계변경에 반영하여 본청 재무과에 변경계약 의뢰 하고자 합니다.

첨부 : 1. 설계변경 심의의결서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.