문서번호	조경과-2082
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경관리팀장	조경과장
박찬홍		조윤래	02/16 이원영
협조

- 도시구조물 벽면녹화 사업 -

사업 대상지 변경 요청 건 검토보고

2015. 2

푸른도시국

(조 경 과)

- 도시구조물 벽면녹화 사업 -

사업 대상지 변경요청 건 검토보고

송파구청으로 부터 ‘2015년 도시구조물 벽면녹화 사업’ 대상지 변경 요청이 있어 검토하고 보고합니다.

□ 사업개요

○ 위치/규모 : 송파구 석촌동 199(백제고분로)/ 20㎡, 80m

○ 사업기간 : 2015. 2.~ 2015. 6.

○ 사 업 비 : 금52백만원

○ 사업내용 : 석촌지하차도 구조물 옹벽 벽면녹화

□ 변경 요청사항

구 분	위 치	관리	사업내용	변경사유
당 초	백제고분로	시관리	석촌지하차도 구조물 옹벽 벽면녹화	지하차도 긴급 보강공사로 인해 사업시행이 불가
변 경	중대로	시관리	시관리 도로변 옹벽구조물 벽면녹화	2015년 대상지로 변경

□ 변경 대상지 검토결과

○ 중대로(시도로)의 도로변 옹벽 구조물로서 오금역에서 교차되는 오금로변 옹벽에는 이미 벽면녹화가 되어 있어 옹벽 녹화의 연장을 위해 도시구조물 벽면녹화 사업의 대상지로 적합

□ 보고자 의견

○ 2015년 도시구조물 벽면녹화 사업의 대상지를 변경 요청한 것으로 사업의 필요 및 시급성을 감안할 경우 변경사유가 타당하고

○ 도시구조물 벽면녹화 사업의 변경 대상지와 사업내용이 적합하므로 변경 승인하고자 함.

붙임 : 사업대상지 변경 요청서 1부.  끝.