내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 교통안전시설 설치공사 감리용역(강북,강남) 설계변경(정산) 시행

1. “2014년 교통안전시설 설치공사 감리용역(강북,강남)”건에 대하여 다음과 같이 설계변경(정산)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 교통안전시설 설치공사 감리용역(강북, 강남)

나. 계약상대자

- 강북지역 : ㈜건영이앤씨, 대표 박준범

- 강남지역 : ㈜영호이앤씨, 대표 정숙영

다. 설계변경 사항

- 용역기간

․ 당초 : ‘14.3.25 ~ ’15.2.28

․ 변경 : ‘14.3.25 ~ ’15.2.16

- 계약금액

지 역	당 초	변 경	증․감	비 고
강 북	123,664,000	105,480,000	감)18,184,000
강 남	122,280,000	104,300,000	감)17,980,000

라. 설계변경 사유 : 동절기 사업기간 단축에 따른 용역기간 변경 및 감리원 투입인원 조정에 따른 금액변경(감액)

마. 예산과목 : (부서)교통운영과, (정책)도시교통체계 및 소통개선

(단위) 노면표지선 도색 및 제거(감리비 202-401-02),

교통안전표지 설치 및 개선(감리비 202-401-02)

따로붙임 : 1) 감리용역 설계변경(정산) 보고 방침서 1 부.

2) 설계내역서(변경) 각 1부.

3) 감액 합의각서 각 1부 끝.

주무관	최기문		교통시설팀장	최정규		교통운영과장	02/16 강진동
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	교통운영과-2998	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개